■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
건축위원회 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2023.4.21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [ ○ ] 해체
건축주	성명(법인명) ㈜에어퍼스트
대지현황	대지위치 군산시 소룡동 47-12
	대지면적 11,913.6㎡		용도지역(지구,구역) 전용공업지역
해체건축물현황	주용도 공장		구조 철근콘크리트조			층수 지상 1층
						건축물 동수 주1동,부속0동
			용적률 - %
						연면적 2,871㎡
심의내용	구 분	주요 심의결과
	(해체) 분야	□ 점검표에 비계 설치 상태 점검항목 추가할 것 □ 지붕→내장→외벽→골조 순으로 공정표 검토 □ 슬레이트 해체 시 외부 비계에 생명줄 설치 후 해체할 것 □ 철골 해체와 RC 해체 순서 재검토 □ 철골트러스 빔 커팅 시 발생하는 부재 변형 최소화를 위한 대책으로 보조장비 가동 조치할 것 □ 지붕 철골트러스 철거 순서 (서비스 크레인 없이 메인 트러스 선 철거 후 서브 트러스 철거) 및 장비 (크레인) 계획 추가 검토 □ 구간별 전면 해체보다는 부위별(공정별) 천장트러스, 벽체, 기둥 철거 순으로 해체함이 타당함
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ❍ ] 조건부 의결 [ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]