■ 건축위원회 심의기준 [별지 제2호서식]
지방건축위원회(해체전문) 심의 주요결과
[ ]에는 해당하는 곳에 ‘○’표시를 합니다.
운영기관	군산시			심의일자	2024.5.21.
건축종별	[ ] 신축, [ ] 증축, [ ] 대수선, [○] 해체
건축주	성명(법인명) 군산시
대지현황	대지위치 군산시 수송동 416-2 외 1필지
	대지면적 309㎡		용도지역(지구,구역) 일반상업지역
해체건축물현황	건축면적 230.94㎡		구조 철근콘크리트구조			층수 지상 3층
						건축물 동수 주1동,부속0동
	주용도 제2종근린생활시설		용적률 209.76%
						연면적 합계 648.16㎡
심의내용	구 분	주요 심의 내용
	해체 분야	□ 각 층 슬라브 및 벽체 해체순서 정하고 층별 추락방호 시설 등 점검사항을 점검표에 반영 □ 슬래브 해체 시 개구부 방호시설계획 및 작업자 추락방지 시설계획 □ 벽체 절단 및 해체순서 표시 □ 체인블럭 거치대의 구조적 안전성 검증보완 □ 거치대 설치 시 고정(앵카 등) 조치 □ 향후 E/V 설치공간 확보 검토 □ 컷팅 작업 시 해체구역 변형에 의한 커팅기날 물림현상 방지대책 작성 □ 개구부 단부 잔손보기 및 수정작업 시 추락방지 안전대책 보완 □ 벽체 컷팅 시 인력 안전관리 및 가시설 설치여부 구체적 계획 요망 □ 엘리베이터 제원과 철거 오픈부위 검토하여 바닥컷팅 규모를 정확히 계획할 것 □ 내부 해체 건으로 cctv 위치 및 개수 계획 요망. □ 체인블럭 거치대 규격 표기 및 행거줄걸이 셋트앙카 설치위치 수정 □ 바닥 슬래브 해체 시 오픈부분 추락방지 방안 수립 요망 □ 슬래브 해체공법에 대하여 해체 시공사와 협의 후 안전하게 해체할 수 있는 공법을 적용할 것. □ 슬래브 해체 크기를 명확하게 표기할 것.
심의결과	[ ] 원안 의결 [ ] 조건부 의결 [ ○ ] 재검토 의결 [ ] 부결
	※ 작성기준(건축위원회 심의기준 9.3 관련) • 원안 의결 : 상정안건에 대하여 수정없이 원안대로 의결 • 조건부 의결 : 상정안건에 별도의 내용을 부가하거나 제외하는 등의 일부 조건을 부여하여 건축사가 반영하도록 하는 의결 • 재검토 의결 : 상정안건을 다시 검토 보완하여 추후 위원회에서 다시 심의토록 의결 • 부결 : 상정안건이 건축법령 등에 위반되거나 심의요건이 불충분하여 부결시키기로 의결 (단,「건축위원회 심의기준」2.3 가목에서 라목까지 사유에 해당하여야 함)
210㎜×297㎜[백상지 80g/㎡]