[별지 제1호 서식]

정책실명제 중점관리 대상사업 사업내역서

① 정책사업명	군산 선교역사관 조성사업
② 추진배경	군산 개항 및 선교역사관 건립 기본계획 수립(‘20. 5. ~ 12.)에 따라 군산 선교역사관 및 선교기념탑 조성사업 추진
③ 사업개요	❍ 사업기간 : 2022 ~ 2025 ❍ 사업위치 : 군산시 구암동 334 외1필지(역사관) 군산시 구암동 601-42 일원(기념탑) ❍ 총사업비 : 6,200백만원 (국비 30% 도비 15% 시비 35% 민자 20%) - ‘22년 사업비 : 614.5백만원(국130 도65.5 시267 민자152) - ‘23년 사업비 : 2,657백만원(국797 도400 시930 민자530) - ‘24년 사업비 : 2,928.5백만원(국897 도566.5 시931 민자534) ❍ 사업규모 : 1동/3층, 철근콘크리트조, 연면적 998.10㎡(역사관) 높이 7m 내외 상징탑(기념탑)
④ 사업부서	문화예술과		⑤ 담당자	김형옥 과장 김하림 주무관
⑥ 선정기준	대규모예산		⑦ 사업기간	2022 ~ 2025
<그간 주요 추진내용>
○ 군산 선교역사관 전시설계 및 전시물 제작 및 설치 준공검사 결과보고		‘25. 9. 10.	김봉곤 국장 김형옥 과장 서홍상 계장 김하림 주무관
○ 군산 선교역사관 건립공사 [2차분] 준공검사 결과보고		‘25. 7. 25.	김봉곤 국장 김형옥 과장 서홍상 계장 김하림 주무관
○ 군산 선교역사관 건립공사 [1차분] 준공검사 결과보고		‘24.12.19.	김봉곤 국장 김형옥 과장 서홍상 계장 김상원 주무관
○ 준공계-군산 선교기념탑 건립공사		‘24.12.02.	[선람] 김형옥 과장 서홍상 계장 김현준 주무관
○ 군산 선교역사관 전시설계 및 제작·설치 제안서 평가 및 협상대상 선정 결과보고		‘24.09.13.	김형옥 과장 서홍상 계장 김상원 주무관

○ 군산 선교역사관 전시설계 및 제작·설치 발주계획	‘24.08.08.	강임준 시장 신원식 부시장 김봉곤 국장 김형옥 과장 서홍상 계장 김상원 주무관
○ 군산 선교역사관 착공신고서 제출	‘23.12.28.	[선람] 황보영 계장 박홍순 과장 남궁철안 주무관
○ 군산 선교역사관 및 선교기념탑 건립공사 발주계획	‘23.12.14.	[선람] 황보영 계장 박홍순 과장 남궁철안 주무관
○ 군산 선교역사관 및 선교기념탑 건립공사 발주계획	‘23.09.05.	강임준 시장 김미정 부시장 김봉곤 국장 박홍순 과장 황보영 계장 남궁철안 주무관
○ 군산 선교역사관 건립사업 설계용역 추진상황 보고회 개최 계획	‘23.03.21.	강임준 시장 김미정 부시장 김봉곤 국장 박홍순 과장 김순진 계장 남궁철안 주무관
○ 군산 선교역사관 건립사업 설계용역 제안공모 공고	‘22.05.23.	김순진 계장 [대결] 김선경 주무관
○ 군산 선교역사관 및 선교기념탑 건립 실시설계 용역 발주계획	‘22.04.01.	황철호 부시장 김봉곤 국장 노창식 과장 김순진 계장 김선경 주무관
○ 군산선교역사관 건립 사업 추진 계획(안)	‘21.06.01.	강임준 시장 신현승 부시장 오국선 국장 채행석 과장 진숙자 계장 권영우 주무관