현  장  설  명  서

사업명: 2023년도 고품질쌀유통활성화사업

(벼 건조저장시설 기계설비)

2023. 5.  .

대야농협미곡종합처리장

목      차

1.  사    업    명

2.  사  업  개  요

3.  주요 시설 명세

4.  주요 시공 지침

5.  특  기  사  항

6.  일  반  사  항

1. 사업명: 2023년도 고품질쌀유통활성화사업(벼 건조저장시설 기계설비)

2. 사업개요

가. 현장위치: 전북 군산시 대야면 만경로 1807

나. 발 주 처: 대야농협미곡종합처리장

다. 사업기간:

◦준공 기한: 2023년 9월 20일

◦세부 사업 일정은 공사 계약 시 협의에 의한다.

라. 공사종류 및 범위

(1)  종 류

가) 사일로 500톤 3대 설치

나) 조선기 4대 교체

다) 풍력선별기 4대 설치

라) 이송기계류 설치, 교체

마) 집진설비 설치

바) 이송 슈트 연결 작업

사) 덕트, 에어라인 연결 작업

아) 기계제어설비

자) 시운전 및 성능보장

(2)  범 위

가) 시방서에 제시한 사항

나) 설계도면에서 제시한 사항

다) 당 농협이 계약의 이행상 필요하다고 인정하는 사항

라) 당 농협이 계약서에서 제시한 사항

마) 현장설명서에 제시한 사항

※입찰 참가자는 입찰서 제출 전 설계도면, 시방서 등 제반 사항을 충분히 검토하여 입찰 총액에 반영하여야 하며 누락사항은 도급자가 부담하여야 한다.

※계약조건, 도면, 시방서에 의거 시공하되 도면, 시방서의 경미한 오류나 누락사항에 대해서는 도급자 부담으로 시설의 기능에 이상이 없도록 시공하여야 한다.

3. 주요시설 명세

1) 1, 2번 투입부

번 호	품 명	규 격	수 량	비 고
1	풍력선별기	30톤/시간, 120㎥/min	2
2	조 선 기	30톤/시간	2
3	체인콘베어	30톤/시간, W250x32.50M	1
4	2-방향 분배기	200x200	1
5	백필터	350㎥/min	1	풍력선별기 외.
6	로타리에어록	Ø300	1
7	집진홴	30kW, 350㎥/min, 300mmAq	1	소음기, 굴뚝 포함

2) 500톤 저장사일로부

번 호	품 명	규 격	수 량	비 고
1	사일로	평형, 500톤, 다공판 올림형 단열: 벽체 70mm, 지붕 100mm	3	교반기 점검대 설치
2	버켓엘리베이터	30톤/시간	3
3	체인콘베어	30톤/시간	7
4	2-방향 분배기	200x200	9
5	슬라이드게이트	250x500	3

3) 3, 4번 투입부

번 호	품 명	규 격	수 량	비 고
1	풍력선별기	30톤/시간, 120㎥/min	2
2	조 선 기	30톤/시간	2
3	백필터	300㎥/min	1	풍력선별기 외.
4	로타리에어록	Ø300	1
5	집진홴	30kW, 300㎥/min, 350mmAq	1	소음기, 굴뚝 포함

4) 부대설비 등.

번호	품 명	수량	비 고
1.	제1,2 투입부 조선기 SUPPORT	1	강재구조물
2.	53,55번 C/C TRUSS	1	강재구조물
3.	제3,4 투입부 조선기 SUPPORT	1	강재구조물
4.	ITEM NO. 501,505,512 B/E TOWER	1	강재구조물
5.	500톤 사일로 상부 C/C TRUSS & SUPPORT	1	강재구조물
6.	500톤 사일로 상부 C/C TRUSS 방수커버	1	강재구조물
7.	ITEM NO. M303,M307,J208 B/E TOWER	1	강재구조물
8.	ITEM NO. 516,518,519 C/C TRUSS	1	강재구조물
9.	ITEM NO. 202-4, 520 C/C TRUSS	1	강재구조물
10.	변경 1,2번 투입시설, 500톤 사일로, 300톤 사일로 CHUTE & SPOUT	1	이송슈트
11.	변경 3,4번 투입시설 CHUTE & SPOUT	1	이송슈트
12.	AIR LINE	1	공압라인
13.	신규 ITEM NO. A113 BAG FILTER DUCT LINE(1,2번 투입시설)	1	집진라인
14.	기존 1,2번 투입구 집진시설 구조물 개보수	1	변경, 증설
15.	신규 ITEM NO. B119 DUCT LINE (3,4번 투입시설)	1	집진라인
16.	기존 3,4,5번 투입구 집진시설 구조물 개보수	1	변경, 증설
17.	집진설비 공압 에어라인의 철거 부분 재설치 -정맥부 에어탱크 미강실로 이동설치	1	공압라인
18.	5번 투입부 B201 체인콘베어(건조기 투입용) 기어드 모터 교체_: 5.5kW 설치	1	동력 변경
19.	*기존 설비 철거 및 처리 1) 교체 설비 2) 시설 개보수 관련 설비 3) 농협 지정 품목 4) 필요하지 않은 모든 것.(자재, 설비 등) ※ 모든 철거 작업은 농협과 협의 진행한다.	1	모든 철거 자재 및 철거로 인한 부산물은 시공자가 부담하여 책임지고 처리하여야 한다.

4) 자동제어설비

번호	품 명	수량	비 고
1	1, 2번 원료투입공정: 기존 제어반 개보수 -중앙제어반 그래픽보드 교체	1	전장품 교체, 신규
2	3, 4번 원료투입공정: 기존 제어반 개보수 -제어반 그래픽 변경	1	전장품 교체, 신규
3	500톤 저장사일로 공정: 현장제어반 신규 설치	1	신규
4	곡온관리시스템: 사일로 3기용 PC+프로그램 설치	1	신규

※ 모든 기계는 기존 설비보다 품질이 우수한 최상의 제품을 적용하여 설치하여야 한다.(사후관리에 유리한 제품 선정 요함)

※ 집진기(백필터)는 기존 공장에 설치된 제품과 동일한 제품을 구매하여 설치한다. (사후관리에 유리한 제품 선정 요함)

4. 주요 시공 지침

기존 시설을 교체 및 개보수하는 공사로써 모든 작업은 조합 감독자와 협의하여 지시에 따라야 한다.

미곡종합처리장 건조저장시설 개보수 사업과 병행하여 동시에 실시하는 공사로써 통합 공정 협의를 면밀히 진행하여 각 사업이 원활히 진행되도록 해야 하며, 사업 기간 내에 사업이 마무리 되어 벼(보리) 수매 및 제품 생산에 차질이 없도록 하여야 한다.

* 3, 4번 투입부에서 5번 투입부로 연결된 공기 이송라인은 콘베어 이송라인 설치 후 가장 늦게 철거해야 하며, 이송이 중단되지 않게 일정을 조율한다.

농협의 제품 생산일정 및 계획에 따라 공사 일정이 바뀔 수 있으므로 협의하여 공정표를 작성 시행하여야 하나, 추곡수매 이전에 준공이 반드시 되도록 한다.(9/10~20)

시공은 도면 및 시방서를 기준으로 하여 시행하되 현장여건 및 상황에 따라 감독자와 협의 진행하여야 한다.

공장동 외부에 설치되는 모든 기기류 및 강재류는 철판 및 형강 제품으로 구성 하되, 아연용융도금제품을 사용하여야 한다.

모든 기기류는 완전 방수가 되도록 제작 및 설치하여야 한다.

버켓엘리베이터의 하부(테일부)의 점검구(청소구)의 개폐가 용이하게 제작하여야 한다.(원터치 클램프 등.)

기존 설비 및 신규 체인콘베어의 모터 베이스를 보강하여 들림 현상이나 떨림, 변형이 발생하지 않도록 하여야 한다.

기계 또는 기기류를 위한 점검용 사다리 또는 계단을 설치하여야 하며, 안전난간(HAND RAIL)을 설치한다.(산업안전보건법 기준치에 준용하여 설치한다.)

이동로, 계단 등의 핸드레일 설치는 양 손으로 의지하여 안전하게 이동할 수 있도록 설치한다.(예: 사일로 상ㆍ하부 계단 등.)

구조물 제작 설치 시 날카로운 부분이나 거친 부분은 깨끗하게 마감처리하여 안전사고가 발생하지 않도록 한다.

사일로 내부 상부의 교반기에 점검대가 설치되어야 한다.

집진닥트 설치 시 진공으로 인한 변형이 발생하지 않도록 보강하여야 한다.

닥트의 재질은 아연도 스파이럴 닥트를 사용한다.

대기환경보존법에 따라 분진 측정에 필요한 점검구 및 점검대를 설치하여야 한다.

기계 색상은 농협과 협의하여 결정한다.

모든 이송기계류는 이송용량 30(톤/시간)으로 설치하여야 하며, 기존 설비로써 연계되어 있는 이송기계류(체인콘베어)도 같은 이송량을 처리할 수 있도록 보완하여야 한다.

기존의 2방향분배기, 슬라이드게이트는 작동 불량이 있을 경우 보완하여 정상 작동이 되도록 해야 한다.

기존 설비는 불량이나 오작동으로 인한 문제가 발생하지 않도록 점검 및 보완을 하여야 하며 특히, 방수를 철저히 하여야 한다.

기존의 공압용 에어탱크 2개는 미강실에 설치 연결한다.

철거와 재 설치로 인한 기존 시설물의 훼손된 부분은 원상 복구하여야 하며 뚫려 있는 구멍은 깨끗이 안전하게 마감해야 한다.(피트 커버, 벽체 관통부, 층별 개구부, 이동로 및 점검대 등.)

이송관의 길이 및 각도를 고려하여 곡물 손상이 없도록 완충장치를 설치하여야 하며, 완충장치 및 분배기는 점검이 용이한 곳에 설치 또는 점검대를 설치하여야 한다.

기존 시설 교체 및 철거, 설치하는 공사로써 이로 인하여 발생되는 부대설비공사(전기, 공압라인, 이송슈트, 점검대 및 안전 시설 등.)를 시행하여 운전 및 사용에 문제가 발생하지 않도록 하여야 한다.

기존 제어반을 이용하여 변경된 사항은 교체 또는 수정하여야 한다.(그래픽보드수정)

1, 2번 투입구의 외부 제어실에 체인콘베어 ON/OFF 스위치를 설치하여야 하며, 수매 정산용 컴퓨터 및 호퍼스케일 제어부를 농협과 상의하여 이동 설치한다.

각 공정간 인터록을 구성하여 자동 제어가 되도록 하여야 한다.

M.C.C 및 각 제어반에서 반외부로 접속되는 전선은 반드시 정격 전류 이상의 허용 전류를 갖은 단자대를 사용하여 접속하여야 하며 조작용 단자대는 15A 이상의 조립식 단자대를 사용한다.

제어 및 동력 LINE은 케이블 닥트를 이용하여 배관 및 배선을 하여야 한다.

소요 동력이 20마력 이상인 기기의 기동은 Y-∆ 기동방식으로 한다.

철거자재 처리: 시공사는 이송라인 설치 시 발생되는 철거물의 철거비용 및 처리는 낙찰자가 부담 및 처리한다.

외부 강재류공사의 철 자재는 아연용융도금을 시행한다.

5. 특기 사항

가. 환경보존법에 저촉이 안 되도록 시공하여야 하며, 인허가 사항에 따른 필요한 조치 및 협조를 하여야 한다.

나. 공사기간 내에 무부하 단동 및 연동 테스트를 완료하여야 하며 시운전은 농협의 입회하에 정상적인 능력이 발휘될 때까지 시운전을 하여야 한다.

다. 공장 운영 요원에 대하여 설치 과정부터 기술훈련 및 지도를 실시하여야 한다.

라. 기계시설과 관련하여 타 부분의 협조를 받아야 할 사항은 사전에 협의 조치하여 시공한다.

마. 주요 기자재는 카탈로그, 도면 또는 참고자료 등을 구비하여 구매, 제작 전에 감독원의 승인을 받아야 하며, 제작 또는 현장 설치검사는 필요시 언제든지 할 수 있다.

바. 설계변경은 농협의 사정 또는 현장 시공 상 변경이 불가피한 경우 이외에는 할 수가 없으며 설계변경은 계약조건에 의거 당초 설계도서(단가, 일위대가)에 따라 처리한다.

사. 현장설치 작업 시 공사용 전력의 비용은 시공자가 부담한다.

6. 일 반 사 항

가. 공사에 사용되는 기자재는 KS 자재 또는 관련법에서 정하는 승인제품 등의 신품을 사용하여야 하며 기타의 경우 최상품을 사용하여야 한다.

나. 현장관리를 위하여 RPC 및 공사 관련 업무에 유능한 직원을 현장대리인으로 선임하여 농협의 승인을 받아야 한다.

다. 계약체결 후 현장대리인계, 수급자내역서, 공정표, 착공계를 제출하여 농협의 승인을 받아야 한다.

라. 설계도서와 시방서의 내용이 상이하거나 의문사항이 있을 경우 감독자와 협의하여 감독자의 해석을 따른다.

마. 기자재의 매설, 은폐부위 및 조립, 설치에 따른 시공과정의 주요부위는 천연색 기록사진을 촬영하여 앨범으로 정리한 뒤 농협에 제출하여야 한다.

바. 현장에서 발생되는 오물, 폐자재는 시공자 부담으로 반출하여야 한다.

사. 시공자는 현장 안전사고에 대하여 특별한 관리를 하여야 하며 안전사고 발생 시는 시공자 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

아. 현장의 타 시설물에 대하여 손해를 끼쳤을 경우 시공자 부담으로 원상복구 하여야 한다.(벽체 관통부위 등)

자. 시공자 임의로 변경 시공하여서는 안 되며 변경 시공 시는 감독원의 승인을 받아야 한다.

차. 준공은 실제로 공사가 완료되어 준공계를 제출하여 농협이 승인하고 준공계를 접수한 접수일자를 기준으로 한다.

카. 시공자는 산업재해보상보험 및 고용보험, 건강보험, 연금보험, 노인 장기 요양보험을 가입하여야 하며 가입 증서 미제출 또는 감액 발생 시 정산한다.

타. 준공 시 산업안전보건관리비 사용내역서를 제출하여야 하며, 미 사용분은 정산한다.

※ 보험료 사후정산

○ 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료 사후정산대상공사

구 분	국민건강보험료	노인장기요양보험료	국민연금보험료	안전관리비
설계내역서 금액	12,338,716원	1,580,589원	15,662,686원	26,647,502원
계약내역서 금액 = 설계내역서 보험료

- 입찰참가자는 입찰금액 산정 시 국민건강보험료, 국민연금보험료 및 노인장기요양보험료 및 산업안전관리비는 예정가격 작성 시 계상된 금액을 조정 없이 반영하고 사후정산 합니다.(간접노무에 해당하는 현장소장, 안전관리자, 품질관리원, 청소부, 경비원 및 계약상대자의 회사에 소속된 직원 등은 해당되지 아니하며, 당해 현장에 직접인건비에 해당하는 자에 대하여 납입증명시 인정함)

파. 준공검사 후 검사결과에 따라 준공도면, 준공내역서, 운영 매뉴얼, 단위기계 점검표를 작성하여 농협에 제출하여야 한다.

하. 관계법에 준하여 시공하여야 한다.   -끝-