별지 10		개별 투자심사 사업 추진현황

사업명

산업단지 복합문화센터 건립

담당자

산업혁신과

장민석(☎454-2753)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 문화‧체육‧편의시설 미비로 인한 청년‧기술인력의 취업기피 분위기 전환, 지역주민 및 근로자 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2022. 10.

○ 위 치 : 군산시 오식도동 661번지

○ 규 모 : (건축면적) 1,373.87㎡ / (연 면 적) 3,018.71㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,791.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,791.5	245	245	2,055	7,491.5
국 비	3,294	-	-	1,815	1,479
시 도 비	988	245	245	240	503
시군구비	5,509.5	-	-	-	5,509.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 산업단지 복합문화센터 건립사업 협약체결                  : `19. 11.

○ 공유재산 심의회 심의 및 중기지방재정계획승인             : `19. 11.

○ 공공건축 사업계획 의견조회(건축도시공간연구소)           : `20. 1~3.

○ 지방건축위원회 심의 및 설계용역 제안공모                 : `20. 5~10.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 설계용역 추진             : `20. 11.~

- 지반조사, 중간설계 완료, 경관심의 추진, 공원조성계획 변경 등

□ 향후계획

○ 설계용역 완료                                            : `21.  7.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 추진(행정절차 등)         : `21.  7.~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 9,175백만원 ⇒ (변경) 9,791.5백만원

○ 변경사유 : `19년도 지방재정투자심사 이후 총사업비 확정

사업명

고령자 복지주택사업

담당자

주택행정과

서상배(☎454-3713)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전 세계적으로 노인인구의 급격한 증가로 고령화 사회가 빠르게 진행되면서 노인문제가 사       회문제의 중심으로 떠오르는 가운데 고령사회의 충격을 대비한 맞춤형 임대주택 및 복지서       비스 공급으로 65세이상 노령층 등의 주거안정 불안을 해소하고 복지시설을 일체화하여       주거･복지혁신을 통한 실질적인 삶의 질을 높이기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 전라북도 군산시 오룡동 900-40번지 일원

○ 규 모 - 주택건설 : 고령자 복지주택 150호(전용 26㎡)

- 복지시설 : 1∼2층 연면적 1,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	22,041	5,403	5,199	4,948	6,491
국 비	14,911	2,982	3,728	3,728	4,473
시군구비	2,251	1,446	251		554
기타(LH)	4879	975	1,220	1,220	1,464

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 사업계획승인 고시 (국토부 2020. 1.)

○ 사업인정고시 신청 (국토부 2020. 1.)

○ 사업인정 통지 (국토부 2020. 11.)

○ 수용재결 신청 (전라북도 2021. 2.)

□ 향후계획

○ 전라북도지방토지수용위원회 개최 : 2021. 7. 2.

○ 수용재결 및 공탁 : 2021. 8~9월

○ LH에 토지인계 및 공사착수 : 2021. 9.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 – 연면적 : (변경 전) 9,689.17㎡, (변경 후) 9,685.13㎡

○ 총사업비 : (변경 전)16,551,920천원(정부재정지원금 14,911,050천원)

(변경 후)21,457,286천원(정부재정지원금 14,911,050천원)

※ 정부재정지원금은 동일하고, 우리시 및 LH공사의 자금 계획에 따라 변경됨.

○ 사업기간 : (변경전) 2019.12. ~ 2022.12.(변경후) 2019.12. ~ 2023.12.

사업명

(재)군산먹거리통합지원센터 신축공사

담당자

먹거리정책과

박소영(☎454-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 친환경농산물 위주의 공급체계에서 농축수산물 및 지역가공식품의 체계적인 기획생산-기획소비 시스템 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2021. 4.

○ 위 치 : 군산시 성산면 창오리 560-20번지(답 2,489.5㎡)

○ 규 모 : 1개동, 지상2층(1,816.1㎡)

- (지상 1층) 1,401.18㎡/ 창고시설(출하대기실, 선별실, 저온저장고 등)

- (지상 2층) 414.92㎡/ 사무실

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,305백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	4,305		2,059	2,246
국 비	1,473		973	499
시 도 비	999		478	521
시군구비	1,833		608	1226

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 준공, 100%)

○ 농식품부 푸드플랜 패키지 지원사업 군산시 선정         : ‘19. 1. 28

○ 지방재정투자사업 심사 및 농업ㆍ농촌 및 식품산업 정책 심의 : ’19. 2.

○ (재)군산먹거리통합지원센터 기본설계 등 용역 진행      : ‘19. 3. 8

○‘19년도 푸드플랜 APC건립 지원사업 사업비 확정       : ’19. 5. 14

○ (재)군산먹거리통합지원센터 부지매입 및 신축의뢰                : ‘19. 5.~ 6.

○ (재)군산먹거리통합지원센터 신축의뢰(주택행정과)        : ’19. 6. 17

○ 설계용역 및 건축(건축경관심의), 공용건축물 건축협의     :‘19.11~’20.4.

○ 재단법인군산먹거리통합지원센터 업체 선정 및 착공      : ‘20. 6. / 7.

○ 동절기 운영(‘20. 12. 28. ~ ‘21. 3월 중순)에 따른 공사 일시중지

○ 해빙기 도래에 따른 공사중지 해제(21. 2. 22 ~)

○ (재)군산먹거리통합지원센터 준공 : ‘21. 4. 21.

○ (재)군산먹거리통합지원센터 준공검사 : ‘21. 4. 22.

○ (재)군산먹거리통합지원센터 사용개시 : ‘21. 5. 1.

□ 사업변경 내역

○ 당초(군산푸드통합지원센터) 심의 시 보다 총사업비 30%이상 증액(32억 ⇒ 43억),

위치변경에 따라 지방재정투자사업 재심사 이후 사업 준공

사업명

군산 로컬푸드복합센터 신축사업

담당자

먹거리정책과

박준희(☎454-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 안전한 농산물의 안정적인 판로 확보 및 건강한 먹거리 공유

○ 농업인과 도시민이 함께하는 복합시설 제공으로 지역농업을 통한 선순환 경제체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2021년

○ 위 치 : 군산시 경암동 577-1번지(대, 3,653㎡)

○ 규 모 : 1층, 연면적 633㎡(직매장 605㎡, 라이스카페 28㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,000		60	1,940
국 비	500		49	451
시 도 비	150		11	139
시군구비	1,350			1,350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 군산 로컬푸드복합센터 신축사업 설계용역 완료          : ‘21. 5월

□ 향후계획

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축공사 전북도 원가심사        : ‘21. 7월

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축공사 입찰계약 및 착공       : ‘21. 8월

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축공사 준공                   : ‘22. 2월

사업명

군산 해삼서식장 조성

담당자

수산진흥과

장현규(☎454-2912)

□ 사업목적 및 필요성

○ 유용생물의 산란장 및 서식장 조성으로 지속 가능한 어업생산기반조성으로

어업인 소득향상 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2020

○ 위 치 : 군산시 옥도면 비안도, 연도, 어청도

○ 규 모 : 3개 어촌계

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000 백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계
국 비		1,600	900	-	-
시 도 비		320	180	-	-
시군구비		1,280	720	-	-

□ 추진상황

○‘18년 비안도 해삼서식장 기반시설 및 종자방류 완료       :‘19. 5월

- 트리톤A형 어초: 179개, 해삼은신초: 344개, 자연석: 5,490㎥, 해삼종자 713천마리

○‘19년 연도 해삼서식장 기반시설 및 종자방류 완료         :‘20. 2월

- 해삼은신어초: 434개, 해삼전용어초: 4,681개, 자연석: 8,106㎥, 해삼종자: 713천마리

○‘20년 해삼서식장 기반시설 및 종자방류 완료            :‘20. 11월

- 해삼전용어초, 다층식피라미드(6.6억원), 자연석(6억원), 종자방류(3억원)

사업명

구암동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과

전석(☎454-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전·위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년간)

○ 위 치 : 군산시 구암동 362-1번지 일원(장둑·외산마을)

○ 규 모 : 62,374㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,787백만원                                       (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,786.6	-	451	604.3	2,731.3
국 비	2,651	-	400	423	1,828
시 도 비	340.6	-	51	54.4	235.2
시군구비	795	-	0	126.9	668.1

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○‘20.  3. : 공모 선정(총괄/국가균형발전위원회, 사업관리/국토교통부)

○‘20.  5. : 지방재정투자심사

○‘20. 10. : 마스터플랜 수립 용역 착수

○‘20. 11. ~‘21. 3. : 주민의견수렴 (리더회의 4회, 주민설명회 5회)

○‘21. 5. 21. : 마스터플랜 조건부 승인(국토교통부)

□ 향후계획

○‘21. 7.  : 시설공사 세부설계 및 편입토지 보상

○‘22. 1.~ : 도시가스 인입공사 추진 * 하수관거 사업과 연계시행

○‘22. 3.~ : 지붕개량 및 집수리사업 등 세부사업 본격 추진

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

소룡동1구역 도시재생활성화계획

담당자

도시재생과

고승민(☎454-3732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민편익시설확충, 마을공동체활성화 등을 통해 정주 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년)

○ 위 치 : 군산시 소룡동 1473-4번지 일원

○ 규 모 : 76,975㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,000	-	2,167	2,100	9,733
국 비
시 도 비	8,400	-	1,300	2,000	5,100
시군구비	5,600	-	867	100	4,633

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25 %)

○‘20.2. : 도시재생활성화계획 심의 상정 (전라북도 지방도시재생위원회)

○‘20.4. : 지방재정투자심사 승인

○‘20.11. : 소룡동 도시재생활성화계획 승인 및 고시

○‘21. 1. : 마을길 확장공사 보상계획 공고

○‘21.1~4. : 순환형 임대주택 건설 공사 실시설계 용역 시행

○‘21.2~6. : 소룡동 CPTED 안심보행길 조성사업 실시설계 용역 시행

○‘21. 3. : 마을길 확장공사 보상 실시

○‘21.3~7. : 선형공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행

○‘21.6. : 어울림센터・광장조성사업 공유재산관리계획 동의안 심의 완료

○‘21.6. : 순환형 임대주택 건설공사 착공

□ 향후계획

○ 연차별 사업 편입부지 보상 완료 및 실시설계 용역 시행

○ 선형공원 조성, 순환형 임대주택 건설공사 등 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

전국 톱10 가요쇼

담당자

문화예술과

최미선(☎454-3282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산의 경기 침체 및 일자리 감소 등의 경제 위기 상황을 일자리 창출 및 경제 파급효과       가 큰 문화예술 기반 공연방송콘텐츠를 기획‧제작하여 지역민들의 문화예술향유기회 확대       및 군산시 이미지 제고에 기여하고, 지역관광 및 경제 활성화 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 1월 ～ 2020년 12월

○ 위 치 : 군산예술의전당 대공연장

○ 사업내용

➀ 공연 제작‧운영 : 월 1회(6개월) 성인가요 프로그램 운영 및 녹화 제작

➁ 9개 지역 민영방송 송출(한국언론진흥재단 및 방송제작사 연계)

➂ 스팟광고 송출 및 지역 관광과 연계한 공연프로그램 운영

○ 지원형태 : 직접수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 351.9백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계				-	-
국 비
시 도 비
시군구비	351.9	176.6	175.3	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)

○ 2019. 06월 ~ 11월 : 2019 전국 TOP10 가요쇼 추진

○ 2020. 01월 ~ 12월 : 2020 전국 TOP10 가요쇼 추진

사업명

옥구도서관 건립

담당자

시립도서관관리과

김가영(☎454-5622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌공공도서관으로서 농업전문자료, 학교연계를 통한 과제협력 도서관 등 어린이중심의       독서문화 서비스를 제공하고자 함.

□ 사업개요

○ 위    치 : 전라북도 군산시 옥구읍 옥구로 27(시유지)

○ 규    모 : 연면적1,000㎡(지상3층/하늘정원)

○ 사업기간 : 2017 ~ 2020

○ 사 업 비 : 29.18억원(국비14, 특교세2, 시‧군비13.18 ) ※ 균특80%(최대16억)지원

○ 착공 및 준공 : 2019. 3. 18. ~ 2020. 2.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,918백만원                                   (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	2,918	1,674	1,161	83
국 비	1,400	942	458
시 도 비	200	200
시군구비	1,318	532	703	83
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

○‘16. 6월 : 도서관 건립 검토보고

○‘17. 6월 : 공공도서관 건립지원 사전평가(문화체육관광부 주관)

○‘17. 8월 : 재정투자심사 완료

- 시 재정투자심사 대상사업(결과 : 조건부 추진 / 중기지방재정계획 반영)

○‘18. 1월 : 기본 및 시설설계 의뢰

○‘18. 4월 2일 : 설계용역 계약체결 * 계약기간 : ’18. 4.6 ~ 9.2

○‘18. 10월 : 옥구도서관 특성화 방안 주민설명회 개최

○‘19. 3월 : 옥구도서관 건립 건축공사 착공

- 시 공 사 : 서일종합건설(주) (대표 정영주 / 전주 소재)

- 도 급 액 : 금1,349백만원 - 공사기간 :‘19.3.18. ~‘20.1.11.

○‘20. 2월 : 옥구도서관 건립공사 준공

□ 향후계획

○ 산들도서관 개관행사 추진          : ’21. 하반기

사업명

동부권도서관 건립

담당자

시립도서관관리과

김가영(☎454-5622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인구밀집 및 신도시 지역 내 도서관 건립으로 어린이 중심의 전세대가 함께하는 도서       관 조성(최신트렌드 반영 체류형 독서문화공간)

□ 사업개요

○ 위    치 : 군산시 조촌동 2-33번지, 41번지(페이퍼코리아 지구단위계획구역 내 근린공원)

○ 사업기간 : 2017~2022년(공정율 70%, `21. 6월말기준)

○ 사 업 비 : 10,155백만원(국비3,782, 특교세800, 시비5,573) ※ 균특 40%지원

- 설계비 511백만원 / 공사비 9,155백만원 / 감리 등 489백만원

○ 조성규모 : 부지1,500㎡ 연면적3,753㎡(지하1층 /지상4층)

○ 착공 및 준공(예정) : 2019. 12. 19. ~ 2021. 10.

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,155백만원                                     (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	10,155	1,122	2,982	5,653	398
국 비	3,782	586	923	2,273
시 도 비	800	8	792
시군구비	5,573	528	1,267	3,380	398
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 70%)

○‘16. 07. : 동부권도서관 건립 검토보고

○‘17. 11. : 재정투자심사 등 행정절차이행

○‘18. 5.  : 제안공모 추진

○‘18. 7. 2. : 설계용역 계약체결

○‘19. 9.    : 설계용역 완료

○‘19. 10~11. : 도 원가심사 및 일상감사 실시

○‘19. 12. 19.  : 공사착공

- 공사금액 : 총차분(금5,680,004,480원) 1차분(3,528,924,290원)

- 공사기간 : 총차분(‘19.12.19.~‘21.6.18.) 1차분(‘19.12.19.~‘20.9.18.)

○‘21. 5. 17. : 동부권도서관 건립 1차공사 준공 및 2차공사 착공

□ 향후계획

○ 동부권도서관 건립공사(2차공사) 준공            ‘21. 10.

○ 동부권도서관 개관                              ‘22. 상반기(예정)

사업명

짬뽕 페스티벌 개최

담당자

위생행정과

김은지(☎454-3413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통과 특색있는 군산의 짬뽕을 관광자원화 하여 짬뽕특화거리 조성을 통한 골목상권       및 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11. 7 ~ 11. 22

○ 위 치 : 군산시 짬뽕특화거리 일원

○ 규 모 : 182백만원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 182백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	182		182
국 비	91		91	-
시 도 비
시군구비	91		91	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020년 온라인 짬뽕페스티벌 개최 완료

□ 향후계획

○ 지속적인 홍보를 위하여 시비확보, 2021년 짬뽕 페스티벌 추진 예정

□ 사업변경 내역

○ 코로나 19로 인하여 온라인 축제로 변경 진행

사업명

군산시 광역해양레저체험 복합단지 조성사업

담당자

항만해양과

강형기(☎454-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해안 최고의 해양 레저시설 입지 확보로 인근 관광자원 활용한 해양레저 문화 공간

조성 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 산65번지일원

○ 규 모 : 부지면적 64,771㎡, 건축 2동(연면적 4,900㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	39,800	6,000	4,000	7,400	26,400
국 비	19,400	3,000	2,000	3,700	12,700
시 도 비	5,600	600	600	1,110	3,890
시군구비	14,800	2,400	1,400	2,590	9,810
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 추진

○ 21년 3차 지방재정투자심사 제출

□ 향후계획

○ 새만금용도별 통합개발계획 입안 및 승인 : 2021. 8. ~ 2021. 11.

○ 공사 발주                              : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 부지면적 54,000㎡, 연면적 5,600㎡,

(변경) 부지면적 64,771㎡, 연면적 4,900㎡

○ 총사업비 : (당초) 43,500백만원 (변경) 39,800백만원

사업명

말도~방축도 인도교 개설사업

담당자

항만해양과

오근엽(☎454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인도교와 말도리 도서의 지역자원경관을 연계한 명품트레킹 코스개발하여 관광활성       화로 지역소득증대 및 군산시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2022

○ 위 치 : 군산시 옥도면 말도리 말도, 명도, 방축도 일원

○ 규 모 : 인도교 4개소 L=1,278m, B=2∼2.5m

- 제1교 L=308m, 제2교 L=410m, 제3교 L=477m, 제4교 L=83m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	27,000	11,296	9,503	8,933.75	6,766.25
국 비	21,600	9,037	7,602.4	7,147	5,413
시 도 비	2,700	1,129.5	950.3	893.375	676.625
시군구비	2,700	1,129.5	950.3	893.375	676.625
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수                    : 2017. 12.

○ 제4교(현수식 출렁다리, L=83m) 완료                   : 2018. 11.

○ 3차분 공사 착공                                        : 2020.  6.

□ 향후계획

○ 거더 등 공장제작 완료                                  : 2021.  9.

○ 제1교, 제2교 설치 완료                                 : 2021. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

선유도 내부관광로 개설사업

담당자

항만해양과

오근엽(☎454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서지역 차량 집중에 대비하여 순환기능을 갖는 내부도로 개설하여 교통편의성을 증대       하여 관광객 및 주민들에게 쾌적한 도서환경을 제공하여 불편을 최소화 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2022

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 (L=2.49km, B=10~12m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	13,375	12,875	9,717	-	500
국 비	10,700	10,300	7,773.6	-	400
시 도 비	1,337.5	1,287.5	971.7	-	50
시군구비	1,337.5	1,287.5	971.7	-	50
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1공구(선유2구) 공사 사업완료                            : 2018. 11.

○ 3공구(선유3구) 공사 착공                                : 2020.  5.

○ 2공구(선유2구) 공사 완료                                : 2021.  4.

□ 향후계획

○ 3공구 토지수용재결                                     : 2021.  8.

○ 3공구 공사 완료                                        : 2021. 12.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 16,000백만원  (변경) 13,375백만원

사업명

온리원 고군산 관광벨트 조성사업

담당자

항만해양과

최봉준(☎454-2935)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙의 다부처와 협력을 통해 우리시 여건에 맞는 지역주도 사업 시행으로  도서지역

특성을 반영한 인프라 구축 및 관광자원의 효율적 이용

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2022

○ 위 치 : 군산시 옥도면 고군산 일원

○ 규 모 : 어항개발, 도로정비, 차도선, 자율주행버스 등

- 자율주행버스, 신시도항 개발, 장자도 차도선, 신시도 도로정비, 무녀2구 특성화 사업

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	18,200	11,220	4,614	3,942	3,038
국 비	9,100	5,610	2,730	1,971	1,519
시 도 비	2,730	1,683	659.4	591.3	455.7
시군구비	6,370	3,927	1224.6	1,379.7	1,063.3
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 관계부처 간 협약체결                                  : 2019.  6.

○ 실시설계용역 착수(3개 단위사업)                        : 2020.  4.

○ 자율주행차량 구매계약 체결                            : 2020.  5.

○ 신시도 노후도로 연결 착공                             : 2020.  7.

○ 장자도 차도선 접안시설 설치공사 착공                   : 2020. 12.

□ 향후계획

○ 신시도 어촌환경정비 공사 착공                          : 2021.  2.

○ 신시도 노후도로 정비공사 준공                          : 2021.  7.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

무녀2구항 어촌뉴딜 개발사업

담당자

항만해양과

윤용묵(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적하고 안전한 어항건설로 어항시설의 현대화 및 어업활동 지원

○ 주민 주도로 사업을 추진하여 어촌마을 소득증대 및 어민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2021년

○ 위 치 : 옥도면 무녀도동길 무녀2구항 일원

○ 규 모 : 방파제 연장, 어구어망창고 신설 및 특산품 판매센터 건립 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,960	5,236	6,685	3,039	-
국 비	10,472	3,665	4,680	2,127	-
시 도 비	1,346	471	602	274	-
시군구비	3,142	1,100	1,404	638	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 사업대상지 확정                                       : ‘18. 12.

○ 위수탁 계약(우리시→한국어촌어항공단)                 : ‘19. 04.

○ 기본계획 수립 및 승인                                 : ‘20. 01.

○ 시행계획 수립 및 승인                                 : ‘21. 01.

○ 공사 착공                                             : ‘21. 05.

□ 향후계획

○ 분야 별 공사 추진                                     : ‘21. 12.

사업명

선유1구 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과

정성욱(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적하고 안전한 어항건설로 어항시설의 현대화 및 어업활동 지원

○ 주민 주도로 사업을 추진하여 어촌마을 소득증대 및 어민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 옥도면  선유1구항 일원

○ 규 모 : 물양장 조성, 부잔교 설치, 방파제 시설 확충 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,907백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,907	-	1,068	1,562	1,277
국 비	2,735	-	748	1,093	894
시 도 비	352	-	96	141	115
시군구비	820	-	224	328	268
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 사업대상지 확정                                        : ‘19. 12.

○ 위수탁 계약(우리시→한국어촌어항공단)                   : ‘20. 01.

○ 기본계획 수립 및 승인                                  : ‘20. 11.

○ 실시설계 용역 착수                                     : ‘21. 02.

○ 공통사업 선 발주                                       : ‘21. 05.

□ 향후계획

○ 분야 별 공사 추진                                     : ‘22. 12.

사업명

장자도 장자어화 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과

정성욱(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적하고 안전한 어항건설로 어항시설의 현대화 및 어업활동 지원

○ 주민 주도로 사업을 추진하여 어촌마을 소득증대 및 어민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 옥도면  장자도항 일원

○ 규 모 : 진입도로 정비, 광장 조성, 수산물 홍보관 및 산책로 정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	14,441	-	3,702	5,776	4,963
국 비	10,109	-	2,591	4,043	3,474
시 도 비	1,300	-	333	520	447
시군구비	3,033	-	777	1,213	1,042
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 사업대상지 확정                                      : ‘19. 12.

○ 위수탁 계약(우리시→한국농어촌공사)                  : ‘20. 01.

○ 기본계획 수립 및 승인                                : ‘20. 11.

○ 실시설계 용역 착수                                   : ‘21. 02.

○ 공통사업 선 발주                                     : ‘21. 05.

□ 향후계획

○ 분야 별 공사 추진                                    : ‘22. 12.

사업명

노을과 가락의 섬 비안도 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과

정성욱(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적하고 안전한 어항건설로 어항시설의 현대화 및 어업활동 지원

○ 주민 주도로 사업을 추진하여 어촌마을 소득증대 및 어민 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 옥도면  비안도 일원

○ 규 모 : 외측방파제 확충 및 물양장 조성, 비안도길 연장, 쉼터 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	12,173	-	3,135	4,869	4,169
국 비	8,521	-	2,195	3,408	2,918
시 도 비	1,096	-	282	438	375
시군구비	2,556	-	658	1,022	875
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 사업대상지 확정                                      : ‘19. 12.

○ 위수탁 계약(우리시→한국어촌어항공단)                : ‘20. 01.

○ 기본계획 수립 및 승인                                : ‘20. 11.

○ 실시설계 용역 착수                                   : ‘21. 02.

○ 공통사업 선 발주                                     : ‘21. 05.

□ 향후계획

○ 분야 별 공사 추진                                    : ‘22. 12.

사업명

청암산 에코라운드 조성사업

담당자

환경정책과

전현정(☎454-4252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 자연환경을 활용한 생태관광 자원화로 지역주민 이익 창출

○ 생태관광 수요 증가에 따른 종합계획 추진 및 생태관광지 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 청암산 및 군산호수

○ 규 모 : 생태계 보전·복원, 생태관광 인프라 구축사업 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	7,200	2,294	385	3,021	1,500
국 비	1,700	1,143	190	367
시 도 비	3,700	571	96	1,908	1,125
시군구비	1,800	580	99	746	375
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 37%)

○ 2016년 추진사항

- 주민설명회 및 마스터플랜 용역 수립, 꼬마숲 놀이마당 조성, 청암 원앙길 조성 등

○ 2017년 추진사항

- 청암산 입구 생태주차장 조성, 힐링 편백숲 조성

- 생태연못 및 관찰데크, 대나무숲 생태학습장 조성

- 수변 탐방로 환경개선 및 제반사항 등

○ 2018년 추진사항

- 육화습지 복원 및 생태학습장 조성, 조류관찰대, 전망쉼터 및 등산로 정비 등

○ 2019년 ~ 2020년 추진사항

- 생태관광지 내(옥산 입구) 전선 지중화 추진

□ 향후계획

○ 청암산 생태체험센터 신축 등 년도별 사업계획에 따라 사업 추진

사업명

치매안심센터 건립(재심사)

담당자

건강관리과

오주빈(☎460-3277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매통합관리서비스 제공을 위한 치매안심센터 전용공간과 건물 노후화에 따른 정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 전용공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~2021년

○ 위 치 : 군산시 공단대로 482(나운동)

○ 규 모 : 5층(대지 740㎡, 연면적1,647.9㎡)

○ 내 용 : 치매안심센터, 정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터 전용공간

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,323백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,323	2,722	302	299
국 비	960	960
시 도 비	72	72
시군구비	2,291	1,690	302	299
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 건물(토지) 매입                                   : ‘19. 11.

○ 내진성능 평가 및 리모델링 설계 용역               : ’20. 06.

○ 일상감사 및 원가심사                              : ’20. 09.

○ 공사 계약 및 착공                                 : ’20. 11.

□ 향후계획

○ 리모델링 공사 완료                                : ‘21. 08.

○ 센터 이전 개소                                    : ’21. 08.

□ 사업변경 내역

구 분	총사업비	사업기간	사 유
당 초	2,700백만원	2019 ～ 2020
현 재	3,323백만원	2019 ～ 2021	내진보강공사 등 공사 추가분 발생 및 행정절차 기간 소요

사업명

서군산 축구장 조성사업

담당자

체육진흥과

온혜영(☎454-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 체육 인프라 구축

○ 부족한 서군산 지역의 체육시설 불균형 해소 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 산북동 3350 일원

○ 규 모 : 부지 34,795㎡(14,877㎡), 연면적 522㎡, 지상 2층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000	-	900	2,100	-
국 비	900	-	900	-	-
도비 (특별조정교부금)	300	-	-	300	-
시군구비	600	-	-	600	-
특별교부세	1,200	-	-	1,200	-
민간자본		-	-	-	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 기본 및 실시설계용역 시행                             : ‘20. 03월 ~ 07월

○ 서군산 축구장 및 부대시설 조성공사 착공               : ‘ 20. 11월

□ 향후계획

○ 서군산 축구장 및 부대시설 조성공사 준공               : ‘21. 10월

○ 서군산 축구장 개관                                    : ‘21. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

서군산 복합체육센터 건립사업

담당자

체육진흥과

온혜영(☎454-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 체육 인프라 구축

○ 부족한 서군산 지역의 체육시설 불균형 해소 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 산북동 3350 일원

○ 규 모 : 부지 34,795㎡(19,918㎡), 연면적 8,342㎡, 지하1/지상3

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	28,000	1,000	400	2,000	24,600
국 비	8,400	1,000	-	500	6,900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,600	-	400	1,500	17,700
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5 %)

○ 지방재정(중앙)투자심사 심의                                : ‘19. 11월

○ 공공건축지원센터 건축계획 사전검토 심의                     : ‘20.  4월

○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수                           : ‘20.  9월

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 준공                                   : ‘21.  9월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 착공                           : ‘21. 11월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 준공                           : ‘23. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통행정과

백진숙(☎454-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주차환경조성으로 화물자동차 운전자들의 편의증진도모

○ 주요도로변 및 주택가 불법주차로 인한 민원 및 교통사고 위험 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2021

○ 위 치 : 군산시 옥녀로 6-172(내초동), 구)비위생 매립장 일원

○ 규 모 : 39,670㎡[주차장 255면, 부대시설(관리동 등)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,725백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	9,725	2	3,817	5,906
국 비	3,000		1,700	1,300
시 도 비	3,807		1,338	2,469
시군구비	2,918	2	779	2,137
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 화물공영차고지 조성계획 수립(비위생 매립장 부지)           : ‘12. 10월

○ 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획 선정(국토부)             : ‘14. 12월

○ 전북도 지방재정 투자사업 심사완료                           : ‘15. 7월

○ 2016~2020년 중기 지방재정계획 반영                        : ‘15. 9월

○ 사업부지 도시계획시설결정(재정비) 및 용도지역변경 용역 승인(전북도)  : ‘19. 1월

○ 실시설계 용역 추진                                          : ‘19. 3월

○ 전북도 지방재정 투자사업 재심사 완료                        : ‘19. 6월

○ 도시계획시설 실시계획인가 및 전라북도 원가심사 완료         : ‘20. 4월

○ 화물자동차 공영차고지 조성공사 착공                         : ‘20. 5월

□ 향후계획

○ 화물자동차 공영차고지 조성공사 준공                        : ‘21. 11월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

대야면 노인복지관 신축

담당자

경로장애인과

권태환 (☎454-3184)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역 고령화에 따른 노인여가 복지시설 확충으로 노인 계층 소외 및 여가 활동        개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 12 ~ 2021. 11

○ 위 치 : 군산시 대야면 지경리 731-20 외 1필지

○ 규 모 : 건축연면적 870.05㎡ (지상3층/철근콘크리트)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,000		266	2,734
국 비
시 도 비
시군구비	3,000		266	2,734
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 대야면 노인복지관 신축공사 설계용역 완료

○ 기존건물 지정폐기물(석면텍스) 해체공사 및 감리용역, 석면농도 측정용역 완료

○ 기존건물 철거공사 및 페기물 처리 용역 완료

□ 향후계획

○ 대야면 노인복지관 신축공사 착공 및 완공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

노인회관 건립

담당자

경로장애인과

송현순(☎454-3183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대한노인회 군산시지회 숙원사업인 노인회관 건립으로 쾌적한 환경

조성하여 노인복지 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1 ~ 22. 6

○ 위 치 : 군산시 오룡로 840-10번지 외

○ 규 모 : 건축연면적 1,168㎡ (지상3층/콘크리트조)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   3,963백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	3,963		265	600	3,098
국 비
시 도 비
시군구비	3,963		265	600	3,098
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10 %)

○ 공유재산관리계획 변경 동의안 가결

○ 사업대상 사유지 매입 및 용도변경 완료

○ 노인회관 기존 건축물 철거공사 및 폐기물 처리 용역 완료

○ 공공건축물 경관 심의 완료

□ 향후계획

○ 노인회관 신축공사 실시설계 납품 및 일상감사 의뢰

○ 노인회관 신축공사 착공 및 준공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군산사랑상품권 발행 및 운영사업

담당자

소상공인지원

홍지연(☎454-2663)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역자금 역외유출 방지 및 관내 소상공인 경영안정 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 20. 1. 1  ~ 20. 12. 31

○ 규 모 : 5,000억원 발행 (지류3,000, 모바일·카드 2,000)

○ 예 산 : 586억원 (국386. 도5. 시195)

○ 내 용 : 관내에서만 사용가능한 상품권을 발행하여 할인 판매 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   292,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	292,500	60,100	56,600	58,600	117,200
국 비	172,100	23,100	33,200	38,600	77,200
시 도 비	3,500	500	1,500	500	1,000
시군구비	116,900	36,500	21,900	19,500	39,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  60 %)

○ 군산사랑상품권 991,000백만원 판매완료 (2018~2020)

□ 향후계획

○ 군산사랑상품권 발행 및 판매

○ 상품권 부정유통 단속을 통한 건건한 유통질서 확립

□ 사업변경 내역(해당없음)