개별 투자심사 사업 추진현황

별지 10

사업명

군산사랑상품권 발행 및 운영사업

담당자

소상공인지원과 홍지연 (☎454-2662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역자금 역외유출 방지 및 관내 소상공인 경영안정 지원

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘21. 1. 1 ~ ’21. 12. 31

○ 발행규모 : 4,700억원 (지류 2,850억, 모바일·카드 1,850억)

○ 예    산 : 535억원 (국 335, 도 5, 시 195)

○ 내    용 : 관내에서만 사용가능한 상품권을 발행하여 할인 판매 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  248,307백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	248,307	115,130	53,517	41,193	40,500
국 비	118,977	56,300	33,517	14,880	15,000
시 도 비	3,500	2,000	500	500	500
시군구비	125,830	56,830	19,500	25,813	25,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

○ 군산사랑상품권 1조4천6백1십억원 판매완료 (2018~2021)

□ 향후계획

○ 군산사랑상품권 발행 및 판매 지속추진

○ 상품권 부정유통 단속을 통한 건건한 유통질서 확립

사업명

전북 군산 강소연구개발특구 육성 지원사업

담당자

산업혁신과 이한빛 ( ☎ 454-2742 )

□ 사업목적 및 필요성

○ R&D⇒기술사업화⇒창업·기업 성장⇒재투자의「선순환 산업생태계」조성

○ 특구내 기술창업 플랫폼과 창업기업 후속 성장지원으로 강소기업 육성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 3. ~ 2025. 2.

○ 위    치 : 군산국가·2산단, 새만금산단(1공구)

○ 사업내용 : 기술발굴, 기술사업화(R&BD), 창업, 연구소기업 육성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 222백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	22,200	-	7,200	6,300	8,700
국 비	16,000	-	6,000	4,000	6,000
도 비	2,800	-	600	850	1,350
시 비	3,400	-	600	1,450	1,350

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2021년도 기술이전사업화(R&BD) 지원사업 선정(군산 15개사)   :□21. 8.

○ 연구소기업 설립(7개사)                                      :□21. 9.

○ 강소특구 혁신성장 IR 경진대회 수상(2개사)                   :□21.11.

○ 연구소기업 추가 설립(2개사)                                 :□22. 4.

○ 2022년도 1차 기술이전사업화(R&BD) 지원사업 선정(군산 8개사) :□22. 6.

□ 향후계획

○ 2차 기술이전사업화(R&BD) 신청기업 컨설팅 지원         : ‘22. 하반기

○ 지역 특성화 육성지원 및 혁신네트워크 추진              : ‘22. 하반기

○ 연구소기업 및 첨단기업 설립 추진                       : ‘22. 하반기

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 21,600백만원 ⇒ (변경) 22,200백만원

○ 변경사유 : 지역 특성화 육성 활성화를 위한 시비 추가 지원

사업명

산업단지 복합문화센터 건립

담당자

산업혁신과 윤용묵 (☎ 454-2752 )

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 문화‧체육‧편의시설 미비로 인한 청년‧기술인력의 취업기피 분위기 전환, 지역주민 및 근로자 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 08.

○ 위 치 : 군산시 오식도동 661번지

○ 규 모 : (건축면적) 1,373.87㎡ / (연 면 적) 3,018.71㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,791.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,791.5	245	259	7,280	2,007.5
국 비	3,294		15	3,279
시 도 비	988	245	244	499
시군구비	5,509.5			3,502	2,007.5
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 산업단지 복합문화센터 건립사업 협약체결                  : `19. 11.

○ 공유재산 심의회 심의 및 중기지방재정계획승인             : `19. 11.

○ 공공건축 사업계획 의견조회(건축도시공간연구소)             : `20. 1~3.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 설계용역 추진       : `20. 11.~‘21. 12.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 착공                      : `22. 05.

○ 협약변경(사업기간 연장) 승인 신청서 제출                  : `22. 06.

□ 향후계획

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 추진                : `22. 05.~‘23. 08.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 9,175백만원 ⇒ (변경) 9,791.5백만원

○ 변경사유 : `19년도 지방재정투자심사 이후 총사업비 확정

사업명

2021년 전라북도 사회적경제 박람회

담당자

일자리정책과 박지은 (☎ 454-4372 )

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역주민들이 쉽고 즐겁게 참여할 수 있는 박람회와 부대행사를 통해 사회적경제 대한 지역의 인식제고 및 가치 확산

○ 성장하고 있는 전라북도 사회적경제 조직들의 제품과 서비스를 한자리에 모아 판로를 개척하고 윤리적 소비자층을 확대해 지속가능성을 높이고자 함

○ 사회적경제 생태계의 다양한 구성원들이 함께 직접 기획하고 실행하는 행사를 통해 민간의 네트워킹을 촉진하고 주민역량을 강화하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 11월 19일 ～ 2021년 11월 21일(3일간)

○ 위 치 : 군산새만금컨벤션센터(GSCO)

○ 사업내용

- 사회적경제기업 제품‧서비스 전시, 홍보, 판매

- 당사자조직 네트워크 및 사회적경제 소개 및 주요 정책 소개

- 체험 및 문화예술공연, 커뮤니티 라운지 운영

- 분야별 학술행사 및 사회적경제조직, 관람객 참여 프로그램 등 부대행사로 구성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  193백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	193	-	193
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	96.5	-	96.5	-	-
시군구비	96.5	-	96.5	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :100%)

○ 2021년 5월 : 2021 전북 사회적경제 박람회 추진계획 수립

○ 2021년 7월 ~ 10월 : 전북 사회적경제 박람회 준비

○ 2021년 11월 : 전북 사회적경제 박람회 개최

○ 2021년 12월 : 전북 사회적경제 박람회 결과 및 평가 보고

사업명

해상풍력 산업지원센터 구축사업

담당자

새만금에너지과 두이숙 (☎ 454-4414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상풍력 전문인력 양성, 단지조성 지원 및 수용성 확보지원 등을 종합       수행할 센터지원.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2024.(5년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연7

○ 규 모 : 센터구축(부지 14,000㎡, 연면적 8,351㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	42,000	4,000	10,760	4,400	22,840
국 비	22,000	2,000	2,000	3,400	14,600
도 비	10,000	1,000	4,380	500	4,120
시 비	10,000	1,000	4,380	500	4,120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

○ 해상풍력 산업지원센터 구축 기본계획 수립용역 : 2021. 4.

○ 산업지원센터 입주심사 완료                   : 2022. 5.

○ 투자협약 체결                                : 2022. 6.

□ 향후계획

○ 산업지원센터 기본 및 실시설계 : 2022. 6.∼ 2023. 9.

○ 해상풍력 산업지원센터 구축    : 2023. 6. ∼ 2024. 12.

○ 장비구축                      : 2023. ∼

사업명

재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구 기반 구축

담당자

새만금에너지과 두이숙 (☎ 454-4414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래·친환경 에너지를 한 곳에서 종합적으로 실증할 수 있는 인프라구축 및      실증R&D를 통해 재생에너지 산업경쟁력 제고

□ 사업개요

○기 간 : 2020. ∼ 2025.(6년)

○위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 및 공유수면

○규 모 : 국가종합실증연구단지 구축(50,000㎡), 수상태양광 발전시설(20MW), 통합 관제                 센터(2,275㎡) 및 신재생에너지 실증설비 구축, 통합실증 R&D지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 94,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	94,710	6,150	18,900	9,680	59,980
국 비	64,810	5,700	14,300	8,700	36,110
도 비	14,950	225	2,300	490	11,935
시 비	14,950	225	2,300	490	11,935
기 타

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

○ 선도산업으로<디지털트윈사업>정부추경예산 반영 : 2020. 7. 3.

○ 국비 371.1억원 추가 확보(사업기간 연장 ‘22⇒’25년) : 2021. 11. 26.

- 기재부 적정성 재검토 통과(기재부 재정사업평가위원회/사업비 증액)

*  (당초) 357억원 (국비277 도비40 시비40)

* 재생에너지 국가종합실증연구단지 구축사업(예타철회 ‘20.11)

□ 향후계획

○ 친환경 교통시스템 수소 충전소 구축 : 2022.下∼ 2023.

○ 통합관제센터 시스템 및 AD/DC시험선로 설계     : 2022. 10. ∼

○ 통합관제센터(TOC)착공 및 개방형 실증플랫폼 설계 : 2023. 1.∼

○ 수상태양광 착공                                 : 2023. 4.∼

○ 단지 통합운영                                   : 2025.∼

사업명

동부권 신재생에너지 융복합지원사업

담당자

새만금에너지과 한정욱(☎454-4422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지 메카로 떠오르는 새만금과 더불어 신재생에너지 중심도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. 29. ~ 12. 21.

○ 위 치 : 동부권(임피면,서수면,대야면,개정면,성산면,나포면)

○ 규 모 : 시민 주택, 상가에 신재생에너지 보급

605가구(태양광 578, 태양열 15, 지열 12)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,386백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,386		3,386
국 비	2,151		2,151
시 도 비
시군구비	1,235		1,235
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   100%)

○ 동부권 융복합지원사업 공모 확정                 : 2020. 9.

○ 한국에너지관리공단 업무협약 체결                : 2021. 1.

○ 신재생에너지 설치완료 및 자금집행               : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 신재생에너지 사후 관리 및 정산                  : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : 당초 3,642백만원,  변경 3,386백만원

○ 사업규모 : 당초 618가구(태양광 569, 태양열 35, 지열 14)

변경 605가구(태양광 578, 태양열 15, 지열 12)

사업명

중고차 수출복합단지 조성사업

담당자

항만해양과 강영진 (☎ 454-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산의 주력산업 붕괴에 따른 산업·고용 위기지역 활력 프로젝트 사업 추진

○ 중고차를 수출 산업으로 육성하여 지역경제의 新 성장동력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023

○ 위 치 : 새만금산업단지 5공구 유통-1

○ 규 모 : 대지면적 197,824㎡, 건축연면적 30,010㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 140,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	140,900	0	7,600	97,740	35,560
국 비	27,500	0	1,000	20,140	6,360
시 도 비	11,200	0	0	7,100	4,100
시군구비	11,200	0	6,600	500	4,100
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	91,000	0	0	70,000	21,000
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 행정안전부 타당성 조사 이행                      : ‘19. 12. ~ ’20. 7.

○ 사업대상 부지 협의 및 확정                       : ‘21. 2.

○ 민간사업자 공개모집 및 실시협약 체결             : `21. 5. ~ `21. 10.

○ 기본 및 실시설계 추진                            : `21. 12. ~ `22. 6.

□ 향후계획

○ 행정안전부 지방재정투자심사 2단계 심사           : `22. 6. ~ `22. 8.

○ 새만금산업단지 통합개발계획 수정                 : `22. 6. ~ `22. 10.

○ 시설공사 추진                                    : `22. 11. ~ `23. 下

○ 새만금 자동차 수출복합센터 개장                  : `23. 下

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업규모 : (당초) 대지 124,629㎡, 건축연면적 22,377㎡, 사업비 1,050억원

(변경) 대지 197,824㎡, 건축연면적 22,300㎡, 사업비 1,409억원

사업명

광역 해양레저체험 복합단지 조성사업

담당자

항만해양과 이정준 (☎ 454-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도의 다양한 해양자원을 활용한 통합 관광인프라 조성

○ 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 산65번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	39,800	6,000	7,400	10,120	16,280
국 비	19,345	3,000	3,700	5,060	7,585
시 도 비	5,532	600	1,110	1,518	2,304
시군구비	14,923	2,400	2,590	3,542	6,391

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 사업계획 승인(해수부) 및 군산시 사업시행자 지정        : `21. 2.

○ 지방재정 중앙투자심사 조건부 승인(행안부)              : `21. 8.

○ 새만금 용도별 통합개발계획 승인 신청(새만금개발청)     : `21. 10.

○ 진입도로 인허가 및 시행계획 승인, 공사 착공            : `21. 12.

○ 환경영향평가(환경부) 및 중토위 등 관계기관 협의 완료   : `22. 5.

□ 향후계획

○ 새만금개발통합심의 및 새만금위원회 심의       : `22. 6.~8.

○ 해양관광 SOC사업 시행계획 승인(전라북도)      : `22. 9.

○ 본단지 공사 계약 및 착공                      : `22. 11.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 부지면적 64,771㎡  (변경) 부지면적 64,365㎡

○ 사업기간 : (당초) 2019 ~ 2023년     (변경) 2019 ~ 2024년

사업명

온리원 고군산 관광벨트 조성사업

담당자

항만해양과 강형기 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급변하는 고군산지역에 중앙 다부처의 협약을 통한 동시 사업투자로

지역의 특화된 도서관광 벨트화 조성 및 지역 균형발전 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 고군산 일원

○ 규 모 : 어항개발, 도로정비, 차도선, 자율주행버스, 특산물 판매부스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	18,200	11,220	3,942	3,038	-
국 비	9,100	5,610	1,971	1,519
시 도 비	2,730	1,683	591	456
시군구비	6,370	3,927	1,380	1,063
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 신시도항 및 방파제 조성 추진                         : 2020. 12.

○ 장자도 차도선 선착장 매표소 및 부대시설 완료         : 2022. 06.

□ 향후계획

○ 무녀도 특산물 판매장 조성공사 준공                   : 2022. 10.

○ 신시도항 방파제 조성공사 준공                        : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 사업기간 : 2019. ~ 2021.12.  변경 사업기간 : 2019. ~ 2022.12

사업명

무녀2구항 어촌뉴딜300 사업

담당자

항만해양과 정주환 (☎ 454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀2구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,960	5,236	6,685	3,039	-
국 비	10,472	3,665	4,679	2,128	-
시 도 비	1,347	471	601	273	-
시군구비	3,141	1,100	1,405	638	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본계획 고시                                        : 2020. 05.

○ 방파제 및 어항시설 공사 준공                         : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 마을정비 및 특화사업  준공                           : 2022. 07.

○ 주민역량강화사업 준공                                : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

선유1구항 어촌뉴딜300 사업

담당자

항만해양과 정주환 (☎ 454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유1구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,907백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,907	1,068	1,563	1,276	-
국 비	2,735	748	1,094	893	-
시 도 비	352	96	141	115	-
시군구비	820	224	328	268	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 고시                                        : 2021. 01.

○ 방파제시설 확충공사 착공                             : 2022. 05.

□ 향후계획

○ 방파제 확충 및 토목공사  준공                        : 2022. 12.

○ 주민역량강화사업 준공                                : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

장자도 장자어화 어촌뉴딜300 사업

담당자

항만해양과 강형기 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,441	3,702	5,776	4,963	-
국 비	10,109	2,592	4,043	3,474	-
시 도 비	1,300	333	520	447	-
시군구비	3,032	777	1,213	1,042	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 고시                                        : 2021. 01.

○ 장자어화 토목공사 착공                               : 2021. 09.

□ 향후계획

○ 정자어화 주민센터 착공                               : 2022. 09.

○ 주민역량강화사업 준공                                : 2022. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

무녀1구 어촌정주어항 개발사업

담당자

항만해양과 강형기 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴하는 어촌지역의 어항기반시설 확충으로 소득증대 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023. (7개년)

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 무녀1구항 일원

○ 규 모 : 어촌정주어항 개발 A=12,307㎡

- 준설(9,908㎡), 매립(7,633㎡), 물양장 88m, 호안 162m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,500	4,163	1,250	2,100	1,987
국 비	2,198	2,198
시 도 비	5,367	1,097	1,000	1,680	1,590
시군구비	1,935	868	250	420	397
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공유수면 매립면허 승인                               : 2019. 11.

○ 어항개발 3차분 완료                                  : 2021. 09.

□ 향후계획

○ 어항개발 4차분 준공(포장 및 우수공)                   : 2022. 11.

○ 함선 및 도교 준공                                    : 2023. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 당초 사업기간 : 2019. ~ 2021.12.  변경 사업기간 : 2019. ~ 2022.12

사업명

서래포구 어촌뉴딜300 사업

담당자

항만해양과 강형기 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 중동 서래포구항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,460		2,092	4,184	4,184
국 비	7,322		1,465	2,929	2,929
시 도 비	941		188	377	377
시군구비	2,197		439	878	878
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본계획 고시                                        : 2021. 12.

○ 기본 및 실시설계 착공                                : 2021. 07.

□ 향후계획

○ 건축공사 착공                                        : 2022. 12.

○ 주민역량강화사업 준공                                : 2023. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

두리도 어촌뉴딜300 사업

담당자

항만해양과 정주환 (☎ 454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 비안도리 두리도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	6,300		1,260	2,520	2,520
국 비	4,410		882	1,764	1,764
시 도 비	567		113	227	227
시군구비	1,323		265	529	529
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 착공                                : 2021. 07.

□ 향후계획

○ 두리어울터 잔교 착공                                 : 2022. 10.

○ 주민역량강화사업 준공                                : 2023. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

사업명

말도~방축도 인도교 개설사업

담당자

항만해양과 김도현 (☎ 454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인도교와 말도리 도서의 지역자원경관을 연계한 명품트레킹 코스개발       하여 관광활성화로 지역소득증대 및 군산시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2023

○ 위 치 : 군산시 옥도면 말도리 말도, 명도, 방축도 일원

○ 규 모 : 인도교 4개소 L=1,278m, B=2∼2.5m

- 제1교 L=308m, 제2교 L=410m, 제3교 L=477m, 제4교 L=83m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	27,000	11,296	8,933	6,155	616
국 비	21,597	9,037	7,147	5,413	-
시 도 비	2,700	1,130	893	676.5	-
시군구비	2,703	1,130	893	65	615
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수                    : 2017. 12.

○ 제4교(현수식 출렁다리, L=83m) 완료                     : 2018. 11.

○ 제1교, 제2교 거더 거치완료                              : 2022.  4.

□ 향후계획

○ 케이블설치, 교면포장, 난간설치 등                       : 2022.  9.

○ 제1교, 제2교 설치 완료                                  : 2022. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

선유도 내부관광로 개설사업

담당자

항만해양과 김도현 (☎ 454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서지역 차량 집중에 대비하여 순환기능을 갖는 내부도로 개설하여             교통편의성을 증대하여 관광객 및 주민들에게 쾌적한 도서환경을 제공하여          불편을 최소화 하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2022

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 (L=2.49km, B=10~12m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	13,375	12,875	-	500	-
국 비	10,700	10,300	-	400	-
시 도 비	1,337.5	1,287.5	-	50	-
시군구비	1,337.5	1,287.5	-	50	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 1공구(선유2구) 공사 완료                                : 2018. 11.

○ 3공구(선유3구) 공사 착공                                : 2020.  5.

○ 2공구(선유2구) 공사 완료                                : 2021.  4.

□ 향후계획

○ 3공구 공사 완료                                        : 2022. 10.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 : (당초) 16,000백만원  (변경) 13,375백만원

사업명

제2차 대표관광지 육성사업

담당자

관광진흥과 김나형  (☎454-3332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1시군 1대표관광지 육성 실현을 위한 도내 지역별 차별화된 콘텐츠 개발

○ 원도심 일원 근대문화유산 활용 문화관광 중심도시 이미지 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024. (5년)

○ 위 치 : 군산 시간여행마을 일원

○ 규 모 : 기반사업 3, 진흥사업 8

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원(도비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,396	532	400	1,464	2,000
도 비	4,396	532	400	1,464	2,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 21%)

○ (기반사업) 트래블라운지 조성 설계중

○ (진흥사업) 시간여행마을 및 축제 활성화를 위한 상설공연, 도시홍보 등 추진

□ 향후계획

○ 트래블라운지 조성사업 준공, 랜드마크 조형물설치 및 골목정비 등 추진

○ 시간여행마을 및 축제 활성화를 위한 상설공연, 도시홍보, 축제프로그램 등 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업비(2020~2024)	4,700백만원	4,400백만원	도비 교부액 축소

사업명

구암동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 권종득 (☎ 454-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전·위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년간)

○ 위 치 : 군산시 구암동 362-1번지 일원(장둑·외산마을)

○ 규 모 : 62,509㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,106.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,106.5	145.2	699.2	1,641.0	1,621.1
국 비	2,872.0	144.5	617.1	978.4	1,132.0
시 도 비	355.0	0.7	56.1	166.6	131.6
시군구비	879.5	-	26.0	496.0	357.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ ’20. 3. : 공모 선정(총괄/국가균형발전위원회, 사업관리/국토교통부)

○ ’21. 6. : 마스터플랜 승인(국토교통부) 및 방범용 CCTV 설치(5개소 16대)

○ ’21. 7. : 실시설계 용역 착수

○ ’21.11. : 휴먼케어 및 주민역량강화 용역 시행

□ 향후계획

○‘22. 7.~  : 실시설계 완료 및 구암경로당 리모델링 착공

○‘22. 하반기 : 도시가스 인입 및 골목길 정비 착공

○‘연중 : 주택정비지원사업 및 휴먼케어 사업(문화프로그램 운영 등)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

삼학동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 권종득 (☎ 454-4472)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전ㆍ위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024(4년간)

○ 위 치 : 군산시 금광동 156-1번지 일원

○ 규 모 : 39,575㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,509백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,509	-	118.1	976.2	2,414.7
국 비	2,456	-	81.8	684.2	1,690.0
시 도 비	316	-	11.3	87.2	217.5
시군구비	737	-	25.0	204.8	507.2
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘21. 3. : 공모 선정(총괄/국가균형발전위원회, 사업관리/국토교통부)

○ ’21. 4. : 지방재정투자심사

○ ‘21. 9. : 마스터플랜 수립 용역 착수

○ ’21.10. : 마을기업육성 컨설팅용역 착수

□ 향후계획

○ ‘22.10. : 마스터플랜 수립 완료 및 승인

○ ’22.11. : 실시설계용역 시행

○ ‘23. ~ ’24. : 세부사업 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

소룡동1구역 도시재생활성화계획

담당자

도시재생과 조진규 (☎ 454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민편익시설확충, 마을공동체활성화 등을 통해 정주 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년)

○ 위 치 : 군산시 소룡동 1473-4번지 일원

○ 규 모 : 76,975㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원                                (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	14,000	198.9	2,990.5	4,733.6	6,077
국 비
시 도 비	8,400	102.5	2,132.5	3,615	2,550
시군구비	5,600	96.4	858	1118.6	3,527
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○‘21. 1. : 마을길 확장공사 보상계획 공고

○‘21.1~4. : 순환형 임대주택 건설 공사 실시설계 용역 시행

○‘21.2~6. : 소룡동 CPTED 안심보행길 조성사업 실시설계 용역 시행

○‘21. 3. : 마을길 확장공사 보상 실시

○‘21.3~7. : 선형공원 조성사업 기본 및 실시설계 용역 시행

○‘21.6. : 어울림센터・광장조성사업 공유재산관리계획 동의안 심의 완료

○‘21.7~9 : 선형공원 조성사업 실시설계 완료 및 공사 착공

○‘21.9~10.: 어울림센터 조성사업 부지매입 협의 보상 실시

○‘21.12.: 순환형 임대주택 건설공사 준공

□ 향후계획

○‘22.7~12 : 마을길 확장공사 추진

○‘22.7    : 어울림센터·광장 보상 및 지장물 철거 시행

○‘22.7~10 : 실버커뮤니티센터 설계용역 추진

○‘22.12   : 어울림센터·광장 실시설계용역 착수

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

서군산 복합체육센터 건립사업

담당자

체육진흥과 온혜영(☎454-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 체육 인프라 구축

○ 부족한 서군산 지역의 체육시설 불균형 해소 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2023.

○ 위 치 : 군산시 산북동 3350번지 일원

○ 규 모 : 34,795㎡(19,918㎡), 연면적 8,452㎡, 지하1층 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	28,000	1,400	2,000	9,800	14,800
국 비	8,400	1,000	500	3,500	3,400
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,600	400	1,500	6,300	11,400
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 지방재정(중앙)투자심사 심의                              : ‘19. 11월

○ 공공건축지원센터 건축계획 사전검토 심의                  : ‘20.  4월

○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수             : ‘20.  9월 ~ ‘21.  9월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 착공                        : ‘22.  1월

○ 현재 기초파일공사 추진중(현공정율 10%)                   : ‘22.  6월

□ 향후계획

○ 미확보 예산 확보                                         : ‘22. 12월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 준공                        : ‘23. 12월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

금석배 전국 학생축구대회

담당자

체육진흥과 김준식 (☎ 454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 학생축구대회에서 메이저급 대회로 우리시 출신 故 채금석 선생님의

이름을 딴 우리나라 유일한 대회 중 하나로 한국 축구의 중흥의 대회로

초중고 엘리트 우수한 선수 발굴목적으로 개최 되는 품격 높은 대회

○ 금석배 축구대회의 명성에 부합한 원활한 행사 운영으로 축구메카

도시로서의 이미지 제고 및 축구꿈나무 발굴 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 연중 2회(고등부/초‧중등부 ) 각 12일간

[고등부 : 2021. 5. 15. ~ 5. 27.(13일간) / 초‧중등부 : 2021. 7. 24. ~ 8. 4.(12일간)]

○ 위    치 : 군산시 일원 축구장(월명, 대야, 금강, 제일고, 교통공원)

○ 규    모

구분	초등부	초등(저학년)	중등부	중등(저학년)	고등부	총 계
참가팀	48	24	31	28	40	171
경기수	144	72	60	41	79	396

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,669백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,669	300	579	890	900
국 비
시 도 비	448	50	108	140	150
시군구비	2,221	250	471	750	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20. 12월 : 대회승인

○ `20. 12월 : 대회홍보, 구장확정, 안전계획수립

○ `21. 04. 08.~ 04. 12. : 2021 금석배전국고등학생축구대회 참가신청

○ `21. 05. 15.~ 05. 27. : 2021 금석배전국고등학생축구대회 개최(13일간)

○ `21. 06. 15.~ 06. 18. : 2021 금석배전국(초중)학생축구대회 참가신청

○ `21. 07. 24.~ 08. 04. : 2021 금석배전국(초중)학생축구대회 참가신청

○ `21. 07. 27. : 참가 선수단 내 확진자 발생에 따라 대회 중도 취소

□ 향후계획

○ `21. 12월 : 2022년 대회 승인(중등 2월/고등 6월/초등 7월)

○ `22.  1월 : 2022년 대회 홍보, 구장확정, 안전계획수립

○ `22.  2월 : 2022 금석배전국중학생축구대회 개최(13일간)

○ `22.  6월 : 2022 금석배전국고등학생축구대회 개최(13일간)

○ `22.  7월 : 2022 금석배전국초등학생축구대회 개최(6일간)(미정)

□ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경	사 유
대회기간	2021 금석배 전국(초중)학생축구대회 (`21. 07. 24.~ 08. 04.)	2021 금석배 전국(초중)학생축구대회 (`21. 07. 24.~ 07. 27.)	선수단 내 코로나 확진자 발생으로 대회 중도 취소

사업명

KPGA 군산오픈 골프대회

담당자

체육진흥과 김준식 (☎ 454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 규모 81홀을 갖춘 골프장 인프라 시설을 활용하고, 프로대회

(KPGA) 유치를 통해 골프를 우리시 특화종목으로 자리매김

○ 프로골프대회 유치를 통해 새만금의 도시 군산을 전국적으로 홍보하고

명품 스포츠 도시 이미지 구축

○ 프로스포츠 개최로 시민들에게 볼거리를 제공하고 지역 스포츠 활성화를

통한 시민의 삶의 질 향상

○ 스포츠와 군산시 관광자원의 연계를 통해 방문객들의 만족도를 높이고

이를 통해 방문객들의 재방문을 유도하여 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 4. 29.(목) ~ 5. 2.(일), 4일간

○ 위    치 : 군산컨트리클럽

○ 규    모 : KPGA 1부 코리안투어(남) 선수 156명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 420백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	420	80	100	120	120
국 비
시 도 비	80	20	20	20	20
시군구비	340	60	80	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ KPGA 군산오픈대회 개최 협약식             : 2020. 01월

○ 유관기관 실무자회의 및 종합운영계획 수립    : 2021. 02월

○ 대회 홍보 및 후원모집                       : 2021. 02월 ~ 03월

○ 2021 KPGA 군산CC오픈 프로골프 대회 개최   : 2021. 04. 29. ~ 05. 02.

□ 향후계획

○ 2022년 대회 개최 관련 유관기관 업무협의      : 2021. 12월

○ 2022년 대회 개최 일정 승인                   : 2022. 02월

○ 대회 홍보 및 후원모집                        : 2022. 03월 ~ 05월

○ 2022 KPGA 군산오픈 프로골프 개최            : 2022. 08월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산 새만금 국제 철인3종 경기대회

담당자

체육진흥과 김준식 (☎ 454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도 등 천혜의 관광자원을 보유하고 있는 군산새만금을 국제적으로

홍보하고 지역경제 활성화에도 크게 기여

○ 참가선수와 가족, 시민이 함께 어우러질 군산시의 대표적 축제로

자리매김하여 군산시를 복합 스포츠 문화도시로 도약시키는 발판 마련

○ 수준 높은 대회를 통한 지역경제 활성화와 국내‧외 선수 및 동호인이

참여하는 품격 높은 축제의 장 마련

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 10. 3.(일), 4일간

○ 위    치 : 새만금방조제 일원

○ 규    모 : 선수 197명(남 169명, 여 28명)

□ 언택트 웹 예선전(~8.30) 1,482명 → 세미파이널(9.4~5) 391명 → 슈퍼파이널(10.3) 197명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 911.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	911.5	100	286	305.5	220
국 비	191.5		96	95.5
시 도 비	160	0	50	50	60
시군구비	560	100	140	160	160
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :   %)

○ 2021년 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 선정(국비 96백만원) : `21. 02. 03.

○ 언택트 웹 예선전(`21. 8. 14. ~ 8. 29. / 누적 참여인원 1,482명)

○ 세미파이널(`21. 9월 / 예선 통과자 391명)

- 야외수영(수면) 750m, 사이클(스마트 롤러) 20km, 달리기(자전거 도로) 5km

○ 슈퍼파이널(`21. 10. 3.(일) / 세미파이널 통과자)

- 대면 경기 진행(새만금방조제 일원) 197명, 언택트(국제부) 28명

□ 향후계획

○ 2022 군산새만금국제철인3종경기대회 개최 승인    : `21. 12월

○ 2022년 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 지원    : `22. 01월

○ 2022 군산새만금국제철인3종경기대회 홍보 및 모집 : `22. 02월~04월

○ 유관기관 업무협의 추진(도로, 해수면 사용허가, 교통통제 등)  : `22. 04월

○ 2022 군산새만금국제철인3종경기대회 개최         : `22. 05월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

전국스포츠클라이밍대회

담당자

체육진흥과 김준식 (☎ 454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 스포츠클라이밍 동호인 화합과 향후 발전을 도모하며, 강인한 체력을

바탕으로 도전정신을 고취시키는 한편 전라북도 부안군 출신의 여성 산악인

故고미영의 업적을 기리며 전국의 클라이머들의 전라북도 방문을 통해 지역

경제 활성화 도모

○ 2020년 소룡동 인공암장 시설확충 및 개선사업 완료 후 군산클라이밍센터를

전국에 알리고 활성화 하고자 함

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 6. 12.(토) ~ 6. 13.(일), 2일간

○ 위    치 : 군산클라이밍경기장(소룡동)

○ 규    모 : 3개 종목(리드, 스피드, 볼더링) 300여명(선수 200명, 기타 100명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	460	80	120	130	130
국 비
시 도 비	100	20	20	30	30
시군구비	360	60	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21.03.01-03.31 대회장소 결정 및 사업계획 수립

○ `21.04.01-04.30 경기장 리모델링 완료 및 주변정비

○ `21.05.01-05.31 대회요강 및 참가선수 신청접수

○ `21.06.01-06.11 대회준비 및 코로나19 방역및 선수 안전대책 수립

○ `21.06.12-06.13 대회 개최

□ 향후계획

○ 2022년 전국스포츠클라이밍대회 사업계획 수립   : `21. 12월

○ 2022년 전국스포츠클라이밍대회 사업 승인        : `22. 04월

○ 2022년 전국스포츠클라이밍대회 사전 홍보 및 준비 : `22. 05월~08월

○ 2022년 전국스포츠클라이밍대회 개최             : `22. 10월 중(2일간)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

대야면 노인복지관 신축

담당자

경로장애인과 문서연 (☎454-3186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역 고령화에 따른 노인여가 복지시설 확충으로 노인 계층

소외 및 여가 활동 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 12 ~ 2021. 12

○ 위 치 : 군산시 대야면 지경리 731-20 외 1필지

○ 규 모 : 건축연면적 870.85㎡ 대지 1,766㎡ (지상3층/철근콘크리트)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,758백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,758	266	2,492	-	-
국 비
시 도 비
시군구비	2,758	266	2,492	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대야면 노인복지관 준공 완료(2021. 12. 16.)

□ 향후계획

○ 운영비 2차 추경 반영

○ 민간위탁 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산시 승화원 제추모4관(봉안당) 신축

담당자

경로장애인과 강봉국 (☎ 454-7952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 장례문화 인식변화 및 화장·납골에 대한 수요 증가로 추모관의 증설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01 ~ 2023. 03

○ 위 치 : 군산시 임피면 보석리 산16, 452-3

○ 규 모 : 건축 연면적 3,600㎡(지상 4층), 봉안실(안치단 18,000기), 관리실               유족대기실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,600	111	1,842	4,800	2,847
국 비	3,815	77	1,362	2,376	-
시 도 비	817	17	245	555	-
시군구비	4,968	17	235	1,869	2,847
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 공사 착공 후 암반 제거 작업 완료

○ 1차 설계변경 및 변경 계약

□ 향후계획

○ 하절기 내 1차 공사 완료

○ 23년 상반기 준공 예정

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 22년 상반기 내 1차 공사 완료 예정이었지만, 착공 후 암반이 발견되어 설계변경 후 암반 제거

사업명

군산시 노인회관 건립

담당자

경로장애인과 두경숙 (☎ 454-3183)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인회관 건립으로 쾌적하고 안전한 노인복지공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01 ∼ 2022. 10

○ 위 치 : 군산시 오룡동 840-10번지 일원

○ 규 모 : 신축 (지상3층, 콘크리트조, 건물연면적 1,164㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,963백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,963	266	1,392	2,305
국 비
시 도 비	1,000		1,000
시군구비	2,963	266	392	2,305
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 노인회관 신축공사 설계용역, 실시설계 납품 및 일상감사 완료

○ 기존건물 철거공사 및 페기물 처리 용역 완료

○ 1층 골조공사 진행 중

□ 향후계획

○ 노인회관 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

월명공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 조은성 (☎ 454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(월명공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2023. 12월

○ 위 치 : 월명공원(군산시 해망동, 소룡동 일원)

○ 규 모 : 공원 내 사유토지 297천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	28,000		7,876	124	20,000
국 비
시 도 비
시군구비	8,000		7,876	124
지 방 채	20,000				20,000
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 28%)

○ 공원 내 필수지역 우선매입  : 18년 1월 ~

- 등산로, 공원시설 사용부지, 재해위험지, 국공유지 밀집지역 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : 19. 5월 ~ 20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : 20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : 20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 매입

사업명

군봉공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 조은성 (☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(월명공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2023. 12월

○ 위 치 : 군봉공원(군산시 개정동, 구암동 일원)

○ 규 모 : 공원 내 사유토지 942천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	27,000		6,555	1123	20,322
국 비
시 도 비
시군구비	6,678		6,555	123
지 방 채	20,322				20,322
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 공원 내 필수지역 우선매입  : 18년 1월 ~

- 등산로, 공원시설 사용부지, 재해위험지, 국공유지 밀집지역 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : 19. 5월 ~ 20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : 20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : 20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 매입

사업명

임피면 농마교 재가설공사

담당자

건설과 최병화(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 임피면 술산리 682-14인근

○ 규 모 : 교량 가설 L=91.0m, B=5.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,100	548	852	700
국 비	560	220	340
시 도 비	1,540	328	512	700	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ ‘19.09. : 재난안전 특교세교부 결정

○ ’20.12. : 실시설계 완료 및 공사 착공

○ ‘21.12. : 1차분 공사추진(공정률 90%)

○ ‘22.05. : 보상완료(수용재결 결정완료 ’22.5.12.)

□ 향후계획

○ ‘22.07 ~ ’23.06 : 잔여 공사추진

사업명

고군산군도 내부도로(무녀선) 확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.3km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,000	1,750	110	875	6,375
국 비	7,200	1,400	90	700	5,100
시 도 비	900	175	10	87.5	637.5
시군구비	900	175	10	87.5	637.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료 : ‘20. 12월

○ 1공구 편입토지 보상계획 완료 : ’21.  8월

○ 1공구 보상추진 (협의보상 2회) : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 1공구 보상                  : ‘22.  7월 ~

○ 2공구 기본 및 실시설계추진  : ‘23. 10월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

고군산군도 내부도로(신시선) 확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 신시도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.2km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	7,700	623	5,477	320	1,280
국 비
시 도 비
시군구비	7,700	623	5,477	320	1,280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료  : ‘19. 12월

○ 1공구 착공                   : ’20.  1월

○ 1공구 준공                   : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 2공구 보상추진               : ‘22. 7월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

고군산군도 내부도로(장자선) 확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.3km, B=3→6.5m, 교량재가설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	5,500	850	500	4,000	650
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	850	500	4,000	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 장자선 공사착공        : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 공사 준공      : ‘23.  6월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

선유3구 남악마을 도로확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선유도를 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2020년	2021년	2022년 이후
계	6,600	173	827	400	5,200
국 비
시 도 비
시군구비	6,600	173	827	400	5,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 편입토지 보상협의      : ’21.  2월 ~

□ 향후계획

○ 편입토지 보상          : ‘21.  7월 ~

○ 공사 착공              : ‘23.  1월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

군도 6호선(석화~고척) 도로확포장공사

담당자

건설과 서현기 (☎ 454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시내버스 통과구간의 협소한 도로 확장으로 지역주민에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 대야면 석화마을 ~ 고척마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,200	700	300	200	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	700	300	200	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 완료         : ‘20. 5월

○ 공사 재착공           : ’22. 6월

□ 향후계획

○ 공사 추진             : ‘22.  6월 ~ ’24. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

옥구면도 105호(옥정마을) 도로확포장공사

담당자

건설과 서현기 (☎ 454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 옥장리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.0km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,700	177	73		2,450
국 비
시 도 비
시군구비	2,700	177	73		2,450
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 보상계획공고          : ’21. 8월

○ 감정평가 의뢰         : ’22. 6월

□ 향후계획

○ 편입토지 보상협의     : ‘22.  7월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

옥도리도 203호 도로확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.5km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,600	134	66		2,400
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	134	66		2,400
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 문화재 현상변경 결정  : ’22. 5월

□ 향후계획

○ 실시설계 완료         : ‘22. 7월 ~ ’22. 12월

○ 보상추진              : ‘23. 1월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

회현리도 210호선 도로확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 군산시 회현면 회현초교 ~ 척동마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.6km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,700	128	949	600	2,023
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	128	949	600	2,023
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 완료         : ‘19. 12월

○ 편입토지 보상 및 착공 : ’19. 12월

□ 향후계획

○ 편입토지 보상  : ‘22.  7월 ~

○ 공사 재착공    : ‘22.  7월 ~ ’24. 12월

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

옥산 리도 206호선(대려~금성) 도로확포장공사

담당자

건설과 서현기(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥산면 옥산리 ~ 회현면 금성리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.7km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	4,000	77	73		3,850
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	77	73		3,850
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘21.  3월 ~

□ 향후계획

○ 실시설계 완료         : ‘22. 12월

○ 보상추진              : ‘23. 1월 ~

□ 사업변경 내역

○ 사업규모, 총사업비, 사업기간, 수요예측 등에 변경이 있는 경우 변경된 상세내역을 당초와 현재로 구분하여 기재

사업명

고령자 복지주택사업

담당자

주택행정과 이영범(☎454-3713)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전 세계적으로 노인인구의 급격한 증가로 고령화 사회가 빠르게 진행되면서

노인문제가 사회문제의 중심으로 떠오르는 가운데 고령사회의 충격을 대비한

맞춤형 임대주택 및 복지서비스 공급으로 65세이상 노령층 등의 주거안정

불안을 해소하고 복지시설을 일체화하여 주거･복지혁신을 통한 실질적인

삶의 질을 높이기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 전라북도 군산시 오룡동 900-40번지 일원

○ 규 모 - 주택건설 : 고령자 복지주택 150호(전용 26㎡)

- 복지시설 : 1∼2층 연면적 1,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	22,041	9,372	4,270	2,731	5,668
국 비	14,911	5,480	3,050	2,731	3,650
시 도 비
시군구비	2,251	1,697			554
지 방 채
민간자본
기 타(LH)	4879	2,195	1,220		1,464

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 사업계획승인 고시 (국토부 2020. 1.)

○ 사업인정고시 신청 (국토부 2020. 1.)

○ 사업인정 통지 (국토부 2020. 11.)

○ 수용재결 신청 (전라북도 2021. 2.)

○ 전라북도지방토지수용위원회 개최 : 2021. 7.

○ 수용재결 및 공탁 : 2021. 7.

○ LH에 토지인계 및 공사착수 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2023. 10.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 – 연면적 : (변경 전) 9,689.17㎡
(변경 후) 9,685.13㎡

○ 총사업비 : (변경 전)16,551,920천원(정부재정지원금 14,911,050천원)

(변경 후)21,457,286천원(정부재정지원금 14,911,050천원)

※ 정부재정지원금은 동일하고, 우리시 및 LH공사의 자금 계획에 따라

변경됨.

○ 사업기간 : (변경전) 2019.12. ~ 2022.12.

(변경후) 2019.12. ~ 2023.12.

사업명

화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통행정과 백진숙 (☎ 454-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주차환경조성으로 화물자동차 운전자들의 편의증진도모

○ 주요도로변 및 주택가 불법주차로 인한 민원 및 교통사고 위험 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 군산시 옥녀로 6-172(내초동), 구)비위생 매립장 일원

○ 규 모 : 39,670㎡[주차장 255면, 부대시설(관리동 등)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,325백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	9,325	3,196	4,417	1,712
국 비	3,000	1,700	1,300
시 도 비	3,407	1,338	2,069
시군구비	2,918	158	1,048	1,712
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 화물공영차고지 조성계획 수립(비위생 매립장 부지)         : ‘12. 10월

○ 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획 선정(국토부)           : ‘14. 12월

○ 전북도 지방재정 투자사업 심사완료                        : ‘15. 7월

○ 2016~2020년 중기 지방재정계획 반영                       : ‘15. 9월

○ 사업부지 도시계획시설결정(재정비) 및 용도지역변경 용역 승인(전북도) : ‘19. 1월

○ 실시설계 용역 추진                                       : ‘19. 3월

○ 전북도 지방재정 투자사업 재심사 완료                     : ‘19. 6월

○ 도시계획시설 실시계획인가 및 전라북도 원가심사 완료      : ‘20. 4월

○ 화물자동차 공영차고지 조성공사 착공                      : ‘20. 5월

○ 화물자동차 공영차고지 준공                               : ‘22. 1월

○ 화물자동차 공영차고지 운영    　                         : ‘22. 3월~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당사항 없음

사업명

꼬꼬마양배추저온유통체계구축사업

담당자

먹거리정책과 진가람(☎454-3014)

□ 사업목적 및 필요성

○ 저온유통체계 구축을 통한 원예농산물 상품성 향상과 농가소득증대

○ 군산시 꼬꼬마 양배추는 일반 양배추 및 일본양배추에 비해 비타민U         (MMSC)성분 다량함유로 인기의약품인 카베인정의 주요성분으로 사용되고      있어 의약품 및 화장품 등의소재 산업으로 발전 가능성 시사

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 3. ~ 2021. 12.

○ 위 치 : 군산시 성산면 산곡리 676-1번지

○ 규 모 : 용역 1식

- 시설(24억) : 저온창고 864㎡(168㎡×2동, 132㎡×4동),

전처리 및 1차 가공시설(497.28㎡×1동)

- 장비(4억) : HACCP 시설 장비(선별기, 세척기, 탈수기, 절단기, 포장기 등)

- 차량(2억) : 저온냉장차량(4.5톤×1대), 전동지게차(1.6톤×1대)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,090		3,090
국 비
시 도 비
시군구비	1,490		1,490
지 방 채
민간자본
기 타	1,600		1,600

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘21년 국가 예산 신규사업 발굴 보고회 : ‘20. 2. 11

○ 꼬꼬마양배추 저온유통체계 구축사업 설계비용 확보ㆍ용역실시 : ‘20. 6.

○ 꼬꼬마양배추 저온유통체계 구축사업 특별교부세 확보 : ‘20. 8. 5

○ 꼬꼬마양배추 저온유통체계 구축사업 기본설계 용역 보고회 실시 : ‘20. 8. 21

○ 특별조정교부금 교부결정 및 송금 : ‘20. 10. 14

○ 행정절차 이행(실시설계, 일상감사, 원가심사) : ‘20. 12.

○ 꼬꼬마양배추 저온유통체계구축사업 업체선정 및 착공 : ‘21. 3.

○ 공사 준공, 전처리 및 1차 가공설비 및 차량 납품   : ‘21. 11.

□ 향후계획

○ 꼬꼬마양배추 수확 및 대만수출, 대형마트(롯데마트, 홈플러스 등) 납품

○ 신선채소 가공 다변화로 유통환경 적극 대응(군산, 수도권) : 연중

- 단순가공, 신선편이식품(과일간식, 샐러드 등), 즙죽, MMSC 성분 활용 상품화 추진

사업명

군산 로컬푸드복합센터 신축사업

담당자

먹거리정책과 박 준 희(☎454-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 안전한 농산물의 안정적인 판로 확보 및 건강한 먹거리 공유

○ 농업인과 도시민이 함께하는 복합시설 제공으로 지역농업을 통한 선순환 경제체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 군산시 경암동 577-1번지(대, 3,653㎡)

○ 규 모 : 1층, 연면적 633㎡(직매장 605㎡, 라이스카페 28㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	2,000	60	554	1,386
국 비	500	49	451	0
시 도 비	150	11	4	135
시군구비	1,350		99	1,251

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축 설계용역 완료             : ‘21. 5월

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축 입찰계약 및 착공          : ‘21. 12월

□ 향후계획

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축공사 준공                   : ‘22. 8월

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축공사 개장                   : ‘22. 10월

사업명

동부권도서관 건립

담당자

시립도서관관리과 이효정 (☎-454-5626)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동부권 신도심지역 내 도서관 건립으로 어린이 중심의 전세대가

함께하는 도서관 조성(최신트렌드 반영 체류형 독서문화공간)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2022년(공정율 100%, ‘21.12.15 준공)

○ 위 치 : 군산시 궁포3로 30(조촌동 2-99,41번지)

○ 사 업 비 : 10,155백만원(국비3,782, 특교세800, 시비5,573) ※ 균특 40%지원

- 설계비 511백만원 / 공사비 9,155백만원 / 감리 등 489백만원

○ 규 모 : 부지 1,500㎡, 연면적 3,753㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,155백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	10,155	4,501	5,173	481
국 비	3,782	1,508	2,112	162
시 도 비	800	800		0
시군구비	5,573	2,193	3,061	319
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○‘16. 07. : 동부권도서관 건립 검토보고

○‘17. 11. : 재정투자심사 등 행정절차이행

○‘19. 12. 19. : 공사착공

- 공사금액  : 총차분(금5,680,004,480원) 1차분(3,528,924,290원)

- 공사기간  : 총차분(‘19.12.19.~‘21.6.18.) 1차분(‘19.12.19.~‘20.9.18.)

○‘21. 5. 17. : 동부권도서관 건립 1차공사 준공 및 2차공사 착공

○‘21. 10.    : 금강도서관 명칭 확정

○‘21. 12. 15. : 금강도서관 건립공사(2차공사) 준공

□ 향후계획

○ 금강도서관 시범운영 (’22. 6월중)

○ 금강도서관 개관     (‘22.하반기)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

치매안심센터 건립(재심사)

담당자

건강관리과 오주빈 (☎460-3277)

□ 사업목적 및 필요성

○ 치매국가책임제 시행에 따른 치매통합관리서비스 제공을 위한 치매안심센터 전용공간과 건물 노후화에 따른 정신건강복지센터 및 중독관리통합지원센터 전용공간 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~2021년

○ 위 치 : 군산시 공단대로 482(나운동)

○ 규 모 : 5층(대지 740㎡, 연면적1,647.9㎡)

○ 내 용 : 치매안심센터, 정신건강복지센터, 중독관리통합지원센터 전용공간

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,215백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,215	1,212	2,003	0	0
국 비	960	960	0
시 도 비	72	72	0
시군구비	2,183	180	2,003
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 건물(토지) 매입                      : ‘19. 11.

○ 내진성능 평가 및 리모델링 설계 용역 : ’20. 06.

○ 일상감사 및 원가심사                : ’20. 09.

○ 공사 계약 및 착공                   : ’20. 11.

○ 준공                                : ’21. 11.

□ 향후계획

○ 치매안심센터 등 운영

□ 사업변경 내역

구 분	총사업비	사업기간	사 유
당 초	2,700백만원	2019 ～ 2020
현 재	3,215백만원	2019 ～ 2021	내진보강공사 등 공사 추가분 발생 및 행정절차 기간 소요

사업명

군산근대역사박물관 리모델링 사업

담당자

박물관관리과 박권홍 (☎ 454-7882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개관 10년차, 연간 1백만명이상 방문하는 군산의 대표 문화시설로써, 노후       시설 개선 및 전시공간 재구성 등 효과적인 리모델링을 통한 박물관의         지속적인 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 전북 군산시 해망로 240(장미동)

○ 규 모 : 부지면적 8,328㎡, 연면적 4,248㎡ (지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	3,000	1,200	1,200	600
국 비	1,200	480	480	240
시 도 비
시군구비	1,800	720	720	360
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 기본계획 수립 : 2020. 08.

○ 설계용역      : 2021. 09.

○ 공사착공      : 2021. 12.

□ 향후계획

○ 공사준공      : 2022. 12

사업명

기후변화 체험프로그램 운영

담당자

박물관관리과 김지현 (☎ 454-5683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체험프로그램 운영을 통한 금강미래체험관 활성화

○ 교육 및 체험을 통한 참여자들의 기후위기의식 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 12. (10개월)

○ 위 치 : 군산시 철새로 120 금강미래체험관

○ 규 모 : 연간 교육인원 10,000명 이상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 110백만원(매년 추진)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	330	110	110	110	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	330	110	110	110	-
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 매년 추진하는 행사성 사업으로 2021년도 프로그램 운영 종료

○ 2021년 운영실적 : 611회/12,542명 참여

○ 2022년도 체험프로그램 운영 중

□ 향후계획

○ 2022년 하반기 체험프로그램 운영

○ 하반기 강사 교육 실시

□ 사업변경 내역

○ 해당없음