개별 투자심사 사업 추진현황

별지 10

사업명

조촌동행정복지센터 청사 신축 공사

담당자

행정지원과 송현정(☎454-2245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사신축 우선순위 도래 및 인구 증가에 따라 주민 수요에 맞는 청사 신축 필요

○ 청사 노후화 및 주민편의 공간 협소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 7. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 조촌동 909-4

○ 규 모 : 지하1층, 지상4층 / 연면적  2,930.15㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :　7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,400	0	0	5,400	2,000
국 비
시 도 비
시군구비	7,400	0	0	5,400	2,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 6.8%)

○ 2022. 10.  : 조촌동 행정복지센터 신축설계

□ 향후계획

○ 2023.  7. : 경관심의 상정

○ 2023.  9. : 설계용역 준공

○ 2023. 10. : 신축공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산사랑상품권 발행 및 운영사업

담당자

지역경제활력과 홍지연 (☎454-2662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역자금 역외유출 방지 및 관내 소상공인 경영안정 지원

□ 사업개요

○ 기    간 : ‘22. 1. 1 ~ ’22. 12. 31

○ 발행규모 : 4,073억원 (지류 505억, 모바일·카드 3,568억)

○ 예    산 : 44,906백만원 (국18,656, 도 500, 시 25,750)

○ 내    용 : 관내에서만 사용가능한 상품권을 발행하여 할인 판매 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  297,295백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	297,295	168,647	44,906	42,042	41,700
국 비	116,201	89,817	18,656	3,728	4,000
시 도 비	6,351	2,500	500	1,651	1,700
시군구비	174,743	76,330	25,750	36,663	36,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 83%)

○ 군산사랑상품권 1조8천6백8십억원 판매완료 (2018~2022)

□ 향후계획

○ 군산사랑상품권 발행 및 판매 지속추진

○ 상품권 부정유통 단속을 통한 건건한 유통질서 확립

사업명

군산 중소유통공동도매물류센터 건립

담당자

지역경제활력과 유재경(☎454-2692)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동구매를 통한 물류비 절감으로 소상공인 가격경쟁력 확보

○ 저렴한 가격에 소비자에게 제공하여 지역 물가 안정 기여

□ 사업개요

○ 기    간 : 2019. 1. ~ 2023. 5.

○ 위    치 : 조촌로 213

○ 규    모 : 부지 11,813㎡/ 건물 4,978㎡ (1동 - 4,379㎡, 2동 - 599㎡)

○ 총사업비 : 110억원(국도비 60, 특교 7, 시비 43)   *자부담 10%(11억원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,682	1,015	5,822	3,845
국 비	160	160			-
시 도 비	5,654		3,938	1,716	-
시군구비	4,171	855	1,884	1,432	-
지 방 채					-
민간자본					-
기 타	697			697	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 군산중소유통공동도매물류센터 시공사 선정 및 착공       : ‘21. 12.

□ 향후계획

○ 물류센터 운영위원회 개최 및 운영 협약 체결             : ‘23. 1. ~ 2.

○ 기자재 확보 등 개장 준비                               : ‘23. 4. ~ 5.

○ 건축물 사용승인                                        : ‘23. 5.

○ 물류센터 개장식 및 정식 운영                           : ‘23. 7.~

□ 사업변경 내역

	변경 전	변경 후
총사업비	100억원 (국 1.6, 도58.4, 시 30, 민10)	110억원 (국 1.6, 도58.4, 시 43, 특교 7)
사업기간	‘19. 1. ~ ‘23. 3.	’19. 1. ~ ’23. 5.

○ 변경내역

사업명

상권활성화사업(구도심상권르네상스)

담당자

지역경제활력과 이영주 (☎454-2702)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산공설시장 등 100년의 장터를 新소비트랜드에 맞는 쇼핑공간 구축

○ 쇼핑⋅문화⋅소통 플랫폼 연계 구축으로 상권진작 및 상인자생력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2025. 3. (5년)

○ 위 치 : 구도심 상권활성화구역(공설시장, 신영시장, 중앙상가)

○ 규 모 : 177,650㎡ / 사업체수 : 607개(빈점포 131개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원 (국비 4,000, 도비 800, 시비 3,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	3,000	1,900	1,700	1,400
국 비	4,000	1,500	950	850	700
시 도 비	800	300	190	170	140
시군구비	3,200	1,200	760	680	560
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 55% *‘22.12.기준)

○ ‘18. 12. 7. ○ ‘19. 1. 14. ○ ‘19. 1. ~ 2. ○ ‘19. 6. ○ ‘19. 9. 16. ○ ‘19. 12. 10. ○ ‘20. 4. 14. ○ ‘20. 4. ~ 21. 3. ○ ‘21. 4. ~ 22. 3. ○ ‘22. 4. ~ 22.12.	: 2018 상권르네상스 프로젝트 사업 공고 : 상권활성화재단설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고 : 상권활성화사업 사업계획 수립, 사업추진협의회 구성 : 상권활성화사업 투자심사 : 2019 상권르네상스 사업 공모 : 상권르네상스 사업 선정 : 사업계획서 및 상권활성화구역 중기부 협의후 전북도 승인 : 1년차 상권르네상스 사업 추진 : 2년차 상권르네상스 사업 추진 : 3년차 상권르네상스 사업 추진

□ 향후계획

○ ‘23. 1. ~ 23. 3. : 3년차 상권르네상스 사업 추진

○ ‘23. 4. ~ 24. 3. : 4년차 상권르네상스 사업 추진

○ 상권활성화구역 인근지역 3천세대 아파트 조성에 따른 거주민 친화형상권 조성

○ 도시재생뉴딜사업 등과 연계 관광객 유인할 수 있는 문화관광형 상권 조성

사업명

조선기자재기업 신재생에너지 업종전환 지원

담당자

산업혁신과 고무성(☎454-2732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산조선소 가동중단에 따라 침체된 지역경제 활력을 불어 넣기 위해서

새로운 성장동력 확보할 필요

○ 군산지역의 특수성, 조선기자재업체의 어려운 재정여건 등을 고려 할 때       원활한 업종전환을 위한 지원 필요

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2023. 9.

○ 사업내용 : 협동화공장 및 장비 23종 구축

○ 전담기관 : 한국에너지공단 / 주관기관 : 전북도, 군산시

○ 수행기관 : 군산조선해양기술사업협동조합

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	29,700	9,550	7,748	12,402	-
국 비	17,490	3,550	6,100	7,840	-
시 도 비	3,000	3,000			-
시군구비	7,000	3,000	752	3,248	-
자 부 담	2,210	-	896	1,314	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 조선기자재 업종전환을 위한 협동조합인가 및 설립      :‘18. 5. 25.

○ 사업계획 승인(산업통상자원부)                         :‘20. 6. 22.

○ 협약 체결(한국에너지공단&전북도&군산시)             :‘20. 7. 15.

○ 협동화공장 매입(연면적 19,082㎡)                      :‘20. 10. 30

○ 사업계획 변경 승인(장비 32종→34종)                   :‘21. 4. 21.

○ 사업계획 변경 승인(장비 23종, 해상하부구조물 중심)     :‘21. 11. 10.

○ 1차년도(2020) 장비 발주 및 계약                             :‘21. 11 ~ 12

○ 2차년도(2021) 국비 장비 8종(8대) 발주 및 계약         : ‘22. 4월 ~ 현재

○ 도장동 증축 공사 공고 및 계약(토목)                   :‘22. 12. 20.

○ 1차년도(2020) 장비 구축 완료                          :‘22. 12. 29.

○ 사업계획 및 협약변경 승인 (장비 및 사업기간 변경)        :‘22. 12. 29.

□ 향후계획

○ 3차년도(2022) 장비 발주 및 계약                        :‘23. 상반기

○ 도장동 증축 공사 공고 및 계약(철골)                   :‘23. 상반기

○ 도장동 증축 공사 완료 및 기성금 지급                  :‘23. 하반기

○ 연차별 장비 구축 완료 및 기성금 지급                  :‘23. 하반기

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : (당초) 2020 ~ 2022. 12 → (변경) 2020 ~ 2023. 9

- 변경사유 : 장비 입찰공고 유찰에 따른 구축 지연

○ 구축장비 변경 : (당초) 32종 → (변경) 34종→ (최종) 23종

- 원자재 상승에 따른 장비 구축비용 증가

- 사업계획 변경 (해상하부구조물 중심)

사업명

전북 군산 강소연구개발특구 육성 지원사업

담당자

산업혁신과 이한빛 ( ☎ 454-2742 )

□ 사업목적 및 필요성

○ R&D⇒기술사업화⇒창업·기업 성장⇒재투자의「선순환 산업생태계」조성

○ 특구내 기술창업 플랫폼과 창업기업 후속 성장지원으로 강소기업 육성

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 3. ~ 2025. 2.

○ 위    치 : 군산국가·2산단, 새만금산단(1공구)

○ 사업내용 : 기술발굴, 기술사업화(R&BD), 창업, 연구소기업 육성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 23,150백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	23,150	7,200	6,300	3,850	5,800
국 비	16,000	6,000	4,000	2,000	4,000
시 도 비	3,200	600	850	850	900
시군구비	3,950	600	1,450	1,000	900

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기술발굴 및 연계 : 기술이전 60건, 연구소기업 등록 14건

○ 기술이전사업화 : R&BD 과제 선정·지원 24개사(기업당 2억원/1년)

○ 기술창업 육성 : 창업 29건, 창업아이템 발굴지원 33건, 투자연계 138억원

○ 강소특구 특화성장 지원

- 혁신네트워크 추진 : 기술/정책교류회 16회, 기술사업화연구회 21회 등

- 지역특화성장지원 : 특허창출 40건, 시제품제작 67건, 컨설팅 137건,

전기차 클러스터 상생협력 사업화 지원 3건 등

□ 향후계획

○ 지역 특성화 육성지원 및 혁신네트워크 추진              : ‘23. 하반기

○ 연구소기업 및 첨단기업 설립 추진                       : ‘23. 하반기

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 21,600백만원 ⇒ (변경) 23,150백만원

○ 변경사유 : 지역 특성화 육성 활성화를 위한 지방비 추가 지원

사업명

산업단지 복합문화센터 건립

담당자

산업혁신과 윤용묵 (☎ 454-2752 )

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 문화‧체육‧편의시설 미비로 인한 청년‧기술인력의 취업기피 분위기 전환, 지역주민 및 근로자 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2023. 09.

○ 위 치 : 군산시 오식도동 661번지

○ 규 모 : (건축면적) 1,373.87㎡ / (연 면 적) 3,018.71㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,791.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	9,791.5	3,101	2,596	6,690.5
국 비	3,294	2,856	2,596	438
시 도 비	988	245	-	743
시군구비	5,509.5			5,590.5
지 방 채	-
민간자본	-
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 산업단지 복합문화센터 건립사업 협약체결                  : `19. 11.

○ 공유재산 심의회 심의 및 중기지방재정계획승인             : `19. 11.

○ 공공건축 사업계획 의견조회(건축도시공간연구소)             : `20. 1~3.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 설계용역 추진       : `20. 11.~‘21. 12.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 착공                      : `22. 05.

□ 향후계획

○ 철골구조 완료, 내장공사(창호 등) 추진                     : `23. 08.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 준공                       : `23. 09.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 9,175백만원 ⇒ (변경) 9,791.5백만원

○ 변경사유 : `19년도 지방재정투자심사 이후 총사업비 확정

사업명

제조분야 친환경관리 인프라 구축사업

담당자

산업혁신과 윤용묵(☎454-2752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 행정·문화‧체육‧편의시설 원스톱 서비스 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 06. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 국가산업단지 일원

○ 규 모 : OPEN LAB 구축(연면적 : 약2,500㎡/2층, 위치 : 새만금산단 연구시설용지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  18,910백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	18,910	2,324	1,404	6,321	8,761
국 비	12,600	1,324	1,324	1,191	8,761
시 도 비	1,200		-	1,200
시군구비	2,800			2,800
지 방 채	-
민간자본	2,310	1,000	80	1,130
기 타	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 친환경관리 인프라 구축사업 공모(산업부)	: ’21. 4.

○ 제조분야 친환경관리 인프라 구축사업 공모 선정         : ’21. 6.

○ OPEN LAB 기업지원센터 설계용역 완료	: ’22. 10.

○ OPEN LAB 성능평가 지원(총9건, 3개 기업)              : ’22. 4. ~ 12.

- CCTV 야간 해상력, 알루미늄 화학성분 검사 등

○ 안전관리 모니터링시스템 개발, 보급(총3건, 3개 기업)     : ’22. 4. ~ 12.

- 화학유해물질 유출감지 센서 개발 및 보급(참여사 : 벤투스, 필텍, 유제이)

□ 향후계획

○ OPEN LAB 기업지원센터(건축) 준공	: ’24. 01.

○ 장비공동 활용(지원사업)	: ’24. 01 ~ 12.

○ 성능평가 및 안전관리통합지원	: ’24. 04 ~ 12.

사업명

재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구 기반 구축

담당자

새만금에너지과 신소정(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래·친환경 에너지를 한 곳에서 종합적으로 실증할 수 있는 인프라구축 및      실증R&D를 통해 재생에너지 산업경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2025.(6년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연 7-3 및 공유수면

○ 규 모 : 국가종합실증연구단지(50,000㎡) 및 통합관제센터(5,258㎡) 구축,   신재생에너지 발전시설 및 실증설비 구축, 통합실증 R&D 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 94,710백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	172,060	64,150	15,280	33,809	58,821
국 비	64,810	20,000	8700	11419	24,691
시 도 비	14,950	2,525	90	5650	6685
시군구비	14,950	2,525	90	5650	6685
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	77,350	39,100	6400	11090	20,760
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

○ 선도산업으로<디지털트윈사업>정부추경예산 반영       : 2020. 7. 3.

○ 국비 371.1억원 추가 확보(사업기간 연장 ‘22⇒’25년)     : 2021. 11. 26.

- 기재부 적정성 재검토 통과(기재부 재정사업평가위원회/사업비 증액)

*  (당초) 357억원 (국비277 도비40 시비40) * 민간자본 455

* 재생에너지 국가종합실증연구단지 구축사업(예타철회 ‘20.11)

○ 입주계약 체결 완료	: 2022. 12.

□ 향후계획

○ 통합관제센터 설계 추진 중	: 2023. 1. ~

○ 단지 인프라 조성 및 통합관제센터 구축 착공	: 2023. 9. ~

사업명

해상풍력 산업지원센터 구축사업

담당자

새만금에너지과 신소정(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상풍력 보급 확대 및 산업 활성화를 위한 단지 조성 지원, 수용성 제고       및 전문인력 양성 등의 종합지원 센터 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ∼ 2024.(5년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연7

○ 규 모 : 센터구축(부지 14,000㎡, 연면적 8,351㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 42,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	42,000	14,760	4,400	16,440	6,400
국 비	22,000	4,000	3400	8200	6400
시 도 비	10,000	5,380	500	4120	0
시군구비	10,000	5,380	500	4120	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)

○ 해상풍력 산업지원센터 구축 기본계획 수립용역  : 2021. 4.

○ 산업지원센터 입주심사 완료                    : 2022. 5.

○ 산업지원센터 기본 및 실시설계                 : 2022. 6.∼

○ 투자협약 체결                                 : 2022. 6.

○ 입주계약 체결 완료	: 2022. 8.

□ 향후계획

○ 센터 설계 완료	: 2023. 下

사업명

지역에너지 신산업 활성화 지원사업

담당자

새만금에너지과 최성진(☎454-4422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 그린뉴딜정책에 따른 농어촌지역 신산업 추진

○ 마을 유휴부지 활용 주민수익형 태양광발전시설 설치- 부가소득창출

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. ~ 2022.(2년)

○ 위 치 : 관내 경로당(마을회관) 47개소

○ 규 모 : 총 발전용량 603.45kw 태양광발전시설 설치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1970백만원(국520 시410 민자 1040)

※ 국비 직접 교부

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	410	364	46	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	410	364	46	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100% / 완료)

○ 발전시설 설치 완료 및 사용개시	: 2022. 6

□ 향후계획

○ 발전수익 분배	: 2023.~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

시내권 신재생에너지 융복합지원사업

담당자

새만금에너지과 최성진(☎454-4422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 신재생에너지보급 확대를 통한 에너지자립도시 기반 조성

○ 주민주도 지역에너지분권 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.(1년)

○ 위 치 : 시내권 (동지역)

○ 규 모 : 신재생에너지보급 686가구

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,803백만원(국2,886 시1,876 자부담 1,040)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,065	0	4,065	0	0
국 비	2497	0	2497	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,568	0	1568	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100% / 완료)

○ 사업정산보고	: 2022. 12

□ 향후계획

○ 신재생에너지보급사업 수요발굴 및 추진  : 2023.~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

중고차 수출복합단지 조성사업

담당자

항만해양과 강영진 (☎ 454-2792)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산의 주력산업 붕괴에 따른 산업·고용 위기지역 활력 프로젝트 사업 추진

○ 중고차를 수출 산업으로 육성하여 지역경제의 新 성장동력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 새만금산업단지 5공구 지원-6

○ 규 모 : 대지면적 197,824㎡, 건축연면적 37,456㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 146,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	146,000	7,600	1,883	110,417	26,100
국 비	27,500	1,000	0	26,500	0
시 도 비	9,500	0	125	9,375	0
시군구비	12,900	6,600	1,758	4,542	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	96,100	0	0	70,000	26,100
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본 및 실시설계 추진                            : `22. 3. ~ `23. 1.

○ 새만금지구 국가산업단지 통합 개발계획 변경       : ‘22. 9.

○ 새만금지구 국가산업단지 입주계약 체결            : ‘22. 12.

○ 토지매매계약 및 준공전 사용승인 완료(공공)        : `22. 12.

□ 향후계획

○ 건축심의 및 허가                                 : `23. 7. ~ `22. 10.

○ 실시계획승인                                     : `23. 10.

○ 시설공사 추진                                    : `23. 11. ~ `25. 上

○ 새만금 자동차 수출복합센터 개장                  : `25. 上

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 대지 197,824㎡, 건축연면적 22,300㎡, 사업비 1,409억원

(변경) 대지 197,824㎡, 건축연면적 37,456㎡, 사업비 1,460억원

사업명

광역 해양레저체험 복합단지 조성사업

담당자

항만해양과 송빛나 (☎ 454-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도의 다양한 해양자원을 활용한 통합 관광인프라 조성

○ 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 산65번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	39,800	13,400	11,230	7,590	7,580
국 비	19,345	6,700	5,060	3,795	3,790
시 도 비	5,532	1,710	1,518	1,138.5	1,165.5
시군구비	14,923	4,990	4,652	2,656.5	2,624.5

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 소규모환경영향평가 협의 완료(환경부)                   : `22. 4.

○ 환경영향평가(환경부) 및 중토위 등 관계기관 협의 완료   : `22. 5.

○ 새만금개발 통합심의위원회 안건심의(새만금개발청)        : `22. 7.

○ 해양관광 SOC사업 시행계획 승인(전라북도)              : `22. 10.

○ 새만금 용도별 통합개발계획 승인, 고시(새만금개발청)     : `22. 12.

□ 향후계획

○ 본단지 공사 발주 의뢰 및 입찰공고             : `23. 1.~6.

○ 본단지 공사 개찰 및 적격심사                   : `23. 7.

○ 본단지 공사 착공                              : ‘23. 8.

○ 공사 준공 및 (시범)운영                        : ’24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 부지면적 64,771㎡  (변경) 부지면적 64,365㎡

○ 사업기간 : (당초) 2019 ~ 2023년     (변경) 2019 ~ 2024년

사업명

말도~방축도 인도교 개설사업

담당자

항만해양과 김도현 (☎ 454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인도교와 말도리 도서의 지역자원경관을 연계한 명품트레킹 코스개발    하여 관광활성화로 지역소득증대 및 군산시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2023

○ 위 치 : 군산시 옥도면 말도리 말도, 명도, 방축도 일원

○ 규 모 : 인도교 4개소 L=1,278m, B=2∼2.5m

- 제1교 L=308m, 제2교 L=410m, 제3교 L=477m, 제4교 L=83m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 26,996백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2021년	2022년	2023년 이후
계	26,996	11,297	8,933	6,766	-
국 비	29,596.8	9,037	7,147	5,413	-
시 도 비	2,699.6	1,130	893	676.6	-
시군구비	2,699.6	1,130	893	676.6	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수                    : 2017. 12.

○ 제4교(광대도~방축도) 완료                               : 2018. 11.

○ 제1교(말도~보농도), 2교(보농도~명도) 완료                : 2022. 10.

○ 제3교(명도~광대도) 공사 착공                            : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 제3교(명도~광대도) 공사 완료                            : 2023. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌정주어항 (무녀1구) 개발사업

담당자

항만해양과 이정준 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴하는 어촌지역의 어항기반시설 확충으로 소득증대 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2023. (7개년)

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 무녀1구항 일원

○ 규 모 : 어촌정주어항 개발 A=12,307㎡

- 준설(9,908㎡), 매립(7,633㎡), 물양장 88m, 호안 162m 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,500	6,000	2,100	1,400	-
국 비
시 도 비	7,600	4,800	1,680	1,120	-
시군구비	1,900	1,200	420	280	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 공유수면 매립 기본계획 반영(8,940㎡) 확정(해수부)     : ‘17. 5.

○ 무녀1구항 공유수면 매립면허(7,633㎡) 승인            : ‘19. 10.

○ 무녀1구 정주어항 개발공사 착공                      : ‘18. 11.

○ 무녀1구 정주어항 개발공사(4차분) 시행                : ‘22.~

□ 향후계획

○ 무녀1구 정주어항 개발공사(전체분 및 4차분) 준공      : ‘23. 3.

○ 부잔교 및 도교 설치공사, 준설공사(9,000㎥) 시행	: `23. 7.~

사업명

온리원 고군산 관광벨트 조성사업

담당자

항만해양과 이정준 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급변하는 고군산지역에 중앙 다부처의 협약을 통한 동시 사업투자로

지역의 특화된 도서관광 벨트화 조성 및 지역 균형발전 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 고군산 일원

○ 규 모 : 어항개발, 도로정비, 차도선, 자율주행버스, 특산물 판매부스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	18,200	15,162	3,038	-	-
국 비	9,100	7,581	1,519	-	-
시 도 비	2,730	2,274	456	-	-
시군구비	6,370	5,307	1,063	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 신시도 노후 연결도로 정비공사 완료                   : `21. 11.

○ 장자도 차도선 선착장 및 부대시설 완료                : `22. 6.

○ 특산품 판매장 건축공사 완료                          : `22. 12.

○ 신시도항 및 방파제 조성 추진                         : `22.~

□ 향후계획

○ 자율주행전기차 건축설계 및 인허가용역 추진           : `23. 7.

○ 신시도항 정비 및 배후부지 포장공사 완료              : `23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 : 2019.6. ~ 2022.12.  변경 사업기간 : 2019.6. ~ 2023.12.

사업명

선유1구항 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 정주환 (☎ 454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유1구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,907백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,907	2,631	1,276	-	-
국 비	2,735	1,842	893	-	-
시 도 비	352	237	115	-	-
시군구비	820	552	268	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 생활SOC사업 공사 추진                               : `21. 8.

○ 특화사업 착공                                        : `21. 11.

□ 향후계획

○ 시행계획 승인 및 고시                                : `23. 3.

○ 기본 및 실시설계 용역 준공                           : `23. 7.

○ 특화사업 및 역량강화사업 준공                        : `23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 : 2020. ~ 2022.  변경 사업기간 : 2020. ~ 2023.

사업명

장자도 장자어화 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이정준 (☎ 454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,441	9,478	4,963	-	-
국 비	10,109	6,635	3,474	-	-
시 도 비	1,300	853	447	-	-
시군구비	3,032	1,990	1,042	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 생활SOC사업 공사 착공                               : `21. 9.

○ 시행계획 승인 및 고시                                : `22. 8.

○ 특화사업 공사 착공                                   : `22. 11.

□ 향후계획

○ 시행계획 변경 검토 및 특화사업 공사 시행             : `23. 6.~

○ 공사 및 S/W사업 준공                                : `23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 : 2020. ~ 2022.  변경 사업기간 : 2020. ~ 2023.

사업명

노을과 가락의 섬 비안도 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 정주환(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 비안도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	12,173	8,004	4,169	-	-
국 비	8,521	5,603	2,918	-	-
시 도 비	1,095	720	375	-	-
시군구비	2,557	1,681	876	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 토목분야 시설공사 착공                               : `22. 3.

○ 특화사업 착공                                        : `22. 10.

□ 향후계획

○ 시행계획 승인 및 고시                                : `23. 3.

○ 공통사업 준공                                        : `23. 6.

○ 특화사업 및 역량강화사업 준공                        : `23. 12.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 : 2020. ~ 2022.  변경 사업기간 : 2020. ~ 2023.

사업명

두리도항 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 정주환(☎454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 비안도리 두리도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,300	1,260	2,520	2,520	-
국 비	4,410	882	1,764	1,764	-
시 도 비	567	113	227	227	-
시군구비	1,323	265	529	529	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                           : `21. 7.

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `22. 7.

○ 생활환경SOC사업 공사 착공                           : `22. 9.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립, 특화사업 공사 추진                    : `23. 8.

○ 공통사업 공사 완료                                   : `23. 12.

○ 특화사업 및 S/W사업 준공                            : `24. 6.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

서래포구 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이정준(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 중동 서래포구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,460	2,092	4,184	4,184	-
국 비	7,322	1,465	2,929	2,929	-
시 도 비	941	188	377	377	-
시군구비	2,197	439	878	878	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 12.

○ 생활환경SOC사업 공사 착공                           : `22. 9.

○ 특화사업 세부설계용역 착수                           : `22. 10.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립, 특화사업 공사 착공                    : `23. 8.

○ 공통사업 공사 완료                                   : `23. 12.

○ 특화사업 및 S/W사업 준공                            : `24. 6.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

야미도 어촌뉴딜 300사업

담당자

항만해양과 이정준(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 야미도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,630	-	1,595	3,827	5,208
국 비	7,441	-	1,116	2,679	3,646
시 도 비	957	-	144	344	469
시군구비	2,232	-	335	804	1,093
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `22. 11.

□ 향후계획

○ 토목분야 설계용역 착수                               : `23. 3.

○ 건축분야 설계용역 착수                               : `23. 4.

○ 토목‧조경공사 착공                                    : `23. 12.

○ 시행계획 수립, 건축공사 착공                          : `24. 4.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

연도지구 연안정비사업

담당자

항만해양과 박찬영 (☎454-2936)

□ 사업목적 및 필요성

○ 연안침식으로 인해 훼손된 연안을 정비하여 자연경관 보전

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 연도리 산13 –15번지 일원

○ 규 모 : 호안설치(L=55m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,375	286	2,000	1,089	-
국 비	2,362	200	1,400	762	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	1,013	86	600	327	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 연도지구 연안정비사업 기본 및 실시설계 완료          : `21. 08.

○ 연도지구 연안정비사업 실시계획 승인                  : `21. 08.

○ 연도지구 연안정비사업 공사 착공                      : `22. 02.

□ 향후계획

○ 연도지구 연안정비사업 공사 완료                      : `23. 12.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

섬마을단위 LPG시설 구축사업

담당자

항만해양과 이우석 (☎454-2933)

□ 사업목적 및 필요성

○ 섬마을 내 안정적인 연료수급을 통해 난방 및 취사 등 연료문제 해결

○ 이산화탄소 배출량 감축을 통한 탄소중립 및 환경보존 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026

○ 위 치 : 3개섬(어청도,개야도,연도)

○ 규 모 : LPG시설구축(LPG저장탱크, 배관망설치 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,482백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,482	0	800	1,006	2,676
국 비	3,137.4	0	560	704.2	1,873.2
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	1,344.6	0	240	301.8	802.8
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ LPG배관망사업단 업무 위수탁 계약완료            : `22.  4.

○ 기본 및 실시설계용역 완료(어청도)                 : `22. 12.

□ 향후계획

○ 공사 착공(어청도)                                : ‘23.  3.

○ 실시설계용역 추진(개야도)                        : `23.  8.

○ 공사 준공(어청도) 및 가스공급                    : ‘23.  10.

○ 연차별 사업 추진(개야도, 연도)                    : ‘23. ~ `26.

- 개야도 : 설계(`23. 8월 ~ `24. 2월) / 착공(`24. 3월) / 준공 및 가스공급(`24. 10월)

- 연  도 : 설계(`25. 3월 ~ 12월) / 착공(`26. 3월) / 준공 및 가스공급(`26. 10월)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

무녀2구항 어촌뉴딜300 사업

담당자

항만해양과 정주환 (☎ 454-4783)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀2구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,960	14,960	-	-	-
국 비	10,472	10,472	-	-	-
시 도 비	1,346	1,346	-	-	-
시군구비	3,142	3,142	-	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `20.  1.

○ 실시설계 완료                                        : `20.  8.

○ 공통사업(방파제 및 어항시설 정비) 준공               : `21. 12.

○ 특화사업(마을정비 및 특화사업) 준공                  : `22.  7.

○ 지역역량강화사업 용역 준공                          : `22. 12.

□ 향후계획

○ 시설 운영관리 협약 추진(무녀2구 마을법인)            : `23.  8.

□ 사업변경 내역

○ 당초 사업기간 : 2019. ~ 2021.  변경 사업기간     : 2019. ~ 2022.

사업명

선유도 내부관광로 개설사업

담당자

항만해양과 김도현 (☎ 454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도서지역 차량 집중에 대비하여 순환기능을 갖는 내부도로 개설하여     교통편의성을 증대하여 관광객 및 주민들에게 쾌적한 도서환경을 제공하여 불편을 최소화하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018~2022

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 (L=2.49km, B=10~12m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 13,375백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	13,375	12,875	500		-
국 비	10,700	10,300	400		-
시 도 비	1,337.5	1,287.5	50		-
시군구비	1,337.5	1,287.5	50		-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 1공구(선유도 초입~짚라인) 공사 완료                         : 2018. 11.

○ 2공구(선유2구항~선유1구초입) 공사 완료                      : 2021.  4.

○ 3공구(짚라인~선유3구항) 공사 완료                          : 2022. 10.

□ 사업변경 내역

○ 총사업비 : (당초) 16,000백만원  (변경) 13,375백만원

사업명

새만금 스마트 수산가공 종합단지 조성사업

담당자

수산식품정책과

김지완(☎454-3032)

조세량(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해수부 시범단지 선정, 수산식품 R&D연구시설・지역 특산물 연계 등 지역 수산물 경쟁력 강화와 고용 창출을 통한 지역경제 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025년(4년간)

○ 위 치 : 새만금국가산업단지 2공구 산 46-1(가지번)

○ 규 모 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트아파트형 가공공장 등

구 분	면적	연면적	세부내용
수산식품 R&D센터 및 협력지원 센터	5,000	3,000	- 시제품 연구개발, 스마트팩토리 구축 - 행정지원, 상담, 단지관리 등
스마트 아파트형 가공공장	8,400	8,000	- 수산식품 가공공장 산업 융합연계, 제조 및 업무 복합형 공장 등
용수공급시설 및 폐수처리시설	3,300	300	- 가공용수 공급 및 아파트형 가공공장 폐수처리시설 등
기타	3,300	-	- 내부 통행로, 주차장 등
합계	20,000	11,300

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 383억원(국비268, 도비 35 시비 80) ※부지매입비 50억원 별도

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	43,339	-	-	1,010	42,329
국 비	26,837	-	-	707	26,130
시 도 비	3,451	-	-	91	3,360
시군구비	13,051	-	-	212	12,839

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  10%)

○ (공모선정) 새만금스마트수산가공종합단지 공모선정(군산시) : ’22.  3월

○ (중앙투자) 지방재정영향평가 및 중앙투자심사 승인(6.17)   : ’22. 3~6월

○ (공유재산) 공유재산심의(9.30) 및 관리계획 동의(10월)     : ’22. 5~10월

○ (기본계획) 스마트 수산가공종합단지 기본계획수립고시 및 통보 : ’22. 10. 7.

○ (사전검토) 공공건축 사업계획 사전검토 의견회신          : ’22. 11. 9.

□ 향후계획

○ (일상감사) 일상감사 의뢰 및 통보                        : ’23. 1.

○ (계약의뢰) 조달청 발주의뢰 및 보완검토                  : ’23. 2~5월

○ (설계착수) 기본 및 실시설계 착공                      : '23. 7~8월

○ (위 원 회) 수산식품먹거리위원회 및 희망업체 MOU체결 : '23. 8월

○ (연구용역) 지역특화 수산식품개발 연구용역 등          : '23. 연중

○ (운영방안) 시설운영 및 관리방안 연구용역 추진         : '23. 하반기

연도별	추 진 내 용
2023년	◦ (설계선정) 제안공모 설계사무소 선정 및 착공 ◦ (기본설계) 기본계획 및 설계 적정성검토(조달청→기재부) ◦ (실시설계) 실시설계 및 적정성・경쟁성검토(조달청→기재부) ◦ (건축심의) 각종 인증 건축심의 및 인허가(인증, 경관심의, 인허가)
2024년	◦ (건축공사) 입찰공고 및 시공업체 선정(감리, 기계 등) 착공
2025년	◦ (장비발주) 연구장비, 시제품 장비 등 입찰공고 및 시공업체 착공 ◦ (준공검사) 준공도서 작성 및 하자검사 등

사업명

새만금 수산식품 수출가공 종합단지 해수 인·배수

담당자

수산식품정책과

김지완(☎454-3032)

조세량(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역염원의 숙원사업으로 마른김공장 및 가공업체 유치 등 지역특산물 부가가치 제고로 어가소득 증대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2025년(2년간)

○ 위 치 : 군산 비응도해상~ 새만금산업단지 2공구 내 산46번지 일원

○ 규 모 : 취수펌프실 ·관로 및 해수공급·처리시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :   9,000백만원(도비 2,700 시비 6,300)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000	-	-		9,000
시 도 비	2,700	-	-		2,700
시군구비	6,300	-	-		6,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ (공유재산) 기반시설 부지 공유재산취득 심의 및 부의      : ‘22. 9~10.

○ (관리전환) 기반시설(펌프·여과실) 부지 공유재산 관리전환  : ’22. 11.

○ (일상감사) 일상감사 의뢰 및 통보                        : ’22. 11. 3.

○ (인· 허가) 기반조성 인·허가부서 방문                    : ‘22. 11~12.

□ 향후계획

○ (계약의뢰) 설계용역 조달청 발주의뢰 및 보완검토         : ’23. 1~3월

○ (선진견학) 해수 인·배수 기반시설 고흥군 비교시찰            : ‘23. 2.

○ (협업회의) 수산식품 수산가공 종합단지 관련부서 협업회의     : ‘23. 3.

○ (용역착수) 설계용역 업체 선정 및 착수                       : ‘23. 4.

○ (현장회의) 설계용역 착수 및 현장회의 추진                   : ‘23. 5.

○ (협업회의) 관련부서 협업회의(2차) 추진                   : ‘23년 연중

○ (해역협의) 일반해역 이용협의, 공유수면 점사용 이행        : ‘23년 7월

○ (기반시설) 해수 관로 및 기반시설 설계준공             : ‘23년 하반기

사업명

해양수산 복합공간 조성사업

담당자

수산식품정책과 한태우(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산물의 생산, 판매, 유통, 업무지원 등이 가능한 복합공간 조성으로 지역수산물 소비촉진 및 유통판로 개척을 통한 산업경쟁력 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2023년 (6년간)

○ 위 치 : 군산시 해망동 1011-22번지 일원

○ 규 모 : 부지 11,412㎡, 연면적 3,999.05㎡(3층 증축)

구 분	연면적(㎡)	시설물	준공일	비고
합 계	4,788.73	2개동(117점포)
본관동	3,999.05	활어⋅선어75, 횟집12 상인회 사무실 등	2023. 5. 17.	신축
건어동	789.68	건어30	2004. 9. 27.	존치

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 17,473백만원(국도비 6,391, 특교세 500, 시비 10,582)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	17,473	9,258	5,300	2,915	-
국 도 비	6,391	6,391	-	-	-
특 교 세	500	500	-	-	-
시 비	10,582	2,367	5,300	2,915	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 수산물종합센터 활성화 방안 보고                     : ‘13. 3.

○ 중기지방재정계획 반영 및 공유재산 취득 심의         : ’16. 10.

○ 기본 및 실시설계용역 추진 및 완료                   : ’18. 9.~‘19. 12.

○ 실시설계 원가심사 완료(전북도청, 군산시)             : ‘20. 2.

○ 1차분 공사 완료(기초⋅골조공사, 외부마감)            : ‘22. 7.

○ 건축 2차분 공사 시행                                : ’22. 9.

□ 향후계획

○ 해양수산 복합공간 조성사업 준공 및 영업 개시        : ‘23. 5.

사업명

선교역사관 건립사업

담당자

문화예술과 남궁철안(☎454-3272)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순한 종교의 전파가 아닌 교육, 의료, 항쟁 등 근대사 전반에 영향을 준 선교역사를 기념하고 지역사 복원을 통한 시민 자긍심 고취

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2024. (3년간)

○ 위 치 : 구암동 334

○ 규 모 : 선교역사관 및 선교기념탑 건립(1개동, 3층 건축물)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,080		120	3,151	2,808
국 비	1,824		120	807	897
시 도 비	912			465	446
시군구비	2,128			1,197	931
지 방 채
민간자본	1,216			682	534
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 사업계획 사전검토                               : 2022. 1.~3.

○ 행정절차 이행(일상감사, 원가심사)                : 2022. 4.

○ 선교역사관 건립 설계용역 제안공모(업체선정)     : 2022. 5.~6.

○ 선교역사관 건립사업 기본 실시설계 용역 착수    : 2022. 7.

□ 향후계획

○ 실시설계 준공                                   : 2023. 8.

○ 선교기념탑 건립                                 : 2023. 10. ~

○ 선교역사관 건립공사 착공                        : 2023. 11. ~

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

진포예술제

담당자

문화예술과 김유진(☎454-3282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 예술문화 향유기회 제공으로 시민 정서 함양

○ 지역예술문화 창달 및 예술문화의 미래상 제시

○ 시민과 함께하는 문화예술을 통한 저변확대 및 예술문화 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020 ～ 2024(5년)

○ 위    치 : 군산예술의 전당 및 은파호수공원 일원

○ 사업내용 : 군산예총과 10개협회가 개최하는 순수예술 문화행사

○ 지원형태 : 직접수행

○ 보조사업자 : 직접수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	890	90	113	122	565
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	890	90	113	122	565
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 진포예술제 개최                       : 2022. 10. 1 ~ 10. 5

- 개막공연 등 무대공연, 영화상영, 전시 행사 등

□ 향후계획

○ 2023년 진포예술제 개최                       : 2023. 10월 중

사업명

군산문화재야행

담당자

문화예술과 김영신 (☎454-3923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 문화유산을 통해 지역의 역사와 문화를 포괄적이고 종합적으로 생생한 현장감 있는 교육 실시

○ 테마가 있는 공연 및 체험 활동을 통해 지역주민이나 관광객들에게 문화유산을 알리고 활용

○ 야간 문화재 볼거리 제공을 통한 지역 경제 활성화 및 주민의 삶의 질 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5월 ~ 9월(5개월)

○ 위 치 : 군산내항역사문화공간 및 원도심 일원

○ 사업내용 : 8야(夜) 테마, 50여개 답사, 공연, 전시, 체험 프로그램 운영

○ 지원형태 : 직접수행

○ 보조사업자 : 직접수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 525백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	525		525
국 비	210		210
시 도 비	94.5		94.5
시군구비	220.5		220.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 군산문화재야행 개최                 : 2022. 8. 25 ~ 8. 27

□ 향후계획

○ 2023년 군산문화재야행 개최                 : 2023. 8. 10. ~ 8. 12

사업명

제2차 대표관광지 육성사업

담당자

관광진흥과 김나형 (☎454-3332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1시군 1대표관광지 육성 실현을 위한 도내 지역별 차별화된 콘텐츠 개발

○ 원도심 일원 근대문화유산 활용 문화관광 중심도시 이미지 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024. (5년)

○ 위 치 : 군산 시간여행마을 일원

○ 규 모 : 기반사업 3, 진흥사업 8

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,400백만원(도비)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,178	933	476	1,769	1,000
도 비	4,178	933	476	1,769	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 32%

○ (기반사업) 트래블라운지 조성 설계중

○ (진흥사업) 시간여행마을 및 축제 활성화를 위한 상설공연, 도시홍보 등 추진

□ 향후계획

○ 트래블라운지 조성사업 준공

○ 시간여행마을 및 축제 활성화를 위한 상설공연, 도시홍보, 축제프로그램 등 추진

사업명

금강호 국민여가 캠핑장조성 사업

담당자

관광진흥과 송빛나(☎454-3342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용객의 편의와 수요를 충족하는 금강호 생태와 연계한 휴식공간 조성

○ 국민여가캠핑장 조성을 통한 금강호의 전반적인 개발 및 활성화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ∼ 2024.

○ 위 치 : 군산시 성산면 성덕리 421-15번지 일원 (금강호관광지)

○ 규 모 : 7,381㎡(캠핑장사이트 6,441㎡, 산책로 940㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,400		100	1,811	489
도 비	900		-	900	-
시 비	1,500		100	911	489

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 금강호관광지 조성계획 변경 고시(캠핑장 사업부지 확정)  : `15. 7.

○ 실시설계용역 착수                                      : `22. 5.

○ 설계도서 제출 및 보완                                  : `22. 7.

□ 향후계획

○ 구상(안) 확정                                       : `23. 4.

○ 일상감사 및 원가심사 이행                         : `23. 8.

○ 공사 시행	: ‘23. 9.~’24. 6.

□ 사업변경 내역

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업비	2,000백만원	2,400백만원	사업비 초과에 따른 시비 추가 반영

사업명

비응마파지길 관광명소화 사업

담당자

관광진흥과 임호영(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비응도 및 비응마파지길 야간 경관조명 및 안내유도표지를 보강하여 관광객 유입 증대를 통한 침체되어 있는 비응항 상권 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ∼ 2024.(3개년)

○ 위 치 : 군산시 비응도동 37번지 일원(비응마파지길)

○ 규 모 : 관광안내표지 확충, 경관조명 보강, 포토존 및 휴게시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,500		200	651	2,649
도 비	1,500		100	650	750
시 비	2,000		100	1	1,899

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 비응마파지길 조성(41.5억원, L=1.8km)                 : `16. ~ `19.

○ 제7차 전북권 관광개발계획 반영                      : `21. 12.

○ 실시설계 용역 착수                                  : `22.  4.

□ 향후계획

○ 설계 준공 및 공사 시행                       : `23. 10. ~ ‘24. 12

사업명

해상인도교 스카이워크 조성

담당자

관광진흥과 김광수(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 해상절경을 관망할 수 있는 구)해상인도교를 활용한 구조보강,

경관조명 및 스카이워크 설치로 관광객 체험욕구 충족 및 관광활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023. (4년)

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자교, 선유교

○ 규 모 : 스카이워크 조성 2개소(각 L=268m, B=3m, 1986년 준공)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,200	933	1,254	1,013	-
도 비	1,500	466.5	627	406.5	-
시비	1,700	466.5	627	606.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 선유교 실시설계용역 착수                            : `22.  4.

○ 장자교 스카이워크 조성공사 준공                     : `22. 12.

□ 향후계획

○ 장자교 스카이워크 경관조명공사 준공                 : `23.  6.

○ 선유교 공사착공                                     : `23.  8.

○ 선유교 스카이워크 조성공사 준공                     : `23. 12.

□ 사업변경 내역

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업비	3,000백만원	3,200백만원	사업비 초과에 따른 시비 추가 반영

사업명

월명산전망대 및 관광객 쉼터 조성사업

담당자

관광진흥과 김광수(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성

○ 새로운 랜드마크 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년

○ 위 치 : 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원

○ 규 모 : 전망대 및 트래블라운지(거점형 복합관광안내소) 신축,

진입도로 개설(L=250m, B=9.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(균특 574, 도비 2,450, 시비 4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,000	1,808	952	779	4,461
국 비	574	574	-	-	-
도 비	2,450	697	661	769	323
시 비	4,976	537	291	10	4,138

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 월명산전망대 진입로 공사 준공                        : ‘22. 11.

□ 향후계획

○ 전망대 건축설계 및 공사 시행                       : ‘23. 1. ~ ‘25. 6

사업명

군산시간여행축제

담당자

관광진흥과 고중헌(☎454-3333)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산이 보유한 근대문화유산 자원과 잠재력을 최대한 활용, 시민과 함께       하는 축제 기획으로 역사적·교육적 가치 정립 기대

○ 근대와 현대가 조화롭게 공존하는 도시 군산의 이미지를 널리 알려 관광객 유치와 지역경제 활성화에 기여

○ 근대문화유산을 바탕으로 한 창의적인 문화축제로 시민과 지역예술단체

협력 추진으로 지역예술 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. 7.(금) ~ 10(월) (계속사업)

○ 위 치 : 군산시 시간여행마을 및 원도심 일원

○ 내 용 : 시간여행퍼레이드, 군산대한독립만세, 체험, 전시, 공연 프로그램 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,453백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	8,453	4,790	854	889	1,920
국 비	80	20			60
시 도 비	680	340	70	70	200
시군구비	7,694	4,430	784	819	1,660
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022. 10.7.~10.10.   2022년 제10회 군산시간여행축제 개최

○ 2022. 11.           2022년 제10회 군산시간여행축제 결과 보고

○ 2022. 12.            2022년 제10회 군산시간여행축제 정산보고 및 성과분석

□ 향후계획

○ 2023. 6. ~         2023년 제11회 군산시간여행축제 기본계획 수립 및 준비

○ 2023. 10.6.~10.9.   2023년 제11회 군산시간여행축제 개최

○ 2023. 11.          2023년 제11회 군산시간여행축제 결과 보고

○ 2023. 12.           2023년 제11회 군산시간여행축제 정산보고 및 성과분석

사업명

소룡동1구역 도시재생활성화계획

담당자

도시재생과 최수현(☎454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민편익시설확충, 마을공동체활성화 등을 통해 정주 여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020.~2024.

○ 위 치 : 군산시 소룡동 1473-4번지 일원

○ 규 모 : 76,975㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	14,000	3,311	2,864	4,794	3,031
국 비
시 도 비	8,400	2,184	2,487	2,000	1,729
시군구비	5,600	1,126	377	2,794	1,302
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ `22. 1 : 소룡동 순환형주택 준공 및 사용승인 알림

○ `22. 2 : 선형공원조성사업 토지, 지장물 보상금 지급

○ `22. 4 : 집수리사업 시행

○ `22. 5 : 주민공모사업 선정 및 집행

○ `22. 6 : 마을길 확장공사 시행

○ `22. 7 : 실버커뮤니티센터 조성사업 설계용역 시행

○ `22. 8 : 주차장 조성공사 실시설계용역 시행

○ `22. 10 : 어울림센터부지 건축물철거공사 시행

○ `22. 11 : 아기자기 소룡길 만들기 시행

□ 향후계획

○ `23. 7 : 소형공원 지장물 철거 시행

○ `23. 8 : 어울림센터‧광장 실시설계용역 및 주민역량강화용역 착수

○ `23. 9 : 안전한 보행길 조성공사 및 골목길 정비사업 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

구암동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 권종득(☎454-3732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020~2023(4년간)

○ 위 치 : 군산시 구암동 362-1번지 일원

○ 규 모 : 36,184㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,787백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,787	844	129	2,814
국 비	2,651	761	55	1,835
시 도 비	341	57	32	252
시군구비	795	26	42	727
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 65%)

○ `21.  7 : 실시설계 용역 착수

○ `22. 11 : 마스터플랜 변경 승인

○ `22. 12 : 실시설계 용역 완료

○ `22. 12 : 구암경로당 증축 및 리모델링 공사 발주

□ 향후계획

○ `23. 7 ~ : 집수리 지원사업 추진

○ `23. 하반기 : 도시가스 인입 및 골목길 정비 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 변경 : 62,509㎡ → 36,184㎡

사업명

삼학동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 최수현(☎454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전ㆍ위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021~2024(4년간)

○ 위 치 : 군산시 금광동 156-1번지 일원

○ 규 모 : 39,575㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,509백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,509	118.1	2.3	1,647	1,741.6
국 비	2,456	81.8		1,175	1,199.2
시 도 비	316	11.3	0.5	143	161.2
시군구비	737	25.0	1.8	329	381.2
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ ‘21.  3.  : 공모사업 선정

○ ‘21.  9.  : 마스터플랜 수립 용역 착수

○ ‘21. 10.  : 마을기업육성 컨설팅용역 착수

○ ‘22.  3.~ : 사업 추진 관련 회의

□ 향후계획

○ `23. 하반기 : 마스터플랜(안) 수립 및 승인 신청

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

선양동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 권종득(☎454-3732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전ㆍ위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022~2025(4년)

○ 위 치 : 선양동 925-76번지 일원

○ 규 모 : 74,201㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,820	-	101	471	3,248
국 비	2,670	-	99	301	2,270
시 도 비	345	-	2	50	293
시군구비	805	-	-	120	685
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ `22.  3 : 공모사업 선정

○ `22.  8 : 현장컨설팅 개최

○ `22. 11 : 마스터플랜 수립 용역 착수

□ 향후계획

○ `23. 8 : 마스터플랜(안) 수립 및 승인 신청

○ `23. 하반기 : 실시설계 용역 발주

○ `24. ~ `25  : 세부사업 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

서군산 복합체육센터 건립사업

담당자

체육진흥과 온혜영(☎454-5594)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 체육 인프라 구축

○ 부족한 서군산 지역의 체육시설 불균형 해소 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 군산시 산북동 3350번지 일원

○ 규 모 : 부지 19,918㎡, 연면적 8,452㎡, 지하1층/ 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	28,000	3,400	9,800	9,900	4,900
국 비	8,400	1,500	3,500	2,500	900
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	19,600	1,900	6,300	7,400	4,000
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 지방재정(중앙)투자심사 심의                              : ‘19. 11월

○ 공공건축지원센터 건축계획 사전검토 심의                  : ‘20.  4월

○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수             : ‘20.  9월 ~ ‘21.  9월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 착공                        : ‘22.  1월

□ 향후계획

○ 현골구조체 공사                                          : ‘23.  7월

○ 외벽판넬 및 지붕공사 추진                                : ‘23. 12월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 준공                        : ‘24. 12월

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

금석배전국학생축구대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 학생축구대회에서 메이저급 대회로 故 채금석 선생님의 이름을 딴

대회로 한국 축구의 중흥과 우수한 선수 발굴목적으로 개최되는 품격 높은 대회

○ 금석배 축구대회의 명성에 부합한 원활한 행사 운영으로 축구메카 도시로서의

이미지 제고 및 축구 꿈나무 발굴 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 연중 3회(초등 7월/중등 2월/고등 5월)

○ 위 치 : 군산시 일원(월명, 대야, 서군산, 금강, 교통공원)

○ 규 모 : 총 150팀(초등 49팀, 중등 61팀, 고등 40팀)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,269백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,269	579	890	900	900
국 비
시 도 비	548	108	140	150	150
시군구비	2,721	471	750	750	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21. 12월 : 대회승인

○ `22. 02. 14.~ 02. 26. : 2022 금석배전국(중등)학생축구대회 개최(13일간)

○ `22. 06. 03.~ 06. 15. : 2022 금석배전국(고등)학생축구대회 개최(13일간)

○ `22. 07. 22.~ 07. 27. : 2022 금석배전국(초등)학생축구대회 개최(6일간)

○ `22. 12월 : 2023년 대회 승인(중등 2월/고등 5월/초등 7월)

□ 향후계획

○ `23년 2월/5월/7월 : 2023 금석배전국(초중고)학생축구대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산새만금국제철인3종경기대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도 등 천혜의 관광자원을 보유하고 있는 군산 새만금을 국제적으로

홍보하고 지역경제 활성화에도 크게 기여

○ 참가선수와 시민이 함께 어우러질 군산시의 대표적 축제로 자리매김하여

군산시를 복합 스포츠 문화도시로 도약시키는 발판 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. 28.(토) ~ 5. 29.(일)/본경기 5. 29.(일)

○ 위 치 : 군산 새만금방조제 일원

○ 규 모 : 총 500여명(참가선수 및 관계자)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,111백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	1,111	286	305	260	260
국 비	191	96	95
시 도 비	220	50	50	60	60
시군구비	700	140	160	200	200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 선정(국비 95.5백만원)

○ `22. 05. 15.~ 05. 22. : 2022 군산새만금국제철인3종경기대회 웹예선

○ `22. 05. 28.~ 05. 29. : 2022 군산새만금국제철인3종경기대회 파이널

○ `22. 12월 : 2023년 국제경기대회 지원 공모사업 지원

□ 향후계획

○ `23년 4월중 : 유관기관 업무협의(도로 및 해수면 사용허가, 교통통제 등)

○ `23년 5월중 : 2023 군산새만금국제철인3종경기대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

새만금전국인라인마라톤대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 인라인마라톤대회의 새만금 일원 개최를 통해 세계 최장 새만금 방조제와

군산시를 전국적으로 알리고 인라인 선수 및 동호인의 저변확대

○ 수준 높은 대회를 통한 지역경제 활성화와 국내‧외 선수 및 동호인이 참여하는

품격 높은 축제의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 6. 12.(일), 1일간

○ 위 치 : 군산 새만금방조제 일원

○ 규 모 : 총 5,000여명(참가선수 및 관계자 4,000명, 기타 1,000명)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 880백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	880	220	220	220	220
국 비
시 도 비	480	120	120	120	120
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `22. 2월 : 2022년 대회 개최 승인(대한롤러스포츠협회)

○ `22. 3월 : 추진계획수립 및 참가자 홍보 모집

○ `22. 4월 : 유관기관 실무협의 및 종합운영계획 수립

○ `22. 5월 : 자원봉사자 및 근무자 모집·배치계획 수립, 코스사용 승인

○ `22. 6. 12 : 2023 군산새만금전국인라인마라톤대회 개최

□ 향후계획

○ `23. 2월 : 2023년 대회 개최 승인(대한롤러스포츠협회)

○ `23. 3월~5월 : 2023년 추진계획수립 및 홍보

○ `23년 6월중 : 2023 군산새만금전국인라인마라톤대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

KPGA 군산오픈 골프대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 규모 81홀을 갖춘 골프장 인프라 시설을 활용하고, 프로대회

(KPGA) 유치를 통해 골프를 우리시 특화종목으로 자리매김

○ 스포츠와 군산시 관광자원의 연계를 통해 방문객들의 만족도를 높이고

이를 통해 방문객들의 재방문을 유도하여 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. 25.(목) ~ 8. 28.(일), 4일간

○ 위 치 : 군산컨트리클럽

○ 규 모 : KPGA 1부 코리안투어(남) 선수 156명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 452백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	452	100	120	112	120
국 비
시 도 비	72	20	20	12	20
시군구비	380	80	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `20. 1월 : KPGA 군산오픈대회 개최 협약(군산시, KPGA, 군산CC)

○ `22. 2월 : 2022년 대회 유치 및 일정 승인(KPGA 이사회)

○ `22. 4월 : 유관기관 실무자회의 및 종합운영계획 수립

○ `22. 8. 25~28 : 2023 군산CC오픈 프로골프대회 개최(4일간)

○ `22. 12월 : 2023년 대회 개최 승인(KPGA)

□ 향후계획

○ `23. 3월~5월 : 2023년 대회 일정 확정 및 종합지원계획 수립

○ `23년 8월중 : 2023 KPGA 군산오픈 프로골프대회 개최

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전국 종합 탁구대회(초중고)

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내대회 개최를 통한 참가선수단의 경기력 향상은 물론 지역 경제

활성화 및 이미지 제고

○ 대회 개최를 통해 지방의 학생탁구발전 및 보급 확산

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. 27.(토) ~ 9. 4.(일), 9일간

○ 위 치 : 군산대학교 체육관

○ 규 모 : 총800여명(유소년·실업 선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 352백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	352	0	120	112	120
국 비
시 도 비	52		20	12	20
시군구비	300		100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `22. 2월 : 대회 유치 업무협의(군산시탁구협회, 한국유소년탁구연맹)

○ `22. 4월 : 2022년 대회 추진계획수립 및 업무분장

○ `22. 8. 27 ~ 9.4. : 군산오픈 유소년 및 추계 회장기 실업 탁구대회 개최

□ 향후계획

○ `23. 1월 : 2022년 대회 사업평가 및 검토(군산시탁구협회, 한국유소년탁구연맹)

○ `23. 4월 : 2023년 대회 유치 업무협의(군산시탁구협회, 한국유소년탁구연맹)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

전국스포츠클라이밍대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 스포츠클라이밍 동호인 화합과 향후 발전을 도모하며, 강인한 체력을

바탕으로 도전정신을 고취시키는 한편 전라북도 부안군 출신의 여성 산악인

故고미영의 업적을 기리며 전국의 클라이머들의 전라북도 방문을 통해 지역

경제 활성화 도모

○ 2020년 소룡동 인공암장 시설확충 및 개선사업 완료 후 군산클라이밍센터를

전국에 알리고 활성화 하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 11. 19.(토) ~ 11. 20.(일), 2일간

○ 위 치 : 군산클라이밍센터(소룡동)

○ 규 모 : 총500여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 510백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	510	120	130	130	130
국 비
시 도 비	110	20	30	30	30
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `22. 2월 : 1차 대회 유치 업무협의(대한산악연맹, 전북산악연맹)

○ `22. 7월 : 2차 대회 유치 업무협의(대한산악연맹, 전북산악연맹)

○ `22. 11. 19~20 : 2022년 전국청소년스포츠클라이밍대회 개최

□ 향후계획

○ `23. 2월 : 2023년 대회 유치 업무협의(대한산악연맹, 전북산악연맹)

○ `23. 3월~7월 : 시정 점검 및 보수 등 추진

○ `23. 9월 : 2023년 전국청소년스포츠클라이밍대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 대회기간 : (당초) 6월 개최 → (변경) 11월 개최  *시설 점검 및 일정 협의

사업명

전국조정선수권대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대회 개최를 통해 지역 특화종목인 조정의 저변확대와 인프라를 구축하고

우리시 조정팀들의 경기력 향상 및 지역선수 육성의 기반을 마련하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5. 14.(토) ~ 5. 16.(월), 3일간

○ 위 치 : 금강하구둑 일원(전북조정훈련장)

○ 규 모 : 총 37개 종목 700여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 412백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	412	0	140	132	140
국 비
시 도 비	52		20	12	20
시군구비	360		120	120	120
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21. 12월 : 2022년 대회 유치 협의(대한조정협회)

○ `22. 1월 : 2022년 대회 개최 승인(대한조정협회)

○ `22. 3월 : 경기장 시설 점검 및 정비 추진

○ `22. 4월 : 대회장 및 경기시설 준비, 공유수면 사용 허가 등

○ `22. 5. 14~16 : 제19회 K-Water 사장배 물사랑 전국조정대회 개최

○ `22. 12월 : 2023년 대회 유치 신청(대한산악연맹, 전북산악연맹)

□ 향후계획

○ `23. 2월~6월 : 2023년 대회 개최 업무협의(일정, 장소 등)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

국제·전국대회 개최준비 및 운영지원

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금석배 전국학생축구대회, 전국조정선수권대회 등 우리시 개최 국제·전국

대회의 원활한 운영을 위해 임시적 행사시설물 설치·구축 지원

○ 대규모 체육행사의 사전 홍보 및 준비를 통해 성공적인 대회 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1월~12월(연중)

○ 위 치 : 군산시 일원

○ 규 모 : 총 18개 국제 및 전국규모 대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 411백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	411	0	77	184	150
국 비
시 도 비
시군구비	411		77	184	150
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `21. 9월 : 2022년 국제 및 전국규모 체육대회 추진 계획 수립

○ `22. 1월 : 2022년 국제 및 전국규모 체육대회 종합지원계획 수립

○ `22. 1월~12월 : 국제 및 전국대회 개최 지원(행사관련 시설 및 홍보 등)

○ `22. 9월 : 2023년 국제 및 전국규모 체육대회 추진 계획 수립

□ 향후계획

○ `23. 1월 : 국제 및 전국규모 체육대회 종합지원계획 수립

○ `23. 1월~12월 : 국제 및 전국대회 개최 지원(행사관련 시설 및 홍보 등)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

짬뽕 페스티벌 개최

담당자

위생행정과 송은혜(☎454-3413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산 짬뽕특화거리를 활용한 페스티벌 개최로 짬뽕 음식 관광상품 지역선점 및 마케팅 효과 거양

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 10. 8.(토) ~ 10. 9.(일)

○ 위 치 : 군산시 짬뽕특화거리(장미동 동령길 일원)

○ 사업내용 : 개막식, 퍼포먼스 공연, 체험요리 프로그램 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 89백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	179	-	89	90	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	179	-	89	90	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2022년 짬뽕 페스티벌 운영대행용역 제안서평가위원회 개최 : ‘22. 8월

○ 2022년 짬뽕 페스티벌 운영대행용역사 선정                : ‘22. 9월

○ 2022년 짬뽕 페스티벌 개최                       : ‘22. 10. 8 ~10. 9.

□ 향후계획

○ 2023년 짬뽕페스티벌 운영대행 용역사 선정        : ‘23. 7월

○ 2023년 짬뽕페스티벌 개최                        : ‘23. 10. 7 ~10. 8.

사업명

대야면 노인복지관 신축

담당자

경로장애인과 전세림(☎454-3186)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농촌지역 고령화에 따른 노인여가복지시설 확충으로 노인 계층 소외 및       여가활동 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 12. ~ 2022. 8.

○ 위 치 : 군산시 대야면 지경리 731-20 외 1필지

○ 규 모 : 대지 1,766㎡, 건축 연면적 870.05㎡(지상 3층/철근콘크리트)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,644.3백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,644.3	2,636	8.3
국 비
시 도 비
시군구비	2,644.3	2,636	8.3
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 대야면 노인복지관 준공 완료(2021. 12. 16.)

○ BF 본인증(2022. 8.)

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

군산시 승화원 제4추모관(봉안당) 신축

담당자

경로장애인과 이동건(☎454-7952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 장례문화 인식변화 및 화장·납골에 대한 수요 증가로 추모관의 증설 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 9.

○ 위 치 : 군산시 임피면 보석리 산16, 452-3

○ 규 모 : 건축 연면적 3,600㎡(지상 4층), 봉안실(안치단 18,000기), 관리실               유족대기실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,200	1,952	2,703	5,545
국 비	3,815	1,439	1,135	1,241
시 도 비	817	261	224	332
시군구비	4,968	252	862	3,854
지 방 채
민간자본
기 타(특교)	600		482	118

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 공사 착공 후 암반 제거 작업 완료

○ 기초공사 완료

○ 3층 골조공사 완료

○ 동절기 공사 중지

□ 향후계획

○ 동절기 공사 중지 해제

○ 23년 9월 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산시 노인회관 건립

담당자

경로장애인과 송가은(☎454-3184)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인회관 건립을 통해 쾌적하고 안전한 노인복지 공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2023. 3.

○ 위 치 : 군산시 오룡동 840-10번지 일원

○ 규 모 : 신축(지상 3층, 콘크리트조, 건물 연면적 1,250.25㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,656.4백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,656.4	1,385.5	1,001.6	1,269.3
국 비
시 도 비	1,000	1,000
시군구비	2,656.4	385.5	1,001.6	1,269.3
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 공사 실정보고 및 설계변경(2차)

○ 옥상방수 등 외부공사 시행

□ 향후계획

○ 노인회관 준공 및 집기 구입 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

군산시 가족센터 건립 생활SOC사업

담당자

여성가족청소년과 김민지(☎454-3253)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존의 가족센터 공간 협소로 가족상담, 부모교육, 다문화 교류 소통 등

다양한 가족의 욕구 반영이 어려움

○ 공동육아나눔터 설치로 아이돌봄 서비스 시설 집적화로 지역 중심의

보편적 돌봄 서비스 중추적 역할 수행

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021~2024년

○ 위    치 : 군산시 경암동 577-1번지 외 2필지

○ 규    모 : 부지면적 2,023㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,900	115	115	2,683	4,100
국 비	1,800	82.5	82.5	698	1,066
시 도 비	900	32.5	32.5	80.5	123
시군구비	4,200	-	-	1,905	2,911

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2021. 가족센터 생활soc복합화사업 선정(여성가족부)         :‘20. 9.

○ 공공건축물 사전검토 완료(건축공간연구원)                 :‘21. 3.

○ 가족센터 건립 집단 컨설팅 참여(한국건강가정진흥원)              :‘21. 4.

○ 가족센터 건립 부지 변경 논의 및 의회간담회                      :‘21. 7.

○ 시의회 공유재산 관리계획 변경의결                               :‘22. 1.

○ 부지변경 중앙부처 승인(여가부, 문체부)                           :‘22. 3.

○ 22. 2차 전라북도 지방재정투자 재심사                             :‘22. 5

○ 공공건축물 사전심의 재심의(군산시건축위원회)                     :‘22. 6.

○ 설계용역 착수                                                   :‘22. 10.

○ 가족센터 건립 현장 컨설팅(한국건강가정진흥원)                    :‘22. 11.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계                                           :‘22. 11. ~‘23. 6.

○ 건축공사착공 및 준공                              :‘23. 10. ~‘24. 12.

사업명

청소년수련관 기능보강사업

담당자

여성가족청소년과김혜림(☎454-3243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내구연한 경과한 기계설비 교체 필요(노후화에 따른 소방펌프 오작동 등)

○ 시설 노후화로 우천시 내‧외벽 옥상 등 누수 발생

○ 콘크리트 옹벽 침하, 균열 철근 노출 및 부식 등으로 안전사고 노출

○ 수련동 숙소 노후화 및 객실 부족에 따른 리모델링 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 청소년회관로 75(송풍동)

○ 규 모 : 본관동(지하1층, 지상7층), 수련동(지하1층, 지상3층), 연면적 10,689㎡

○ 사업내용 : 누수 및 균열 보수, 노후 기계설비 교체, 석면철거, 숙소 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,043백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,058			5,000
국 비
시 도 비	1,000			1,000
시군구비	4,043		43	4,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)

○ 추가예산 확보 계획(2022. 11월)

○ 지방재정 투자 재심사(2022. 11월)

○ 설계용역 완료(2022. 11월)

○ 일상감사 및 원가 심사 요청(2022.12월)

□ 향후계획

○ 추가예산(30억) 확보(1회 추경 시)

○ 공사 착공(2023. 4월)

사업명

청암산 에코라운드 조성사업

담당자

환경정책과 김현아(☎454-4254)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 자연환경을 활용한 생태관광 자원화로 지역주민 이익 창출

○ 생태관광 수요 증가에 따른 종합계획 추진 및 생태관광지 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 청암산 및 군산호수

○ 규 모 : 생태계 보전·복원, 생태관광 인프라 구축사업 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	7,200	3,054	376	400	400
국 비	1,700	1,143	-	-	-
시 도 비	3,700	1,098	173	300	300
시군구비	1,800	813	203	100	100

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 47%)

○ 2016년 추진사항

- 주민설명회 및 마스터플랜 용역 수립, 꼬마숲 놀이마당 조성, 청암 원앙길 조성 등

○ 2017년 추진사항

- 청암산 입구 생태주차장 조성, 힐링 편백숲 조성

- 생태연못 및 관찰데크, 대나무숲 생태학습장 조성

- 수변 탐방로 환경개선 및 제반사항 등

○ 2018년 추진사항

- 육화습지 복원 및 생태학습장 조성, 조류관찰대, 전망쉼터 및 등산로 정비 등

○ 2019년 ~ 2020년 추진사항

- 생태관광지 내(옥산 입구) 전선 지중화 추진

○ 2021년 추진사항

- 수변산책로 꽃길 조성 사업, 청암산 수변탐방로 정비사업 등

○ 2022년 추진사항

- 청암산 제방변 경관조성사업, 청암산 자연생태체험형 쉘터 제작 등

□ 향후계획

○ 청암산 제방 식생환경 정비사업, 식생 안내판 및 수목표찰 설치 등

○ 청암산 생태학습장 용수공급시설 및 식생정비 사업

○ 청암산 화장실 신규 건립

사업명

월명공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(월명공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2025. 6월

○ 위 치 : 월명공원(군산시 해망동, 소룡동 일원)

○ 규 모 : 공원 내 사유토지 297천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	28,000	6,476	2,374	5,100	14,050
국 비
시 도 비
시군구비	8,000	6,476	2,374	5,100	14,050
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31.5%)

○ 공원 내 필수지역 우선매입  : 18년 1월 ~

- 등산로, 공원시설 사용부지, 재해위험지, 국공유지 밀집지역 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : 19. 5월 ~ 20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : 20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : 20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 매입

사업명

군봉공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(군봉공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1월 ~ 2025. 6월

○ 위 치 : 군봉공원(군산시 개정동, 구암동 일원)

○ 규 모 : 공원 내 사유토지 942천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	27,000	6,277	2,281	4,900	13,542
국 비
시 도 비
시군구비	27,000	6,277	2,281	4,900	13,542
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31.6%)

○ 공원 내 필수지역 우선매입  : 18년 1월 ~

- 등산로, 공원시설 사용부지, 재해위험지, 국공유지 밀집지역 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : 19. 5월 ~ 20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : 19. 5월 ~ 20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : 20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : 20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 매입

사업명

새들허브숲(미세먼지 차단숲) 조성

담당자

산림녹지과 고지현(☎454-2982)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미조성된 장기미집행 새들공원을 미세먼지 저감 등 시민 친화숲으로 조성하여 쾌적한 공원환경 조성 및 시민편익 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023년 (2년)

○ 위 치 : 군산시 수송동 708-2 일원 (새들공원)

○ 규 모 : 59,837㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,800		4.8	5,795.2
국 비	2,900	-	2.4	2,897.6
시 도 비
시군구비	2,900		2.4	2,897.6
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 새들공원 사유토지 보상                            : ‘19. 1. ~ ‘22. 2.

○ 새들허브숲 조성 기본·실시설계용역 착수                   :  ‘21. 11.

○ 새들허브숲 조성 기본계획(안) 내부보고 및 주민설명회       :  ‘22. 3.

○ 새들공원 조성계획 변경결정                                :  ‘22. 11.

○ 일상감사 및 원가심사                                      :  ‘22. 12.

□ 향후계획

○ 공사 및 감리용역 계약                                      :  ‘23. 5.

○ 새들허브숲 조성사업 시행                            : ‘23. 6. ~  12.

사업명

군산 철길숲 조성사업

담당자

산림녹지과 김영아(☎454-2952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산시 도심 내 선형녹지 조성을 통한 바람연결통로 확보 및 찬바람 유입으로 열섬현상 완화 및 미세먼지 저감 등 도시환경문제 해소 요구

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 8. ~ 2025. 6.

○ 위 치 : 군산시 조촌동 3934번지 일원

○ 규 모 : 5.7ha, 연장 2.6km

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	20,000		243	6,757	13,000
국 비	10,000		243	3,257	6,500
시 도 비
시군구비	10,000			3,500	6,500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 철도 유휴부지 활용사업 제안공모 선정              : 22. 3. 10.

○ 도시바람길숲 기본 및 실시설계 용역                : 22. 8. 24.

(1차) ~ 2023. 6월, 405백만원 / (2차) ~ 2023. 12월, 301백만원

○ 산림청 컨설팅 및 자문회의 개최                    : 22. 11. 30.

□ 향후계획

○ 자문단 및 행정실무 협의체 회의                    : 23. 3.

○ 도시바람길숲 용역 중간보고회                       : 23. 4.

○ 도시바람길숲(철길숲) 주민설명회                    : 23. 4.

○ 산림청 설계 심의                                  : 23. 5.

○ 기본 및 실시설계용역 추진                         : 22. 8. ~

○ 철길숲 조성사업 사업 시행                         : 23. 8. ~

사업명

지방도 709호선 확포장공사

담당자

도시계획과 빙기권(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2024

○ 위 치 : 옥구읍 일원 지방도 709호선(옥구초교 ~ 옥서삼거리)

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.2km, B=12m→19m~24m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 25,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	25,900	16,505	7,835	1,000	560
국 비	12,670	9,350	3,320	0	0
시 도 비
시군구비	13,230	7,155	4,515	1,000	560
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 도로확포장공사 2차분 준공 : 2021. 12.

○ 도로 확포장공사 3차분 공사 추진 : 2022. 01. ~

□ 향후계획

○ 교차로 관련기관 협의 및 전기공사 추진

○ 도로포장 및 부대공 등 준공 : 2024. 03.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

신덕~개정마을 확포장

담당자

도시계획과 김승훈(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 협소한 도로폭 확장에 의한 차량교행 가능으로 안전사고 예방 및 주민 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2025년

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 이곡리 780-2 일원

○ 규 모 : 도로 확포장 (B=3m→10m, L= 1.2㎞)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,200	700	764	1,120	2,616
국 비	2,600	500	232	560	1,308
시 도 비
시군구비	2,600	200	532	560	1,308
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 2022. 11. : 사업인정고시(실시계획인가) 완료

○ 2022. 12. : 1차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2023. 10. : 2차분 공사 착공 예정

○ 2023. 12. : 1차분 공사 준공 예정

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

옥서면 농어촌도로 304호선 확포장

담당자

도시계획과 김승훈(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 옥서면 소재지와 군산CC 연결도로 확장으로 기반시설 설치

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년~2025년

○ 위 치 : 군산시 옥서면 옥봉리 1285-1번지 일원

○ 규 모 : (농어촌도로 304호선) : L=1.96㎞, B=7m→12m

(면소재지) : L=0.73㎞, B=6m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,000	700	700	1,066	7,534
국 비	5,000	500	200	533	3,767
시 도 비
시군구비	5,000	200	500	533	3,767
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 2022. 06.   : 실시계획인가(사업인정고시) 완료

○ 2023. 06.   : 1차분 공사 준공

○ 2023. 06.   : 2차분 공사 착공

□ 향후계획

○ 2차분 공사 준공

○ 미보상 편입필지 수용재결 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

공항로 기반시설 설치 및 정비

담당자

도시계획과 빙기권(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024

○ 위 치 : 공항로 일원

○ 규 모 : 기반시설 설치 및 도로정비 L=8km 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	15,000	7,489	2,971	3,540	1,000
국 비	7,500	3,960	1,000	2,290	250
시 도 비
시군구비	7,500	3,529	1,971	1,250	750
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 도시가스 공급 관련 군산도시가스(주) 업무협약 및 배관 설치공사 추진

□ 향후계획

○ 2023. 6. : 공항로 일원 도로정비공사 완료

○ 2023. 9. : 도시가스 미공급 세대 확인 후 배관 연장 추가 검토

○ 신성마을 안길 확포장 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

4토지~리츠프라자호텔 도로개설 및 확장

담당자

도시계획과 빙기권(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 산북중학교 ~ 리츠프라자호텔 ~ 지곡교회

○ 규 모 : 도로개설 및 확장 L=2km, B=15m~20m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	35,000	200	2,900	6,624	25,276
국 비	17,500	200	1700	2,962	12,638
시 도 비
시군구비	17,500	0	1200	3,662	12,638
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 2022. 07. 25. : 공사 착공(전체분 및 1차분)

○ 2023. 02. 08. : 공사 착공(2차분)

□ 향후계획

○ 2023. 02. 08. : 공사 착공(2차분)

○ 2023. 7. ~ 2024. 9. : 2차분 공사 추진(노천 발파 및 터널 굴착 등)

○ 2024. 9. ~ : 3차분 공사 추진

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

쌍용예가@~은파호수공원간 도로개설공사

담당자

도시계획과 유연태(☎454-3523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동산중학교 개교에 따른 안전한 통학로 개설 및 지곡동 일원 주민편의 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. 1. ~ 2022. 12.

○ 위 치 : 군산시 쌍용예가@ 사거리 ~ 은파순환도로 삼거리

○ 규 모 : 도로개설 L=556m, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 16,157백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	16,157	15,357	800
국 비
시 도 비	16,157	15,357	800	-	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2020. 02. 28. ~ 2020. 10. 16. : (2공구) 1차분 공사완료

○ 2020. 12. 11. ~ 2021. 06. 08. : (2공구) 2차분 공사완료

⤷ `2021. 03. 29. ~ `2021. 06. 26. : 문화재 발굴조사 용역 추진

○ 2021. 06. 30. ~ 2022. 12. 20 : (2공구) 3차분 준공 및 사업완료

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

지곡동일원(중로2-16호선 외 9개노선) 도로개설공사

담당자

도시계획과 유연태(☎454-3523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산시 지곡동 일원 개발행위허가 제한지역의 체계적‧계획적인 개발을        유도하기 위한 신속한 도로 가로망 사업 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2032. 12.

○ 위 치 : 군산시 지곡동 일원

○ 규 모 : 총 10개노선 L=3,127m, B=8~20m(중로9개, 소로 1개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 32,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	32,900	-	1,000	-	31,900
국 비
시 도 비	32,900	-	1,000	-	31,900
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 2022. 12. 15. : 기본 및 실시설계 용역 착공

□ 향후계획

○ 2023. 12 : 기본 및 실시설계 용역 준공

↳ 지곡동 기반시설 추진방안에 따라 사업 추진 여부 검토

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

은파교회일원(대로 2-9호선) 도로개설공사

담당자

도시계획과 유연태(☎454-3523)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지곡동 쌍용예가@~은파간 도로 개설 완료에 따라 현재 추진중인 사토지~       리츠프라자 호텔 ~지곡교회~ 은파교회 연계 개설하여 도로 가로망 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 6 ~ 2024. 12

○ 위 치 : 군산시 지곡동 은파교회 일원

○ 규 모 : 도로개설 L=470m, B=30m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,133백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,133	2,475	1,035		623
국 비
시 도 비	4,133	2,475	1,035		623
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 8%)

○ 2022. 12. : 토지보상(90%)

□ 향후계획

○ 2023.  3. : 실시설계 용역 착공

○ 2023. 12 : 실시설계 용역 준공

○ 2024.  1 : 공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

임피면 농마교 재가설공사

담당자

건설과 강형기(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 임피면 술산리 682-14인근

○ 규 모 : 교량 가설 L=91.0m, B=5.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,100백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,100	1,873	473	227	-
국 비	800	800
시 도 비	1,300	1,073	473	227	-
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ ‘19.09. : 재난안전 특교세교부 결정

○ ’20.12. : 실시설계 완료 및 공사 착공

○ ‘21.12. : 1차분 공사추진(공정률 90%)

○ ‘22.05. : 보상완료(수용재결 결정완료 ’22.5.12.)

○ ‘22.12. : 교량슬래브 완료

□ 향후계획

○ ~ ’23. 06. : 사업 추진

사업명

대야 삼라교 재가설공사

담당자

건설과 강형기(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산      ‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2023.

○ 위 치 : 대야면 접산리 라궁(농도 314호 접산선)

○ 규 모 : 접속도로 L=1.27km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,669백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,669	3,331	192	338
국 비
시 도 비
시군구비	3,669	3,331	192	338
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ ‘21. 09 : 도로 노선지정공고

○ ‘22. 01 : 수용재결 신청(지방토지수용위원회)

○ ’22. 05. : 수용재결 완료

□ 향후계획

○ ~ ‘23. 11. : 사업 추진

사업명

고군산군도 내부도로(무녀선) 확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 일원(1공구)

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.8km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,000	1,750	113	1,112	6,025
국 비	7,200	1,400	91	889	4,820
시 도 비	900	175	11	111.5	602.5
시군구비	900	175	11	111.5	602.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 1공구 편입토지 보상계획 완료 : ’21.  8월

○ 1공구 보상추진 (협의보상 2회) : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 1공구 보상추진 (협의보상)    : ’23.  6월

○ 1공구 보상                   : ‘23.  7월 ~

○ 1공구 공사추진               : ‘24.  1월 ~

□ 사업변경 내역

○ 무녀선 2.2km에서 1구간 0.8km, 2구간 항만해양과에서 추진(별도)

사업명

고군산군도 내부도로(신시선) 확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 신시도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.2km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2023년 이후
계	7,700	6,100	320		1,280
국 비
시 도 비
시군구비	7,700	6,100	320		1,280
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료  : ‘19. 12월

○ 1공구 착공                   : ’20.  1월

○ 1공구 준공                   : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 2공구 보상추진               : ‘23. 7월 ~

□ 사업변경 내역 (해당없음)

사업명

고군산군도 내부도로(장자선) 확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.3km, B=3→6.5m, 교량재가설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	5,500	850	1,430	2,570	650
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	850	1,430	2,570	650
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 장자선 공사착공        : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 공사 준공      : ‘23. 12월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

선유3구 남악마을 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선유도를 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	6,600	821	579	1,000	4,200
국 비
시 도 비
시군구비	6,600	821	579	1,000	4,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 편입토지 보상협의      : ’21.  2월 ~

□ 향후계획

○ 편입토지 보상          : ‘23.  7월 ~

○ 공사 착공              : ‘24.  1월 ~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군도 6호선(석화~고척) 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌 (☎ 454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시내버스 통과구간의 협소한 도로 확장으로 지역주민에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 대야면 석화마을 ~ 고척마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,200	1,158	43	1,001	998
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	1,158	43	1,001	998
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시설계 완료         : ‘20. 5월

○ 공사 재착공           : ’22. 6월

□ 향후계획

○ 토지보상              : ’23. 4월

○ 공사 추진             : ‘22.  6월 ~ ’24. 12월

□ 사업변경 내역 (해당없음)

사업명

옥구면도 105호(옥정마을) 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌 (☎ 454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 옥장리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.0km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,700	95	355	700	1,550
국 비
시 도 비
시군구비	2,700	95	355	700	1,550
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 보상계획공고          : ’21. 8월

○ 감정평가 의뢰         : ’22. 6월

□ 향후계획

○ 편입토지 보상협의     : ‘23.  7월 ~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

옥도리도 203호 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.5km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,600	161	39	200	2,200
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	161	39	200	2,200
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 착수         : ‘20.  3월

○ 문화재 현상변경 결정  : ’22.  5월

○ 실시설계 완료         : ’22. 12월

□ 향후계획

○ 보상추진              : ‘23. 9월 ~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

회현리도 210호선 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 군산시 회현면 회현초교 ~ 척동마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.6km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,700	1,050	25	1,275	1,350
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	1,050	25	1,275	1,350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 실시설계 완료         : ‘19. 12월

○ 편입토지 보상 및 착공 : ’19. 12월

□ 향후계획

○ 공사 추진      : ~ ‘24. 10월

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

옥산 리도 206호선(대려~금성) 도로확포장공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥산면 옥산리 ~ 회현면 금성리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.7km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	210	0	0	3,790
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	210	0	0	3,790
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘21.  3월

○ 실시설계 완료         : ‘22. 12월

□ 향후계획

○ 보상추진              : ‘23. 1월 ~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

동백대교 경관조명 설치공사

담당자

건설과 김다영(☎454-3623)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동백대교 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있는 조명환경 확보

○ 동백대교 교량의 안전성과 심미성 강화 및 조화로운 야간환경개선 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ~ 2023.

○ 위 치 : 동백대교 L=1.93km

○ 내 용 : 교량 및 아치부 조명설비 보강 및 개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000	-	3,000	1,000	-
국 비	2,000	-	2,000	-	-
시 도 비
시군구비	2,000	-	1,000	1,000	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 44%)

○ ’22. 09. ~ ’22. 12. : 공사 발주 및 계약 절차 이행

○ ’23. 01. ~ ’23. 07. : 공사 착공 및 추진

□ 향후계획

○ ’23. 01. ~         : 공사 착공 및 추진

○ ’23. 12.           : 준공

사업명

고령자 복지주택사업

담당자

주택행정과 하기호(☎454-3714)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전 세계적으로 노인인구의 급격한 증가로 고령화 사회가 빠르게 진행되면서

노인문제가 사회문제의 중심으로 떠오르는 가운데 고령사회의 충격을 대비한

맞춤형 임대주택 및 복지서비스 공급으로 65세이상 노령층 등의 주거안정

불안을 해소하고 복지시설을 일체화하여 주거･복지혁신을 통한 실질적인

삶의 질을 높이기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2023년

○ 위 치 : 전라북도 군산시 오룡동 900-40번지 일원

○ 규 모 - 주택건설 : 고령자 복지주택 150호(전용 26㎡)

- 복지시설 : 1∼2층 연면적 1,500㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,041백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	22,041	13,907	6,280	1,393	461
국 비	14,911	10,437	4,474
시 도 비
시군구비	2,251	1,697		93	461
지 방 채
민간자본
기 타(LH)	4,879	1,773	1,806	1,300

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 사업계획승인 고시 (국토부 2020. 1.)

○ 사업인정고시 신청 (국토부 2020. 1.)

○ 사업인정 통지 (국토부 2020. 11.)

○ 수용재결 신청 (전라북도 2021. 2.)

○ 전라북도지방토지수용위원회 개최 : 2021. 7.

○ 수용재결 및 공탁 : 2021. 7.

○ LH에 토지인계 및 공사착수 : 2021. 8.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2024. 03.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 – 연면적 : (변경 전) 9,689.17㎡
(변경 후) 9,685.13㎡

○ 총사업비 : (변경 전)16,551,920천원(정부재정지원금 14,911,050천원)

(변경 후)22,041,000천원(정부재정지원금 14,911,050천원)

※ 정부재정지원금은 동일하고, 우리시 및 LH공사의 자금 계획에 따라

변경됨.

○ 사업기간 : (변경전) 2019.12. ~ 2022.12.

(변경후) 2019.12. ~ 2024.03.

사업명

화물자동차 공영차고지 조성사업

담당자

교통행정과 백진숙 (☎ 454-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쾌적한 주차환경조성으로 화물자동차 운전자들의 편의증진도모

○ 주요도로변 및 주택가 불법주차로 인한 민원 및 교통사고 위험 해소

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2022

○ 위 치 : 군산시 옥녀로 6-172(내초동), 구)비위생 매립장 일원

○ 규 모 : 39,670㎡[주차장 255면, 부대시설(관리동 등)]

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,325백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	9,325	7,613	1,712
국 비	3,000	3,000
시 도 비	3,407	3,407
시군구비	2,918	1,206	1,712
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 화물공영차고지 조성계획 수립(비위생 매립장 부지)         : ‘12. 10월

○ 화물자동차 휴게시설 확충 종합계획 선정(국토부)           : ‘14. 12월

○ 전북도 지방재정 투자사업 심사완료                        : ‘15. 7월

○ 2016~2020년 중기 지방재정계획 반영                       : ‘15. 9월

○ 사업부지 도시계획시설결정(재정비) 및 용도지역변경 용역 승인(전북도) : ‘19. 1월

○ 실시설계 용역 추진                                       : ‘19. 3월

○ 전북도 지방재정 투자사업 재심사 완료                     : ‘19. 6월

○ 도시계획시설 실시계획인가 및 전라북도 원가심사 완료      : ‘20. 4월

○ 화물자동차 공영차고지 조성공사 착공                      : ‘20. 5월

○ 화물자동차 공영차고지 준공                               : ‘22. 1월

○ 화물자동차 공영차고지 운영    　                         : ‘22. 3월~

□ 사업변경 내역

○ 해당사항 없음

사업명

2022년 지능형교통체계(ITS) 구축사업

담당자

교통행정과 이정민(☎454-7913)

□ 사업목적 및 필요성

○ ITS 구축 및 교통빅데이터 구축으로 안전하고 편리한 교통환경 조성

○ 긴급차량 우선신호시스템 도입을 통한 소중한 시민의 생명과 재산 보호

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 5 ~ 2023. 12.

○ 위 치 : 군산시내 주요교차로 및 도로

○ 규 모

- 현장설비 : 스마트교차로 34개소, 신호온라인 30개소, 도로전광표지판(VMS) 3개소, 긴급차량우선신호 401개소, 신호온라인제어 30개소, 광자가통신망 6km 등

- 센터설비 : 긴급차량우선신호 S/W 1식, 영상분석 S/W 1식, 빅데이터 S/W 1식, 시설물관리 S/W 1식 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,000		1,167	2,833
국 비	2,400		1,084	1,316
시 도 비
시군구비	1,600		83	1,517
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 75%)

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 실시설계 용역 시행  : 2022. 5. ~ 11.

○ 국토교통부 실시계획 승인                        : 2022. 10. 4.

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 사업자 선정 및 착수 : 2022. 11. ~ 12.

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 감리업체 선정 및 착수 : 2022. 11. ~ 12.

□ 향후계획

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 시행            : 2022. 12. ~ 2023. 12.

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 감리용역 시행   : 2022. 12. ~ 2023. 12.

○ 사업 효과 평가 및 단위시스템 성능평가 시행   : 2023. 11. ~ 12.

○ 지능형교통체계(ITS) 구축사업 정산보고(국토부) : 2024. 1.

사업명

군산 로컬푸드복합센터 신축사업

담당자

먹거리정책과 변유진(☎454-3042)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역의 안전한 농산물의 안정적인 판로 확보 및 건강한 먹거리 공유

○ 농업인과 도시민이 함께하는 복합시설 제공으로 지역농업을 통한 선순환 경제체계 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2022년

○ 위 치 : 군산시 경암동 577-1번지(대, 3,653㎡)

○ 규 모 : 1층, 연면적 633㎡(직매장 605㎡, 로컬카페 28㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,000	614	1,378	8
국 비	500	500	0
시 도 비	150	15	135
시군구비	1,350	99	1,243	8

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축 설계용역 완료             : ‘21. 5월

○ 군산 로컬푸드복합센터 건축 입찰계약 및 착공          : ‘21. 12월

○ 군산 로컬푸드복합센터 준공                           : ‘22. 10월

□ 향후계획

○ 군산 로컬푸드복합센터 인테리어 및 조명공사           : ‘23. 1월

○ 군산 로컬푸드복합센터 가감속차로 설치공사            : ‘23. 4월

○ 군산 로컬푸드복합센터 개장                           : ‘23. 6월

사업명

농업인 복합교육지원센터 건립

담당자

농촌지원과 안경식(☎454-5222)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시농업인 유치와 미래농업을 이끌어 갈 청년창업농 교육기회 제공을 위한

프로그램 운영 및 교육장소 마련 절실

○ 농업 품목별 다양한 기술지식·정보 제공 및 농업인의 문화생활기반 조성으로

커뮤니티 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년

○ 위 치 : 군산시 개정면 운회리 634-33

○ 규 모 : 982㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,208백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	4,208	116	664	3,428	0
국 비	1,378	58	410	910	0
시 도 비	150	0	0	150	0
시군구비	2,680	58	254	2,368	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 도시계획 변경용역 : ‘21. 3. ~ ’22. 3.

○ 건축 기본·실시설계 용역 : ‘22. 1. ~ 9.

○ 건축 시공 일상감사 및 도 원가심사 완료 : ’22. 8.

○ 건축공사 입찰 시공업체 선정 및 착공 : ‘ 22. 9. ~ 10.

○ 건축공사 진행 중 : 현재

□ 향후계획

○ 농업인 평생교육 복합센터 교육·운영장비 확충 : ’23. 9.

○ 농업인 평생교육 복합센터 준공 : ‘23. 10.

사업명

농어촌 지방상수도 확장공사(성산)

담당자

수도과 서현기(☎454-5402)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환경부 농어촌․도서지역 상수도 확충계획에 반영된 사업으로 농어촌지역의

맑은 상수도 공급 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016. ~ 2025.

○ 위 치 : 군산시 성산면 일원

○ 규 모 : 성산면 미포설 지역 상수관 확충 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,089백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	3,089	694	71	71	2,253
국 비	451	451
시 도 비	1,711	50	50	50	1,561
시군구비	927	193	21	21	692
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 성산면 일원 수돗물 미보급 세대 급수공사 추진

- 2022년 : 수도관 포설 L=240m

□ 향후계획

○ 23년 농촌지역(성산면) 급수관 포설공사 추진

사업명

동부권도서관 건립

담당자

시립도서관관리과 이효정 (☎-454-5626)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동부권 신도심지역 내 도서관 건립으로 어린이 중심의 전세대가

함께하는 도서관 조성(최신트렌드 반영 체류형 독서문화공간)

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017~2022년(공정률 100%, ‘21.12.15 준공)

○ 위 치 : 군산시 궁포3로 30(조촌동 2-99,41번지)

○ 사 업 비 : 10,155백만원(국비3,782, 특교세800, 시비5,573) ※ 균특 40%지원

- 설계비 511백만원 / 공사비 9,155백만원 / 감리 등 489백만원

○ 규 모 : 부지 1,500㎡, 연면적 3,753㎡(지하1층/지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,155백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	10,155	9,425	416	0	0
국 비	3,782	3,621	147
특 교 세	800	800
시군구비	5,573	5,004	269
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○‘16. 07. : 동부권도서관 건립 검토보고

○‘17. 11. : 재정투자심사 등 행정절차이행

○‘19. 12. 19. : 공사착공

- 공사금액  : 총차분(금5,680,004,480원) 1차분(3,528,924,290원)

- 공사기간  : 총차분(‘19.12.19.~‘21.6.18.) 1차분(‘19.12.19.~‘20.9.18.)

○‘21. 5. 17. : 동부권도서관 건립 1차공사 준공 및 2차공사 착공

○‘21. 10.    : 금강도서관 명칭 확정

○‘21. 12. 15. : 금강도서관 건립공사(2차공사) 준공

○ ’22. 06. 20. : 금강도서관 시범운영 실시

○ ‘22. 08. 18. : 금강도서관 개관

□ 향후계획

○ 국비반납      : 2024. 내

사업명

군산근대역사박물관 리모델링 사업

담당자

박물관관리과 조정훈 (☎ 454-7882)

□ 사업목적 및 필요성

○ 개관 10년차, 연간 1백만명이상 방문하는 군산의 대표 문화시설로써, 노후       시설 개선 및 전시공간 재구성 등 효과적인 리모델링을 통한 박물관의         지속적인 발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 전북 군산시 해망로 240(장미동)

○ 규 모 : 부지면적 8,328㎡, 연면적 4,248㎡ (지하1층, 지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	2,808	227	2,581	-	-
국 비	1,123	91	1,032	-	-
시 도 비
시군구비	1,685	136	1,549	-	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 기본계획 수립 : 2020. 08.

○ 설계용역      : 2021. 09.

○ 공사착공      : 2021. 12.

○ 준공 및 개관  : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 국비반납      : 2023. 내

사업명

금강미래(기후변화) 체험프로그램 운영

담당자

박물관관리과 김지현 (☎ 454-5683)

□ 사업목적 및 필요성

○ 체험프로그램 운영을 통한 금강미래체험관 활성화

○ 교육 및 체험을 통한 참여자들의 기후 위기 의식 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 3. ~ 12. (10개월)

○ 위 치 : 군산시 철새로 120 금강미래체험관

○ 규 모 : 연간 교육인원 10,000명 이상

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 178백만원(매년 추진)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2022년	2023년	2024년 이후
계	841	192	149	200	300
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	841	192	149	200	300
시군구비	-	-	-	-	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 매년 추진하는 행사성 사업으로 2022년도 프로그램 운영 종료

○ 2022년 운영실적 : 1,039회/22,635명 참여

○ 2023년도 체험프로그램 운영 중

□ 향후계획

○ 2023년 하반기 체험프로그램 운영

○ 하반기 강사 교육 실시

□ 사업변경 내역

○ 해당없음