개별 투자심사 사업 추진현황

별지 10

사업명

조촌동 행정복지센터 신축공사

담당자

행정지원과 주용진(☎454-2245)

□ 사업목적 및 필요성

○ 청사의 노후화에 따른 주민불편 해소 및 근무여건 개선요망

○ 주민자치 프로그램 활성화를 통한 삶의 질 향상에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전북특별자치도 군산시 조촌동 909-4 일원

○ 규 모 : 지상 4층, 지하 1층 / 부지면적 1,511.7㎡(457평), 연면적 2,906.8㎡(879평)

- 연면적(지상층 2,101.7㎡, 지하층 805.16㎡), 건축면적 845.21㎡(255평)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,400	-	121	2,000	5,279
국 비
시 도 비
시군구비	7,400	-	121	2,000	5,279
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 설계용역 업체선정(2023. 1.)

○ 경관심의 완료(2023. 7.)

○ 인증절차(에너지효율등급, 제로에너지건축물, BF) 이행(2023. 9.)

□ 향후계획

○ 설계용역 준공(2024. 5.)

○ 공사 착공(2024. 6.)

○ 공사 준공(2025. 12.)

사업명

상권활성화사업

(구도심상권르네상스)

담당자

일자리경제과 김한나

(☎454-2682)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산공설시장 등 100년의 장터를 新소비트랜드에 맞는 쇼핑공간 구축

○ 쇼핑ㆍ문화ㆍ소통 플랫폼 연계 구축으로 상권진작 및 상인자생력 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 4. ~ 2025. 3. (5년)

○ 위 치 : 구도심 상권활성화구역(공설시장, 신영시장, 중앙상가)

○ 규 모 : 177,650㎡ / 사업체수 : 607개(빈점포 131개)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  8,000백만원 (국비 4,000, 도비 800, 시비 3,200)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	기 타
		기투자	2023년	2024년~
계	8,000	4,900	1,700	1,400
국 비	4,000	2,450	850	700
시 도 비	800	450	170	140
시군구비	3,200	2,000	680	560
지 방 채	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 61% *‘23.12.기준)

○ ‘18. 12. 7. ○ ‘19. 1. 14. ○ ‘19. 1. ~ 2. ○ ‘19. 6. ○ ‘19. 9. 16. ○ ‘19. 12. 10. ○ ‘20. 4. 14 ○ ‘20. 4. ~ 24. 3. ○ ‘24. 4. ~ 25. 3.	: 2018 상권르네상스 프로젝트 사업 공고 : 상권활성화재단설립 및 운영에 관한 조례(안) 입법예고 : 상권활성화사업 사업계획 수립, 사업추진협의회 구성 : 상권활성화사업 투자심사 : 2019 상권르네상스 사업 공모 : 상권르네상스 사업 선정 : 사업계획서 및 상권활성화구역 중기부 협의후 전북도 승인 : 1~4년차 상권르네상스 사업 추진 : 5년차 상권르네상스 사업 추진 중 (현재)

□ 향후계획

○ 상권활성화구역 인근지역 3천세대 아파트 조성에 따른 거주민 친화형상권 조성

○ 도시재생뉴딜사업 등과 연계 관광객 유인할 수 있는 문화관광형 상권 조성

사업명

군산사랑상품권 발행 및 운영

담당자

일자리경제과 유재경(☎454-2662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역 내 상가 이용으로 관내 소상공인 매출증대 및 경영안정

○ 지역자금 역외 유출 방지 및 군산 지역경제 활성화

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2018~현재

○ 발행규모 : 2조5천7백억원(누적)

○ 발행종류 : 종이, 모바일, 카드

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 290,090백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년~
계	290,090	213,553	42,042	34,495
국 비	114,191	108,473	3,728	1,990
시 도 비	5,671	3,000	1,651	1,020
시군구비	170,228	102,080	36,663	31,485
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)  [‘23. 12월말 기준]

○ 상품권 3,850억원(지류 500, 모바일 3,350) 발행

○ 상품권 가맹점등록 (종이 12,706개, 모바일 10,619개)

○ 그간 상품권 발행현황 : 누적 발행금액 2조2천5백억원

○ 군산사랑카드 발급(4개 금융기관 74개 지점) : 77,327건

○ 상품권 할인율 10% 지원으로 시민생활 안정 기여

□ 향후계획

○ 상품권 부정유통 사전 모니터링을 통한 건전한 유통질서 확립

사업명

군산중소유통공동도매물류센터 건립

담당자

일자리경제과 유재경(☎454-2662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공동구매를 통한 물류비 절감으로 골목상건 소상공인 가격경쟁력 확보

○ 소비자 가격 인하 환경 조성으로 지역 물가 안정 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 1. ~ 2023. 5.

○ 위 치 : 군산시 조촌로 213(경암동)

○ 규 모 : 부지 11,813㎡, 건물 4,978㎡ (1동-4,379㎡, 2동-599㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,712	6,838	3,874
국 비	160	160
시 도 비	5,663	3,938	1,725
시군구비	4,889	2,740	2,149
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2019년 제5차 전북도 재정투자심사 의뢰 및 통과 : ‘19. 6.

○ 물류센터 시공사 선정 및 착공                   : ‘21. 12.~

○ 건축물 사용 승인                               : ‘23. 5. 24.

○ 물류센터 운영 개시                             : ‘23. 6. 5.

□ 향후계획

○ 센터 운영 관리 실태 지도 및 점검               : 연중

사업명

조선기자재기업 신재생에너지 업종전환 지원

담당자

산업혁신과 고무성(☎454-2732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산조선소 가동중단에 따라 침체된 지역경제 활력을 불어 넣기 위해서 새로운 성장동력 확보    ○ 조선기자재업체의 어려운 재정여건 등을 고려, 원활한 업종전환을 위한 지원

□ 사업개요

○ 사업기간 : 2020 ~ 2024. 6.

○ 사업내용 : 협동화공장 및 장비 23종 구축

○ 전담기관 : 한국에너지공단 / 주관기관 : 전북도, 군산시

○ 수행기관 : 군산조선해양기술사업협동조합

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 29,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	29,700	17,310	11,440	950	-
국 비	17,490	9,663	7,828	-	-
시 도 비	3,000	3,000	-	-	-
시군구비	7,000	3,751	2,506	743	-
자 부 담	2,210	896	1,106	207	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 조선기자재 업종전환을 위한 협동조합인가 및 설립      : `18. 5. 25.

○ 사업계획 승인(산업통상자원부)                         : ‘20. 6. 22.

○ 협약 체결(한국에너지공단&전북도&군산시)             : ‘20. 7. 15.

○ 협동화공장 매입(연면적 19,082㎡)                      : ‘20. 10. 30.

○ 사업계획 변경 (사업기간 변경 등)                      : ‘23. 12. 29.

○ 장비 23종 구축완료                               : ‘22. 1. ~‘23. 12.

□ 향후계획

○ 도장동 증축공사 준공                                 : ~ ‘24. 6.

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 변경 : (당초) 2020 ~ 2023. 12 → (변경) 2020 ~ 2024. 6

- 변경사유 : 장비 입찰공고 유찰 및 도장동 설계 변경

사업명

산업단지 복합문화센터 건립

담당자

산업혁신과 최경외(☎454-2772)

□ 사업목적 및 필요성

○ 산업단지 내 문화‧체육‧편의시설 미비로 인한 청년‧기술인력의 취업기피 분위기 전환, 지역주민 및 근로자 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 11. ~ 2024. 09.

○ 위 치 : 군산시 오식도동 661번지

○ 규 모 : (건축면적) 1,373.87㎡ / (연 면 적) 3,019㎡(지상3층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  9,791.5백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,791.5	3,422	5,654	715.5	-
국 비	3,294	2,503	791	-	-
시 도 비	988	750	238	-	-
시군구비	5,509.5	169	4,625	715.5	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  90%)

○ 산업단지 복합문화센터 건립사업 협약체결            : ‘19. 11.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 설계용역 추진     : ‘20. 11.~‘21. 12.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 착공                : ‘22. 05.

○ 산업단지 복합문화센터 신축공사 준공                : ‘23. 09.

□ 향후계획

○ 산업단지 복합문화센터 시범운영                   : ‘24. 07.~‘24. 08.

○ 산업단지 복합문화센터 개관                         : ‘24. 09.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : (당초) ‘19.11.01.~’24.06.30. ⇒ (변경) ‘19.11.01.~’24.09.30.

○ 부지면적 : (당초) 1,790㎡ ⇒ (변경) 2,343㎡

○ 건축규모 : (당초) 3,260㎡ ⇒ (변경) 3,019㎡

○ 주요기능 : (당초) 복합문화공간, 카페 등 ⇒ (변경) 평생학습센터, 기업지원실 등

사업명

전북 군산 강소연구개발특구 육성 지원사업

담당자

산업혁신과 최란(☎454-2742)

□ 사업목적 및 필요성

○ “R&D-기술사업화-기업성장-재투자”의 선순환 산업생태계 조성

○ 전주기에 걸친 기업 맞춤형 컨설팅·기술지원을 통한 기술사업화 촉진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 3. ~ 2026. 2.

○ 위 치 : 군산국가·2산단, 새만금산단(1공구)

○ 규 모 : 2.70㎢ (기술핵심기관 0.86㎢, 배후공간 1.84㎢)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 24,650백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	24,650	13,500	3,850	3,450	3,850
국 비	15,600	10,000	2,000	1,600	2,000
시 도 비	4,000	1,450	850	850	850
시군구비	5,050	2,050	1,000	1,000	1,000

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 기술발굴 및 연계 : 기술이전 및 출자 122건, 연구소기업 등록 20건

○ 강소형 기술창업 육성 : 창업 35건, 투자연계 217억원

○ 강소특구 특화성장 지원 : 지역 내 혁신 주체 간 네트워크 운영 및 특화

분야 기업육성 지속 지원

□ 향후계획

○ 지역 특성화 육성지원 및 혁신네트워크 추진	: 상시

○ 수요기반 사업화 우수기술 발굴·이전 및 연구소기업 발굴	: 상시

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 변경내역 : 총사업비 23,150백만원 → 24,650백만원

○ 변경사유 : 지역 특성화 육성 활성화를 위한 사업비 추가 지원

사업명

이차전지 기업 역량강화 지원사업

담당자

산업혁신과 김규리(☎454-2745)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이차전지 신기술 연구를 통한 초격차 기술확보로 이차전지 소재분야의 공급망 강화를 통한 글로벌 허브 조성

○ 이차전지 국가첨단기술 확보를 통한 기업의 경쟁력을 강화하고 군산시 주력산업과의 연계협력을 통한 지역산업 동반 성장

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 7. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 새만금 이차전지 특화단지 및 도내 이차전지 기업

○ 내 용 : 기술개발 역량강화 지원, 촉진 및 인력양성 체계구축, 생태계 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	-	3,000	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	1,500	-	1,500	-	-
시군구비	1,500	-	1,500	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 이차전지 기업역량강화지원사업 협약 체결           : ‘23. 11.

□ 향후계획

○ 이차전지 교육프로그램 운영	: ‘24. 1. ~

- 이차전지 셀 제조 및 특성평가 프로그램 교육(10회, 131명)

○ 기술개발 역량강화 지원(지정4건, 자유2건)	: ‘24. 3.

○ 기업 맞춤형 채용 지원(3건)	: ‘24. 4.

○ 기술개발 역량강화(추가) 지원(지정1건, 자유1건)	: ‘24. 6.

○ 기업 맞춤형 채용지원사업 추가 공고	: ‘24. 6.

○ R&D 지원기업 진도보고 및 중간점검	: ‘24. 9.

○ 기업 맞춤형 채용지원사업 최종점검	: ‘24. 11.

○ 기술세미나 및 성과보고회	: ~ ‘24. 11.

사업명

바이오콤비나트 기술개발사업

담당자

산업혁신과 김형우(☎454-2743)

□ 사업목적 및 필요성

○ 요소 기술 통합검증 및 바이오화학 생산공정 개발
○ 경제성 확보 및 상업화 유도
○ R&D와 중소기업 기술의 test-bed활용

□ 사업개요

○ 기 간 : (기술개발)2014년~2019년/ (임대)2014.10.1. ~ 2024.9.30.

○ 위 치 : 군산시 오식도동 862-4(군산2국가산단 임대단지, 25,604㎡)

○ 사업내용 : 바이오콤비나트 조성 및 바이오화학산업 원천기술개발
-Demo-plant 수준의 바이오매스 전처리, 발표, 분리정제 등 통합공정 구축
-바이오콤비나트를 통한 3종 이상의 바이오화학제품 생산 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 77,925백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	77,925	77,869	44	12	-
국 비	26,494	26,494	-	-	-
도 비	3,000	3,000	-	-	-
시 비	3,536	3,480	44	12	-
민간자본	44,895	44,895	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ GS칼텍스 개발제품인 2·3부탄디올 생산 및 판로 개척

○ 지속적인 연구 및 타 기업과의 협업을 통한 화장품 시장 외 농업기술(바이오 살충제, 바이오 비료 등) 및 식료품 등 2·3부탄디올 활용 분야 확장 중

□ 향후계획

○ 임대차계약 만료(2024. 9. 30.)에 따른 임대료 대납 및 지원 종료

사업명

제조분야 친환경관리 인프라 구축사업

담당자

산업혁신과 박진식(☎454-2752)

□ 사업목적 및 필요성

○ (목적) 융복합 기술기반 미래형 상용 모빌리티 분야 시험평가지원 센터 구축을 통한 성능평가 및 안전관리통합지원(기업 컨설팅 및 시설개선 등)

○ (필요성) 투자 여력 및 안전관리 역량이 부족한 지역 중소·중견기업을 대상으로 EV소재부품 성능평가 지원 및 환경 규제 등 안전관리 통합지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 06. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 전라북도 군산시 오식도동 1081

○ 규 모 : OPEN LAB 구축(연면적 : 약 1,942㎡/2층, 위치 : 새만금산단 연구시설용지)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  11,845백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	11,845	2,786	1,261	5,783	2,015
국 비	5,535	1,786	1,181	553	2,015
시 도 비	1,200	-	-	1,200	-
시군구비	2,800	-	-	2,800	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	2,310	1,000	80	1,230	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  83 %)

○ 친환경관리 인프라 구축사업 공모(산업부)	: ‘21. 4.

○ 제조분야 친환경관리 인프라 구축사업 공모 선정         : ‘21. 6.

○ OPEN LAB 기업지원센터 설계용역 완료	: ‘22. 10.

○ OPEN LAB 성능평가 지원(총9건, 3개 기업)            : ‘22. 4. ~ 12.

- CCTV 야간 해상력, 알루미늄 화학성분 검사 등

○ 안전관리 모니터링시스템 개발, 보급(총3건, 3개 기업)   : ‘22. 4. ~ 12.

- 화학유해물질 유출감지 센서 개발 및 보급(참여사 : 벤투스, 필텍, 유제이)

□ 향후계획

○ OPEN LAB 기업지원센터(건축) 준공 완료              : ‘24. 07.

○ 지원인력 센터 입주 및 장비활용서비스(지원사업)        : ‘24. 08 ~

○ 성능평가 및 안전관리통합지원(계속)                    :‘24. 08 ~

사업명

농공단지 에너지관리시스템 기술도입모델사업

담당자

산업혁신과 박진식(☎454-2752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지 절감 및 에너지 효율 증대를 통해 탄소배출 절감 및 녹색성장 실현

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 11. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 서수농공단지 일원

○ 규 모 : FEMS, 에너지 통합관리시스템 및 분산전원(태양광 발전장치) 구축

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,450백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	2,450	-	-	2,450	-
국 비	1,715	-	-	1,715	-
시 도 비	220	-	-	220	-
시군구비	515	-	-	515	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 농공단지 입주기업체 공모사업 설명 및 의견청취   : `23.  5.

○ 공모사업 신청 및 선정                     : `23.  6. ~  8.

○ 세부계획 확정 및 참여 희망업체 접수 완료  : `23. 10. ~ 11.

□ 향후계획

○ FEMS 설비 및 분산전원 구축	: `24. 08. ~ 12.

○ 사후 유지관리 업체 선정	: `24. 11.

○ 최종사업 보고서 제출	: `24. 12.

○ FEMS 인프라 구축 등에 관한 협약 체결(군산시, 디이시스)    : `24. 2.

○ 농공단지형 에너지 관리시스템 기술도입 사업 일상감사  : `24. 5.

○ 보조금 교부결정 및 알림                                 : `24. 6

사업명

미래형 상용모빌리티 소부장 지원센터 구축사업

담당자

산업혁신과 박진식(☎454-2752)

□ 사업목적 및 필요성

○ 소재‧부품‧장비의 성능평가 및 시험인증 등을 위한 기업지원센터 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산 국가‧2국가산업단지 일원

○ 규 모 : EV 전장부품 성능평가 지원 장비구축 및 스마트 제조공정기술 인력양성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  19,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2024년 이후
계	19,600	-	4,750	4,870	9,980
국 비	13,700	-	4,500	3,000	6,200
시 도 비	4,900	-	0	1,620	3,280
시군구비	0
지 방 채	0
민간자본	0
기 타	1,000	-	250	250	500

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 주관기관(민간) 공모(산단공) 및 선정(군산대)          : `23. 1. ~ 4.

○ 세부계획 확정 및 협약체결(산단공 ↔ 군산대)       : `23. 5.

○ 기업지원사업* 설명회 개최                        : `23. 8.

* OPEN-LAB 프로젝트, 전장품 성능평가, ONE-POINT 멘토링, 혁신제품 사업화

○ MOU 협약체결(자동차 융합기술원 외 4개소)        : `23. 9. ~ 10.

○ 기술세미나 개최(미래형 상용모빌리티)            : `23. 10.

○ 시험장비(11종) 및 3D 프린터 구축               : `23. 10 ~ 12.

□ 향후계획

○ 기업 컨설팅, 제작 지원 시행(48건)                : `24.  2. ~ 6.

○ 각종 시험장비 구축                          : `24.  5. ~ 6.

○ 지원센터 및 장비 구축	: `24. 11.

○ 세미나 추진	: `24. 12.

사업명

에너지인력양성사업

(초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터)

담당자

새만금에너지과

유현희(☎454-4414)

□ 사업목적 및 필요성

○ 초대용량 풍력발전시스템 개발을 위한 선도기술 지식 및 산‧학 컨소시움 기반 교육 프로그램 개발을 통한 글로벌 최정상급 인재 양성

○ 초대용량 풍력발전시스템 핵심분야별 초격차 유지 및 기술 격차 해소를 위하여 국내 최우수 대학연구실과 대표기업들이 공생하는 산‧학 협력 R&D 프로그램 개발을 통한 미래 기술 도출 및 추진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 4. 1. ~ 2028. 12. 31.

○ 위 치 : 군산대학교 새만금캠퍼스(신재생에너지특성화관)

○ 규 모 : 초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터 운영 1식

- (교육) 초대용량 풍력발전시스템 다양성‧전문성‧입체성 있는 교육 체계 구축

- (R&D) 국내 기술 경쟁력 강화를 위한 초대용량 풍력발전시스템 관련 5개 핵심부품 분야, 9개 핵심기술을 대학과 참여기업이 함께 개발 및 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,372백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,372	0	1,319	1,229	5,824
국 비	5,780	0	1,000	780	4,000
시 도 비	100	0	0	20	80
시군구비	100	0	0	20	80
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	2,392	0	319	409	1,664
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도)

○ 혁신연구센터 1단계 사업 추진	: `22. 4.~`23. 3.

	1단계 사업개요
□ 기 간 : 2022. 4. ~ 2023. 3. (12개월) □ 사 업 비 : 1.5억원(국비 1, 민간 0.5) □ 주 관 : 군산대학교 *참여기관(부산대학교) *참여기업(㈜KTE) □ 사업내용 : 초대용량 풍력시스템 관련 원천기술 확보 및 석‧박사급 인력양성을 위한 혁신연구센터구축 기획

○ 2단계 추진을 위한 관계기관 협의	: `23. 3.

-  [전라북도, 군산시] 행・재정적 지원     [기업] 인력 지원 및 참여, 재정적 지원

○  2단계 사업 선정 및 사업 추진	: `23. 5.

-  초대용량 풍력발전시스템 혁신연구센터 설립 및 R&D/교육 프로그램 시스템 구축

□ 성과[2023] 석박사 배출 8명, 수혜학생 34명, SCIE논문 4건, 인증제도 6개, 특허출원 3건

□ 향후계획

○  초대용량풍력발전시스템 혁신연구센터 운영	: ~ `28. 12.

□ 계획 [2024] 석박사(10), 수혜학생(25), SCIE논문(6), 인증제도(6), 특허출원/등록(2/1)

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구기반 구축사업

담당자

새만금에너지과

신소정(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 미래‧친환경 에너지를 한 곳에서 종합적으로 실증할 수 있는 인프라 구축 및 실증 R&D를 통해 재생에너지 산업경쟁력 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.(6년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연 7-3 및 공유수면

○ 규 모 : 국가종합실증연구단지(50,000㎡) 및 통합관제센터(5,258㎡) 구축, 신재생에너지 발전시설 및 실증설비 구축, 통합실증 R&D 지원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 171,960백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	171,960	79,430	33,809	32,592	26,129
국 비	64,710	28,700	11,419	6,692	17,899
시 도 비	14,950	2,615	5,650	5,110	1,575
시군구비	14,950	2,615	5,650	5,110	1,575
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	77,350	45,500	11,090	15,680	5,080
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 14%)

○ 입주계약 체결 완료	: 2022. 12.

○ 통합관제센터 설계 완료	: 2023. 1. ~ 8.

○ 연약지반 개량공사 착수	: 2023. 9.

□ 향후계획

○ 단지 인프라 조성 및 통합관제센터 구축 착공	: 2024. ~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

해상풍력 산업지원센터 구축사업

담당자

새만금에너지과

이고은(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 해상풍력 보급 확대 및 산업 활성화를 위한 단지 조성 지원, 수용성 제고 및 전문인력 양성 등의 종합지원 센터 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024.(5년)

○ 위 치 : 새만금 산업연구용지 2공구 연 7-11

○ 규 모 : 부지 14,000㎡, 연면적 8,351㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 47,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	47,700	19,160	16,440	12,100
국 비	21,600	7,400	8,200	6,000	-
시 도 비	13,050	5,880	4,120	3,050	-
시군구비	13,050	5,880	4,120	3,050	-
지 방 채	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 센터 설계 추진 중	: 2022. 6. ~

○ 입주계약 체결 완료	: 2022. 8.

○ 지방비 추가확보(추정공사비 증가에 따른 지방비 확보 필요) : 2023. 12.

□ 향후계획

○ 센터 설계 완료	: 2024.

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

군산시 수소충전소 구축사업

담당자

새만금에너지과

신소정(☎454-4413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 재생에너지 디지털트윈 및 친환경교통 실증연구기반 구축사업과 연계하여 그린수소 충전 인프라 및 친환경 교통 시스템 구축

○ 수소차 보급 기반 마련 및 이용자 편익 증대를 통한 수소 경제 생태계 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2025.

○ 위 치 : 미정

○ 규 모 : 미정(설계 후 확정)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,000	0	6,000	0	0
국 비	6,000	0	6,000	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	0	0	0	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 사업계획 수립	: 2023. 10.

○ 구축 위·수탁 업무협약 체결	: 2023. 12.

□ 향후계획

○ 충전소 구축 부지 및 위탁기관 선정	: 2024. 下

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

해상풍력 단지개발 지원사업

담당자

새만금에너지과

이영주(☎454-4412)

□ 사업목적 및 필요성

○ 공공주도 대규모 해상풍력 단지개발 사업을 통한 재생에너지 확대 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : ‘22. 5. ~ ’24. 12

○ 위 치 : 군산시 해역

○ 규 모 : GW급 발전단지 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,800	1,620	1,690	1,490	-
국 비	2,400	800	800	800	-
시 도 비
시군구비	2,400	820	890	690	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 전북테크노파크(참여기관) 사전타당성 검증(해양환경조사)   : ‘23. 3. ~ 6.

○ 전북테크노파크(참여기관) 사전타당성 검증(전파영향평가)   : ‘23. 6. ~

○ 군산시 해상풍력 민관협의회 구성 및 운영              : ‘23. 6. ~

○ 주민수용성 확보 및 이해관계자 역량강화 용역          : ‘23. 12. ~

□ 향후계획

○ 군산시 해상풍력 기본설계 및 계획 수립                : ‘24. 12.

○ 군산시 해상풍력 집적화단지 지정 신청 및 사업자 공모(입찰) : ‘25. ~

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

2023년 신재생에너지 융복합지원사업

담당자

새만금에너지과

최성진(☎454-4422)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주민 대상 신재생에너지 보급을 통한 에너지복지 실현 및 인식제고 등 주민수용성 확보

○ 친환경 에너지의 안정적 공급 및 전환을 통한 에너지 자립도시 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023.2.13.~2024.2.22.

○ 위 치 : 군산시 서남부권(옥구, 옥서, 옥산, 대야, 회현, 개정)

○ 규 모 : 신재생에너지보급 331가구(태양광 309, 태양열 9, 지열 13)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  2,953백만원(국1,428  시 1,007  자부담 518)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,953	-	1,787	1,166	-
국 비	1,428	-	1,039	389	-
시 도 비		-			-
시군구비	1,007	-	748	259	-
지 방 채		-			-
민간자본	518	-		518	-
기 타		-			-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100  %)

○ 2024.2 준공검사 및 준공금 지급 완료

□ 향후계획

○ 보급사업 대상자 사후관리 철저

○ 신규 보급사업 대상지 발굴

□ 사업변경 내역

○ 사업비

구분	당초	변경	증감
계(백만원)	3,112	2,953	△159
국	1,485	1,428	△57
시	1,068	1,007	△61
자부담	559	518	△41

○ 사업량

구분	당초	변경	증감
계(	333	331	△2
태양광	310	309	△1
태양열	10	9	△1
지 열	13	13

사업명

광역해양레저체험 복합단지 조성사업

담당자

항만해양과 김하늘(☎454-2813)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도의 다양한 해양자원을 활용한 통합 관광인프라 조성

○ 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2025년

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 산65번지 일원

○ 규 모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 39,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	39,800	24,630	7,590	7,580	-
국 비	19,345	8,760	3,795	3,790	-
시 도 비	5,532	3,228	1,138.5	1,165.5	-
시군구비	14,923	9,642	2,656.5	2,624.5	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 소규모환경영향평가 협의 완료(환경부)                   : `22. 4.

○ 환경영향평가(환경부) 및 중토위 등 관계기관 협의 완료   : `22. 5.

○ 새만금개발 통합심의위원회 안건심의(새만금개발청)        : `22. 7.

○ 해양관광 SOC사업 시행계획 승인(전라북도)              : `22. 10.

○ 새만금 용도별 통합개발계획 승인, 고시(새만금개발청)     : `22. 12.

○ 본단지 공사 발주 의뢰 및 입찰공고                      : `23. 1.~6.

○ 본단지 공사 개찰 및 적격심사                            : `23. 7.

○ 본단지 공사 착공                                        : ‘23. 8.

□ 향후계획

○ 전기, 소방, 통신공사 착공 및 감리단 선정                    : ‘24. 6.

○ 공사 준공 및 (시범)운영 : ’25. 4.

□ 사업변경 내역

○ 사업규모 : (당초) 부지면적 64,771㎡  (변경) 부지면적 64,365㎡

○ 사업기간 : (당초) 2019 ~ 2023년     (변경) 2019 ~ 2025년

사업명

말도~방축도 인도교 개설사업

담당자

항만해양과 윤용묵(☎454-2932)

□ 사업목적 및 필요성

○ 인도교와 말도리 도서의 지역자원경관을 연계한 명품트레킹 코스개발       하여 관광활성화로 지역소득증대 및 군산시 이미지 제고

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016~2024

○ 위 치 : 군산시 옥도면 말도리 말도, 명도, 방축도 일원

○ 규 모 : 인도교 4개소 L=1,345.5m, B=2∼2.5m

- 제1교 L=308m, 제2교 L=410m, 제3교 L=544.5m, 제4교 L=83m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 33,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	33,970	30,325	145	3,500	-
국 비	24,260	24,260			-
시 도 비	3,032.5	3,032.5			-
시군구비	6,677.5	3,032.5	145	3,500	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 공사 착공 및 건설사업관리 용역 착수                    : 2017. 12.

○ 제4교(광대도~방축도) 완료                               : 2018. 11.

○ 제1교(말도~보농도), 2교(보농도~명도) 완료                : 2022. 10.

○ 제3교(명도~광대도) 공사 착공                            : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 제3교(명도~광대도) 공사 완료                            : 2024. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

어촌정주어항(무녀1구) 건설

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 쇠퇴하는 어촌지역의 어항기반시설 확충으로 소득증대 및 정주여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017. ~ 2024. (8개년)

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 무녀1구항 일원

○ 규 모 : 어촌정주어항 개발 A=12,307㎡

- 준설(9,908㎡), 매립(7,633㎡), 물양장 88m, 호안 162m, 부잔교 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,500	8,100	1,400	0	0
국 비	0	-	-	-	-
시 도 비	7,600	6,480	1,120	-	-
시군구비	1,900	1,620	280	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 공유수면 매립 기본계획 반영(8,940㎡) 확정(해수부)    : ‘17. 5.

○ 무녀1구항 공유수면 매립면허(7,633㎡) 승인            : ‘19. 10.

○ 무녀1구 정주어항 개발공사 착공                       : ‘18. 11.

○ 무녀1구 정주어항 개발공사(4차분) 준공                : ‘23. 3.

□ 향후계획

○ 무녀1구 정주어항 준설공사 준공                       : ‘24. 6.

○ 무녀1구 부잔교 및 도교 설치공사 준공                 : ‘24. 9.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

온리원 고군산 관광벨트 조성사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 급변하는 고군산지역에 중앙 다부처의 협약을 통한 동시 사업투자로

지역의 특화된 도서관광 벨트화 조성 및 지역 균형발전 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 6. ~ 2024. 11.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 고군산 일원

○ 규 모 : 어항개발, 도로정비, 차도선, 자율주행버스, 특산물 판매부스 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 18,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	18,200	18,200	0	0	0
국 비	9,100	9,100	-	-	-
시 도 비	2,730	2,730	-	-	-
시군구비	6,370	6,370	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 신시도 노후 연결도로 정비공사 완료                   : `21. 11.

○ 장자도 차도선 선착장 및 부대시설 완료                : `22. 6.

○ 특산품 판매장 건축공사 완료                          : `22. 12.

○ 신시도항 및 방파제 조성 완료                         : `23. 7.

□ 향후계획

○ 자율주행버스 관련기관 협의                           : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

선유1구항 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유1구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,907백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,907	3,907	0	0	0
국 비	2,735	2,735	-	-	-
시 도 비	352	352	-	-	-
시군구비	820	820	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 생활SOC사업 공사 추진                               : `21. 8.

○ 공통사업 준공                                        : `23. 1.

□ 향후계획

○ 특화사업 준공                                        : `24. 6.

○ S/W사업 및 뉴딜사업 준공                            : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

장자도 장자어화 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,441백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,441	14,441	0	0	0
국 비	10,109	10,109	-	-	-
시 도 비	1,300	1,300	-	-	-
시군구비	3,032	3,032	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 생활SOC사업 공사 추진                               : `21. 8.

○ 공통사업 준공                                        : `23. 12.

□ 향후계획

○ 특화사업 준공                                        : `24. 12.

○ S/W사업 및 뉴딜사업 준공                            : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

노을과 가락의 섬 비안도 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 비안도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 12,173백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	12,173	12,173	0	0	0
국 비	8,521	8,521	-	-	-
시 도 비	1,095	1,095	-	-	-
시군구비	2,557	2,557	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 1.

○ 토목분야 공사 추진                                   : `22. 3.

○ 특화사업 착공                                        : `22. 10.

□ 향후계획

○ 특화사업 준공                                        : `24. 6.

○ 토목분야 공사 준공                                   : `24. 12.

○ S/W사업 및 뉴딜사업 준공                            : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

두리도항 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 두리도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,300백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,300	3,780	2,520	0	0
국 비	4,410	2,646	1,764	-	-
시 도 비	567	340	227	-	-
시군구비	1,323	794	529	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 기본 및 실시설계 용역 착수                           : `21. 7.

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `22. 7.

○ 시행계획 수립, 특화사업 공사 추진                    : `23. 8.

□ 향후계획

○ 공통사업 공사 완료                                   : `24. 6.

○ 특화사업 및 S/W사업 준공                            : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

서래포구 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 서래포구 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,460백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,460	6,276	4,184	0	0
국 비	7,323	4,394	2,929	-	-
시 도 비	942	565	377	-	-
시군구비	2,195	1,317	878	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `21. 12.

○ 생활환경SOC사업 공사 착공                           : `22. 9.

○ 특화사업 세부설계용역 착수                           : `22. 10.

○ 공통사업 공사 완료                                   : `23. 12.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립, 특화사업 공사 착공                    : `24. 10.

○ 특화사업 및 S/W사업 준공                           : `25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

야미도항 어촌뉴딜300사업

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 낙후된 어촌 및 어항기반시설의 현대화 및 안전한 어업활동 지원

○ 어촌지역의 주민 주도 사업 추진 통한 소득증대 및 정주여건 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 야미도항 일원

○ 규 모 : 어항시설 및 주민소득 기반시설조성, 주민역량강화사업 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,630백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,630	1,595	3,827	5,208	0
국 비	7,441	1,116	2,679	3,646	-
시 도 비	957	144	344	469	-
시군구비	2,232	335	804	1,093	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본계획 승인 및 고시                                : `22. 11.

○ 토목분야 설계용역 착수                               : `23. 3.

○ 건축분야 설계용역 착수                               : `23. 4.

□ 향후계획

○ 시행계획 수립, 토목공사 착공                          : `24. 12.

○ 건축공사 착공                                        : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌신활력증진사업

(무녀도,신시도,야미도)

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역 전체 57.9% 소멸위험지역 차지. 낮은 소득과 한정된 일자리‧생활 서비스 부족 등 열악한 정주여건으로 인구유출 심화

○ 300개 어촌 대상 어촌주민을 위한 경제‧교육‧문화‧의료 일자리 등 경제‧생활 플랫폼‧안전 인프라 전반 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도, 신시도, 야미도 일원

○ 규 모 : 앵커조직, 임대주택, 어촌스테이션 등 어촌생활여건 개선 및

일자리 창출 지원(생활플랫폼 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	0	1,000	1,000	8,000
국 비	7,000	-	700	700	5,600
시 도 비	900	-	90	90	720
시군구비	2,100	-	210	210	1,680
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 신규사업 공모 선정                                   : `23. 1.

○ 앵커조직 위·수탁 협약체결                            : `23. 8.

○ 기본계획 수립용역 발주 및 계약절차 이행              : `23. 11.

□ 향후계획

○ 기본계획 수립용역 착수                               : `24. 4.

○ 기본계획 수립 및 공기관대행 위탁협약 체결            : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌신활력증진사업

(선유도,장자도,대장도,관리도)

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역 전체 57.9% 소멸위험지역 차지. 낮은 소득과 한정된 일자리‧생활 서비스 부족 등 열악한 정주여건으로 인구유출 심화

○ 300개 어촌 대상 어촌주민을 위한 경제‧교육‧문화‧의료 일자리 등 경제‧생활 플랫폼‧안전 인프라 전반 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2026. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도, 신시도, 야미도 일원

○ 규 모 : 앵커조직, 임대주택, 어촌스테이션 등 어촌생활여건 개선 및

일자리 창출 지원(생활플랫폼 조성)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	0	1,000	1,000	8,000
국 비	7,000	-	700	700	5,600
시 도 비	900	-	90	90	720
시군구비	2,100	-	210	210	1,680
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 신규사업 공모 선정                                   : `23. 1.

○ 앵커조직 위·수탁 협약체결                            : `23. 8.

○ 기본계획 수립용역 발주 및 계약절차 이행              : `23. 11.

□ 향후계획

○ 기본계획 수립용역 착수                               : `24. 4.

○ 기본계획 수립 및 공기관대행 위탁협약 체결            : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

어촌신활력증진사업

(유형3-관리도항)

담당자

항만해양과 이우석(☎454-4782)

□ 사업목적 및 필요성

○ 어촌지역 전체 57.9% 소멸위험지역 차지. 낮은 소득과 한정된 일자리‧생활 서비스 부족 등 열악한 정주여건으로 인구유출 심화

○ 300개 어촌 대상 어촌주민을 위한 경제‧교육‧문화‧의료 일자리 등 경제‧생활 플랫폼‧안전 인프라 전반 지원

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥도면 관리도리 일원

○ 규 모 : 방파제 연장, 등산로 및 도로 정비, 녹지 조성 등(안전인프라 개선)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,000	0	650	1,449	2,901
국 비	3,500	-	455	1,015	2,030
시 도 비	450	-	59	130	261
시군구비	1,050	-	136	304	610
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	0	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 신규사업 공모 선정                                   : `23. 1.

○ 기본계획 및 시행계획 용역 착수                       : `23. 10.

○ 기본계획 자문 및 심의(해수부)                         : `23. 12.

□ 향후계획

○ 기본계획 수립                                        : `24. 2.

○ 시행계획 수립 토목공사 착공                          : `24. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

새만금 수산식품 수출가공 종합단지해수 인·배수 기반 조성사업

담당자

수산식품정책과 공길후

(☎454-3033)

□ 사업목적 및 필요성

○ 새만금 수산식품 수출가공단지의 성공적 유치 및 조기 활성화를 위한 필수 기반 시설인 해수 인·배수시설 설치가 필요

○ 단지내 해수공급으로 다양한 마른김 공장, 원물(해수어종) 세척 및 시제품 개발 등 해수어 신선가공을 통한 다양한 수출품목확대 및 품질향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2026년 (4년)

○ 위 치 : 새만금 국가산업단지 제2공구 산46번지 일원

○ 규 모 : 새만금 수산식품 수출가공 종합단지 조성 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,415백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,415	-	245	5,610	3,560
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,700	-	-	1,683	1,068
시군구비	6,715	-	245	3,927	2,492
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 일반해역이용협의 완료

○ 공유수면 점사용허가 및 실시계획 승인 완료

○ 기본 및 실시설계용역 추진 중

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 준공 : 2024. 12.

○ 공사 착공 및 추진: 2024. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : (당초) 2022(9월) ~ 2023년 → (변경) 2023 ~ 2026년

사업명

새만금 스마트 수산가공종합단지 조성사업

담당자

수산식품정책과 김지완

(☎454-3032)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전북 수산식품산업의 영세성 극복과 글로벌 식품산업의 급성장 추세 대응 위해 R&D 기반, 수산가공 종합단지 조성으로 미래수산식품 신산업 대응

○ 새만금사업으로 위축된 수산업 활성화를 위해 새만금과 수산업의 상생 협력 수산식품 신산업 개발필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026년 (5년)

○ 위 치 : 새만금 국가산업단지 제2공구 산46번지 일원

○ 규 모 : 수산식품 R&D 및 협력지원센터, 스마트아파트형 가공공장 조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 43,339백만원 (*부지매입비 50억원 포함)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	43,339	0	6,015	2,133	35,191
국 비	26,837	-	711	1,493	24,634
시 도 비	3,451	-	91	192	3,167
시군구비	13,051	-	5,213	448	7,390
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)

○ 기본 및 실시설계용역 추진 중(실시설계 중) : 23.8.~

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 준공 : 24. 11.

○ 시공단계 건설사업관리용역 착수 : 24. 12.

○ 25년 공사착공 및 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : (당초) 2022 ~ 2025년 → (변경) 2022 ~ 2026년

사업명

해양수산 복합공간 조성

담당자

수산식품정책과

한태우(☎454-5732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 수산물 종합센터 신축 추진으로 수산물 판매, 유통, 업무지원이 가능한       복합공간을 확보하여 서해안 대표 수산시장으로 도약

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2023년

○ 위 치 : 군산시 해망동 내항2길 216, 수산물종합센터 일원

○ 규 모 : 부지 11,412㎡, 연면적 3,999.05㎡ (3층)

- 세부시설 : 1층 75개 점포(판매장 3평), 2층 12개 점포(식당 20평),

3층(사무실, 회의실), 주차장, 휴게공간 등 조성

구 분	면 적	용 도
본관동 1층	1,752.48㎡(약 531평)	활어·선어 도소매 직판장(75), 휴게실, 재활용실 등
본관동 2층	1,395.07㎡(약 423평)	수산물 식당(12), 실외기실, 야외데크
본관동 3층	811.5㎡(약 246평)	상인회사무실, 회의실, 기계실, 전기실 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,558백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,558	11,906	2,652	-	-
국 도 비	6,391	6,391	-	-	-
특 교 세	500	500
시군구비	7,667	5,015	2,652	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 수산물 종합센터 시공감리업체 계약 및 착공                   : ‘20.5.

○ 수산물 종합센터 1차분 공사 준공                             : ‘22.7.

○ 수산물 종합센터 2차분 공사 착공                             : ‘22.9.

○ 수산물 종합센터 준공(개장 : ‘23.5.)                          : ‘23.5.

□ 향후계획

○ 해당사항 없음

사업명

진포예술제

담당자

문화예술과 윤덕환

(☎454-3282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 다양한 예술문화 향유기회 제공으로 시민 정서 함양

○ 지역예술문화 창달 및 예술문화의 미래상 제시

○ 시민과 함께하는 문화예술을 통한 저변확대 및 예술문화 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2020 ∼ 2024(5년)

○ 위    치 : 군산예술의 전당 및 은파호수공원 일원

○ 사업내용 : 군산예총과 10개협회가 개최하는 순수예술 문화행사

○ 지원형태 : 보조금 지원

○ 보조사업자 : 군산예총

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 890백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	890	203	123	122	442
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	890	203	123	122	442
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 2023년 진포예술제 개최                         : 2023. 5. 9. ~ 5. 12.

- 개막공연 등 무대공연, 영화상영, 전시 행사 등

□ 향후계획

○ 2024년 진포예술제 개최                         : 2024. 5.

- 개막공연 등 무대공연, 영화상영, 전시 행사 등

사업명

희망콘서트 개최

담당자

문화예술과 윤덕환

(☎454-3282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중년 세대에게는 옛 추억을 불러일으키고 젊은 세대에게는 부모 세대가 즐겨 부르던 음악을 감상할 수 있는 기회를 제공함으로써 세대 간 문화적 공감과 화합의 시간 제공다양한 예술문화 향유기회 제공으로 시민 정서 함양

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 군산대학교 아카데미 홀

○ 사업내용 : 지역예술팀 및 대중가수 공연

○ 지원형태 : 군산시 직접수행

○ 보조사업자 : 군산시 직접수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 97백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	97	0	97	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	97	0	97	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 희망콘서트 개최                                  : 2023. 12. 23.

- 안치환, 노사연, 김현정, 지역예술팀 2팀 공연

사업명

KBS 가요무대 개최

담당자

문화예술과 윤덕환

(☎454-3282)

□ 사업목적 및 필요성

○ 중앙(서울) 중심의 문화향유에서 지역의 문화콘텐츠를 개발하여 문화격차의 해소 및 문화균형발전 도모

○ 방송 제작 송출로 인한 지역 관광 홍보효과

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 1. ~ 12.

○ 위    치 : 군산시 월명체육관

○ 사업내용 : 새만금 잼버리 성공기원 KBS 가요무대 녹화

○ 지원형태 : 군산시 직접수행

○ 보조사업자 : 군산시 직접수행

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 398백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	398	0	398	0	0
국 비	0	0	0	0	0
시 도 비	0	0	0	0	0
시군구비	398	0	398	0	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	0	0	0	0	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ KBS 가요무대 녹화                                 : 2023. 6. 8.

○ 방송 송출                                         : 2023. 7. 24.

사업명

군산 선교역사관 건립사업

담당자

문화예술과 김상원

(☎454-4172)

□ 사업목적 및 필요성

○ 단순한 종교의 전파가 아닌, 교육‧의료‧항쟁 등 근대사 전반에 영향을 준       선교역사를 기념하고 지역사 복원을 통한 시민 자긍심 고취

○ 근대개항 및 선교역사 재조명을 통한 신규 문화‧관광 콘텐츠 확충

□ 사업개요

○ 기    간 : 2022. ~ 2024.(3년)

○ 위    치 : 군산시 구암동 334번지 등 시유지

- (선교역사관) 군산시 구암동 334번지(3.1운동 역사영상관 옆)

- (선교기념탑) 군산시 구암동 601-42번지(서래교 인근 근린공원 내)

○ 사업내용 : 선교역사관 및 선교기념탑 건립

- (선교역사관) 1개동, 3층 건축물(전시공간, 교육공간, 부대공간 등)

- (선교기념탑) 높이 7m정도 (최대높이 12m) 계단형 조형물 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,080백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,080		353	3,297	2,430
국 비	1,824		105.9	989.1	729
시 도 비	912		53	494.6	364.5
시군구비	2,128		123.6	1154	850.5
지 방 채
민간자본	1,216		70.6	659.4	486
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)

○ 선교역사관 건립사업 기본설계용역 보고회                 : 2023. 3.

○ 선교역사관 건립사업 실시설계용역 보고회                 : 2023. 9.

○ 전북도 일상감사 의뢰                                    : 2023. 10.

○ 공사 발주 및 착공                                       : 2023. 12.

□ 향후계획

○ 선교역사관 전시설계용역 발주                           : 2024. 7.

○ 선교기념탑 준공                                        : 2024. 9.

○ 선교역사관 개관                                        : 2025. 3.

사업명

군산문화재야행

담당자

문화예술과 김영신

(☎454-3923)

□ 사업목적 및 필요성

○ 근대문화유산을 활용한 특색있는 야간형 문화향유 프로그램 개발

○ 다양한 문화콘텐츠 개발 및 볼거리 제공을 통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. 8. 10. ~ 8. 12. 18:00~22:00

○ 위    치 : 군산내항역사문화공간 및 원도심 일원

○ 사업내용 : 8야(夜)테마, 탐방‧전시‧공연‧체험 프로그램 운영

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,750백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,750	545	420	585	1,200
국 비	1,092	210	168	234	480
시 도 비	491.4	94.5	75.6	105.3	216
시군구비	1,166.6	240.5	176.4	245.7	504
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○  기본계획 수립                         : 2023. 2.

○  대행사 선정                           : 2023. 5.

○  행사 준비 및 홍보                     : 2023. 5. ~ 7.

○  문화재야행 행사 추진                  : 2023. 8.

□ 향후계획

○  기본계획 수립                         : 2024. 2.

○  대행사 선정                           : 2024. 5.

○  행사 준비 및 홍보                     : 2024. 5. ~ 7.

사업명

상주사 불교문화체험관 건립

담당자

문화예술과 최세연

(☎454-3273)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전통문화(명상‧다도) 체험을 통한 지역 관광 활성화 도모 및 지역문화 거점 육성

○ 불교문화 체험과 문화유산 교육의 장으로 종교문화 인프라 구축

□ 사업개요

○ 기    간 : 2023. ~ 2024.(2년)

○ 위    치 : 군산시 서수면 축동리 544번지 외 4필지

○ 사업내용 : 지상1층, 2개동(연면적 333.72㎡)

- 불교문화체험관 199.80㎡, 사찰음식체험관 133.92㎡

○ 사업유형 : 민간자본보조사업

○ 시행‧운영주체 : 대한불교조계종 상주사

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,000	0	340	2,600	0
국 비	900	0	102	798	0
시 도 비	540	0	61	479	0
시군구비	1,260	0	143	1,117	0
지 방 채	0	0	0	0	0
민간자본	300	0	34	266	0
기 타	0	0	0	0	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 지방재정투자심사 심의 완료                         : 2023. 3.

○ 제2차 추가경정예산 사업예산 반영                   : 2023. 6.

○ 문화재현상변경 심의위원회                           : 2023. 10.

○ 불교문화체험관 실시설계 용역 실시                   : 2023. 12.

□ 향후계획

○ 불교문화체험관 실시설계 용역 완료                        : 2024. 5.

○ 불교문화체험관 공사 착공                                 : 2024. 7.

○ 불교문화체험관 공사 준공                                 : 2024. 12.

사업명

제2차 대표관광지 육성사업

담당자

관광진흥과 이영교

(☎454-3332)

□ 사업목적 및 필요성

○ 1시군 1대표관광지 육성 실현을 위한 도내 지역별 차별화된 콘텐츠 개발

○ 원도심 일원 근대문화유산 활용 문화관광 중심도시 이미지 강화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2024. (5년)

○ 위 치 : 군산 시간여행마을 일원

○ 규 모 : 기반사업 3, 진흥사업 8

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,700백만원(도비 4,700 / 시비 2,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,700	2,400	1,000	3,300	-
도 비	4,700	2,400	1,000	1,300	-
시 비	2,000			2,000	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ (기반사업) 트래블라운지 조성 추진중

○ (진흥사업) 시간여행마을 및 축제 활성화를 위한 상설공연, 도시홍보 등 추진

□ 향후계획

○ 트래블라운지 조성사업 준공

○ 시간여행마을 활성화를 위한 상설공연, 도시홍보, 축제프로그램, 블로그공모전 등 추진

사업명

군산시간여행축제

담당자

관광진흥과 서예지 (☎454-3302)

□ 사업목적 및 필요성

○ 일제 강점기 민중의 항거와 치열한 삶의 역사를 공유하고 새기는

근대 군산으로의 시간여행을 통해 군산의 정체성을 발견

○ 지역 공동체의 화합과 연대를 이끌어 내며, 근대 군산을 중심으로 시간여행을       축제를 통해 즐기고 체험하며 지역 공동체의 새희망을 만들어내는 대동놀이

□ 사업개요

○ 기 간 : 2013 ~ 계속

○ 위 치 : 군산 시간여행마을 일원

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,343백만원(국비 20/도비 620/시비 7,702)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,342	5,640	881	911	911
국 비	20	20
도 비	620	410	70	70	70
시 비	7,702	5,210	810	841	841

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 민간 축제추진위 주도 2023 시간여행축제 개최완료

- 시민참여 프로그램 강화 및 거리형 축제 추진

- 지역자원 활용하여 지역 청년 스타트업 및 관내 행사대행사 참여

- 2023 방문객 수 130,647명 / 경제효과 45.8억원

□ 향후계획

○ 2024 군산시간여행축제 개최

사업명

해상인도교 스카이워크 조성

담당자

관광진흥과 김광수(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 천혜의 해상절경을 관망할 수 있는 구)해상인도교를 활용한 구조보강,

경관조명 및 스카이워크 설치로 관광객 체험욕구 충족 및 관광활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2023. (4년)

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자교, 선유교

○ 규 모 : 스카이워크 조성 2개소(각 L=268m, B=3m, 1986년 준공)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	3,000	200	-	-
국 비	-	-	-	-	-
도 비	1,500	1,500	-	-	-
시 비	1,700	1,500	200	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 장자교 스카이워크 조성공사 준공                     : `22. 12.

○ 장자교 스카이워크 경관조명공사 준공                 : `23.  6.

○ 선유교 스카이워크 조성공사 착공                     : `23.  9.

□ 향후계획

○ 선유교 스카이워크 조성공사 준공                     : `24.  8.

□ 사업변경 내역(해당시)

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업비	3,000백만원	3,200백만원	사업비 초과에 따른 시비 추가 반영

사업명

월명산전망대 및 관광객 쉼터 조성사업

담당자

관광진흥과 김광수(☎454-3344)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시간여행마을권역, 서해낙조, 동백대교 등을 조망할 수 있는 전망대 조성

○ 새로운 랜드마크 조성으로 관광 및 지역경제 활성화 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2017년 ~ 2025년

○ 위 치 : 신흥동 26-2번지(평화매점) 일원

○ 규 모 : 전망대 및 트래블라운지(거점형 복합관광안내소) 신축,

진입도로 개설(L=250m, B=9.2m)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 8,000백만원(균특 1,050, 도비 2,450, 시비 4,500)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	8,000	4,893	418	2,689	-
국 비	1,050	1,050	-	-	-
도 비	2,450	1,756	278	416	-
시 비	4,500	2,087	140	2,273	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 월명산전망대 진입로 공사 준공                      : ‘22. 11.

□ 향후계획

○ 행정절차 이행 및 건축설계 완료	: `24.  8.

○ 전망대 건축공사 발주                               : ‘24.  9.

○ 전망대 운영·관리방안 마련 및 공사 준공             : ‘25. 12.

사업명

금강호 국민여가 캠핑장 조성사업

담당자

관광진흥과 송빛나(☎454-3342)

□ 사업목적 및 필요성

○ 이용객의 편의와 수요를 충족하는 금강호 생태와 연계한 휴식공간 조성

○ 국민여가캠핑장 조성을 통한 금강호의 전반적인 개발 및 활성화 유도

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022.∼2024.

○ 위 치 : 군산시 성산면 성덕리 421-15번지 일원 (금강호관광지)

○ 규 모 : 캠핑장 사이트 39면(일반 13, 오토 24, 대형 2), 주차장 21면 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,400	61	26	2,313
시 도 비	900			900
시군구비	1,500	61	26	1,413

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 실시설계용역 추진                                    : `22. 5.~‘23. 9.

○ 공사 발주 절차 이행                                  : `23. 9.~

□ 향후계획

○ 공사 시행	: ~‘24. 8.

□ 사업변경 내역(해당시)

변경사항	당 초	변 경	변경사유
총사업비 사업기간	2,000백만원 2022~2023	2,400백만원 2022~2024	·사업비 초과에 따른 시비 추가반영 ·공사 착공시기 변경에 따른 기간 연장

사업명

비응마파지길 관광명소화 사업

담당자

관광진흥과 김승훈(☎454-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 비응도 및 비응마파지길 야간 경관조명 및 안내유도표지를 보강하여 관광객 유입 증대를 통한 침체되어 있는 비응항 상권 및 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. ∼ 2025.(4개년)

○ 위 치 : 군산시 비응도동 37번지 일원(비응마파지길)

○ 규 모 : 관광안내표지 확충, 스카이워크 설치, 광장 조성, 경관조명 보강,                포토존 및 휴게시설 설치 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,500	78	27	2,145	1,250
국 비	1,500	39	17	1,069	375
시 도 비
시군구비	2,000	39	10	1,076	875

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 비응마파지길 조성(41.5억원, L=1.8km)                 : `16. ~ `19.

○ 지방재정투자심사(자체) 완료                          : `21. 10.

○ 제7차 전북권 관광개발계획 반영                      : `21. 12.

○ 실시설계 용역 착수                                  : `22.  4.

□ 향후계획

○ 공사 시행	: ‘24. 9.~’25. 9.

□ 사업변경 내역(해당시)

변경사항	당 초	변 경	변경사유
사업기간	2022 ~ 2024	2022 ~ 2025	공사 착공 시기 변경에 따른 사업기간 연장

사업명

군산시 선셋드라이브 명소화사업

담당자

관광진흥과 김승훈(☎454-3364)

□ 사업목적 및 필요성

○ 서해를 품은 국도77호선과 주변 관광자원의 유기적 연계를 통한 시너지 창출로 체류형 관광기반을 구축하여 서해안권 광역관광 활성화에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. ∼ 2026.(4개년)

○ 위 치 : 군산시 신흥동 26-2번지 등 3개소

○ 규 모 : 월명산전망대 유니크베뉴 및 랜드마크 아이콘 조성, 비응도 선셋               마켓 및 차박공원 조성, 새만금 어린이랜드 쉼터조성 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,600	0	0	550	6,050
국 비	3,300	0	0	275	3,025
시 도 비
시군구비	3,300	0	0	275	3,025

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 서해안권 종합발전계획(변경) 고시                    : `22.  4.

○ 2023년 해안 및 내륙권 발전사업 신규사업 반영        : `23.  1.

○ 도 지방재정 투자심사 완료                           : `23.  5.

□ 향후계획

○ 기본 및 실시설계용역 착수                           : `24.  2.

○ 공사 시행	: ‘25. 3.~’26. 12.

사업명

소룡동 도시재생뉴딜사업

담당자

도시재생과 최수현 (☎454-3733)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노후 주택 보수로 주변 환경개선과 생동감 넘치는 주거지 조성 기여

○ 부족한 주민편익시설 확충을 통한 주거복지 실현 및 지역공동체 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024(5년)

○ 위 치 : 소룡동 1393-166번지 일원

○ 규 모 : 76,975㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 14,000백만원(도 8,400, 시 5,600)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	14,000	6,098	1,530	3,154	3,218
국 비
시 도 비	8,400	4,607	802	1,893	1,931
시군구비	5,600	1,491	728	1,261	1,287
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 54%)

○ `23.  3월 : 실버커뮤니티센터 착공

○ `23.  4월 : 마을길확장공사 준공, 집수리사업(3차) 시행

○ `23.  6월 : 안전한 보행길 조성공사 실시설계 착수

○ `23.  7월 : 집수리사업(4차) 시행

○ `23.  8월 : 주민역량강화 용역 착수

○ `23.  9월 : 어울림센터 및 광장 조성사업 기본 및 실시설계용역 착수

○ `23. 12월 : 아기자기 소룡길 만들기 조형물 제작, 실버커뮤니티센터 준공

□ 향후계획

○ `24. 8월 : 어울림센터 및 광장 조성사업 기본 및 실시설계용역 완료

○ `24. 9월 : 소형공원 조성공사 착공

○ `24. 11월 : 어울림센터 및 광장 조성공사 착공

□ 사업변경 내역

○ 사업기간 : 당초 2020년 ~ 2023년, 변경 2020년 ~ 2024년

(단위:백만원)

구분	당초 (최종고시)		예산	변경		예산	예산 증감	비고
계	-		14,000	-		14,000	-
변경	H-02. 경관개선사업		584	H-02. 경관개선사업		660	+76
	01	지붕수리 및 집수리	154	01	지붕수리 및 집수리	450	+296
	02	그린파킹 사업	210	02	삭제	-	-210
	03	연립주택 수리지원	210	03	연립주택 수리지원	210	-
	04	집수리 아카데미 교육	10	04	삭제	-	-10
변경	H-03. 공영주차장 조성사업		257	H-03. 공영주차장 조성사업		302	+45
	01	공영주차장 조성	257	01	공영주차장 조성	302	+45
변경	H-04 .정주여건 개선사업		666	H-04. 정주여건 개선사업		907	+241
	01	소형공원 조성	144	01	소형공원 조성	439	+295
	02	나눔 텃밭조성	127	02	나눔 텃밭조성	208	-39
	03	공용빨래방 조성	153	03	삭제	-	-153
	04	골목길 정비사업	122	04	골목길 정비사업	260	+138
변경	C-01 소룡길 만들기		1,696	C-01 소룡길 만들기		2,042	+346
	01	안전한 보행길 조성	475	01	안전한 보행길 조성	316	-159
	02	선형공원 조성	909	02	선형공원 조성	1,557	+648
	03	생활안전마을 만들기	176	03	생활안전마을 만들기	-	-176
	04	아기자기 소룡길 만들기	136	04	아기자기 소룡길 만들기	169	+33
변경	C-02 마을길 확장사업		1,964	C-02 마을길 확장사업		2,011	+47
	01	마을길 확장 1구간	1,286	01	마을길 확장 1구간	1,333	+47
	02	마을길 확장 2구간	678	02	마을길 확장 2구간	678	-
변경	C-03 어울림센터 조성사업		4,541	C-03 어울림센터 조성사업		4,491	-50
	01	어울림센터 조성	4,391	01	어울림센터 조성	4,391	-
	02	이북5도민 음식체험	50	02	삭제	-	-50
	03	왁자지껄 공부방운영	100	03	왁자지껄 공부방운영	100	-
변경	C-04 어울림광장 조성		1,534	C-04 어울림광장 조성		945	-589
변경	C-05 실버커뮤니티센터 조성사업		984	C-05 실버커뮤니티센터 조성사업		984	-
	01	실버커뮤니티센터 조성	954	01	실버커뮤니티센터 조성	954	-
	02	노인교실 운영	30	02	노인교실 운영	30	-
변경	C-06 창업점포 조성사업		538	C-06 창업점포 조성사업		538	-
	01	창업점포 조성	458	01	창업점포 조성	458	-
	02	창업지원 컨설팅	80	02	창업지원 컨설팅	80	-
-	P-01.돌봄전문가 만들기		38	P-01. 돌봄전문가 만들기		38	-
	01	돌봄전문가 육성	8	01	돌봄전문가 육성	8	-
	02	돌봄서비스 지원	30	02	돌봄서비스 지원	30	-
	P-02.주민역량강화사업		400	P-02. 주민역량강화사업		400	-
변경	P-03. 거버넌스 운영		298	P-03. 거버넌스 운영		198	-100
변경	P-04. 도시재생현장 지원센터 운영		400	P-04. 도시재생현장 지원센터 운영		310	-90
변경	P-05. 활성화계획 수립 등		100	P-05. 활성화계획 수립 등		174	+74

사업명

구암동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 김선진(☎454-3732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2024(5년)

○ 위 치 : 군산시 구암동 362-1번지 일원

○ 규 모 : 36,184㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,870백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,870	1,025	868	963
국 비	2,009	835	628	546
시 도 비	258	107	19	132
시군구비	603	83	221	285
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 70%)

○ `23.  5. 구암동 새뜰마을사업 휴먼케어 및 주민역량강화용역(2차분) 착수

○ `23. 11. 구암경로당 증측 및 리모델링 공사 준공

□ 향후계획

○ `24. 상반기 : 연계사업(공공 하수관로 정비공사) 완료

○ `24. 하반기 : 도시가스 인입공사 및 골목길 정비공사 시행
주택정비지원사업(빈집철거, 집수리) 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업기간 : 당초 2020년 ~ 2023년, 변경 2020년 ~ 2024년

사업명	사업계획				비고
	당초		변경
	수량	사업비(백만원)	수량	사업비(백만원)
합계	-	4,106.5	-	2,870	▽1,236.5
생활·위생인프라사업	-	2,371	-	1,697.5	▽673.5
A-1. 태극기가로 조성사업	1식	350	1식	28	▽322
A-2. 골목길 정비사업	1식	323	1식	395.5	△72.5
A-3. 구암동 이야기 만들기	1식	40	1식	40	변경없음
A-4. 두드림센터 조성사업	99㎡	716	-	-	▽716 (삭제)
A-5. 경로당 리모델링사업	102.8㎡	312	192㎡	751	△439
A-6. 도시가스 인입공사	1식	630	1식	483	▽147
안전확보사업	-	160	-	180	△20
A-7. CCTV 설치	5개소	120	5개소	120	변경없음
A-8. 보안등·가로등/제설함 설치	10개소/1개소	40	11개소/1개소	60	△20
주택정비지원사업	-	878	-	405	▽473
B-1. 슬레이트지붕 개량사업	수급자/일반	306	수급자/일반	201	▽105
B-2. 집수리사업	수급자/일반	252	수급자/일반	204	▽48
B-3. 임대주택 조성사업	400㎡	320	-	-	▽320 (삭제)
휴먼케어사업	-	225	-	115	▽110
B-4. 문화프로그램 운영	1식	85	1식	85	변경없음
B-5. 사회적기업 육성	1식	20	-	-	▽20 (삭제)
B-6. 특화상품개발	1식	120	-	-	▽120
B-6. 건강밥상 요리교실	-	-	1식	30	△30
주민역량강화사업	-	100	-	100	변경없음
C-1. 마을운영 컨설팅	1식	20	1식	20	변경없음
C-2. 마을발전포럼	1식	20	1식	20	변경없음
C-3. 고령자 재취업교육	1식	20	1식	20	변경없음
C-4. 고령자 한글교실	1식	40	1식	40	변경없음
기타사업	-	372.5	-	372.5	변경없음
D-1. 마스터플랜 수립	1식	160	1식	160	변경없음
D-2. 경관계획 수립	1식	50	1식	50	변경없음
D-3. 실시설계 용역	1식	100	1식	100	변경없음
D-4. 총괄코디네이터 운영	1식	42.5	1식	42.5	변경없음
D-5. 마을활동가 운영	1식	10	1식	10	변경없음
D-6. 거버넌스 운영	1식	10	1식	10	변경없음

사업명

삼학동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 구자인(☎454-3734)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025(5년)

○ 위 치 : 군산시 금광동 156-1번지 일원

○ 규 모 : 39,575㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,509백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,509	268	259	2,409	573
국 비	2,456	166	104	1,786	400
시 도 비	316	30	10	224	52
시군구비	737	72	145	399	121
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ `23. 12.  : 마을기업육성 컨설팅용역 준공

○ `23. 12.  : 마스터플랜 수립 용역 준공

□ 향후계획

○ `24. 7. : 마스터플랜(안) 수립 및 승인 신청

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

선양동 취약지역 생활여건 개조사업

담당자

도시재생과 김선진(☎454-3732)

□ 사업목적 및 필요성

○ 취약지역 주민들의 기본적인 생활수준 보장을 위한 안전‧위생 등 기초인프라 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2026(5년)

○ 위 치 : 군산시 선양동 925-76번지 일원

○ 규 모 : 74,201㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,820백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,820	101	72	1,580	2,067
국 비	2,670	99	66	1,063	1,442
시 도 비	345	2	6	149	188
시군구비	805			368	437
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ `23. 12. 마스터플랜 조건부 승인[마스터플랜 수립 용역 완료]

선양동 새뜰마을사업 휴먼케어·주민역량강화(원예활동교육) 착수

□ 향후계획

○ `24. 상반기 : 편입토지·지장물 보상 시행, 세부사업 실시설계용역 착수

○ `24. 하반기 : 세부사업 공사 착공, 주택정비지원사업(빈집철거, 집수리) 추진

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

서군산 복합체육센터 건립사업

담당자

체육진흥과 온혜영(☎454-3295)

□ 사업목적 및 필요성

○ 부족한 체육 인프라 구축

○ 부족한 서군산 지역의 체육시설 불균형 해소 등

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. ~ 2024.

○ 위 치 : 군산시 산북동 3350번지 일원

○ 규 모 : 부지 19,918㎡, 연면적 8,452㎡, 지하1층/ 지상3층

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	28,000	13,200	9,900	4,900	-
국 비	5,000	5,000	-	-	-
시 도 비	3,400	-	2,500	900	-
시군구비	19,600	8,200	7,400	4,000	-
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)

○ 지방재정(중앙)투자심사 심의                              : ‘19. 11월

○ 공공건축지원센터 건축계획 사전검토 심의                  : ‘20.  4월

○ 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수             : ‘20.  9월 ~ ‘21.  9월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 착공                        : ‘22.  1월

○ 골조 및 지붕공사중(현공정율 60%)                         : ‘23. 12월

□ 향후계획

○ 외장 및 설비공사 추진                                    : ‘24.  7월

○ 서군산 복합체육센터 건립공사 준공                        : ‘24. 11월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산새만금국제마라톤대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국제대회 개최를 통해 군산 육상의 기량을 높일 수 있는 계기로 대한민국

육상 중흥을 위한 기틀 마련

○ 엘리트 선수들과 생활체육 동호인들이 함께 참여해 시민 건강과 체력증진

및 건전한 여가 활동에 기여하고 스포츠와 군산시 관광자원의 연계를

통한 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 04. 09.(일)

○ 위 치 : 군산시 일원(월명종합운동장 집결)

○ 규 모 : 총 8,000여명(참가자 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,680백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,680	-	880	900	900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	300	-	100	100	100
시군구비	2,380	-	780	800	800
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 02월 : 대회 개최 승인

○ `23. 02월 : 대회 종합추진계획 수립

○ `23. 03월 : 참가자 모집 및 유관기관 협의

○ `23. 04. 09. : 2023 군산새만금국제마라톤대회 개최

□ 향후계획

○ `23. 12월 : 대회 개최 승인

○ `24. 04. 14. : 2024 군산새만금국제마라톤대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

금석배전국학생축구대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 학생축구대회에서 메이저급 대회로 故 채금석 선생님의 이름을 딴

대회로 한국 축구의 중흥과 우수한 선수 발굴목적으로 개최되는 품격 높은 대회

○ 금석배 축구대회의 명성에 부합한 원활한 행사 운영으로 축구메카 도시로서의

이미지 제고 및 축구 꿈나무 발굴 육성에 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 연중 3회(초등 7월/중등 2월/고등 5월)

○ 위 치 : 군산시 일원(월명/대야/서군산/금강/교통공원)

○ 규 모 : 총212팀(초등 88개팀/중등 61개팀/고등 63개팀

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,530	890	900	840	900
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	530	140	150	90	150
시군구비	3,000	750	750	750	750
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 12월 : 대회 개최 승인

○ `23. 02. 04. ~ 02. 06. : 2023 금석배전국중학생축구대회 개최(13일간)

○ `23. 05. 01. ~ 05. 13. : 2023 금석배 전국고등학생축구대회 개최(13일간)

○ `23. 07. 22. ~ 07. 28. : 2023 금석배 전국초등학생축구대회 개최(7일간)

□ 향후계획

○ `23. 12월 : 대회 개최 승인

○ `24년 02월/05월/07월 : 2024 금석배전국(초중고)학생축구대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산새만금국제철인3종경기대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산군도 등 천혜의 관광자원을 보유하고 있는 군산 새만금을 국제적으로

홍보하고 지역경제 활성화에도 크게 기여

○ 참가선수와 시민이 함께 어우러질 군산시의 대표적 축제로 자리매김하여

군산시를 복합 스포츠 문화도시로 도약시키는 발판 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 06. 04.(일)

○ 위 치 : 비응항 및 새만금방조제 일원

○ 규 모 : 1,500여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 1,319백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,319	305	260	494	260
국 비	329	95	-	234	-
시 도 비	230	50	60	60	60
시군구비	760	160	200	200	200
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 10월 : 대회 개최 승인

○ `23. 10월 ~ `24. 05월 : 대회 참가자 모집 및 유관기관 협의

○ `23. 06. 02. ~ 06. 05. : 2023 군산새만금국제철인3종경기대회 개최

□ 향후계획

○ `23. 10월 : 대회 개최 승인

○ `23. 12월 : 지자체 개최 국제경기대회 공모사업 지원(국비 234백만원)

○ `24. 05. 31. ~ 06. 03. : 2024 군산새만금국제철인3종경기대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

새만금 전국인라인마라톤대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 인라인마라톤대회의 새만금 일원 개최를 통해 세계 최장 새만금 방조제와

군산시를 전국적으로 알리고 인라인 선수 및 동호인의 저변확대

○ 수준 높은 대회를 통한 지역경제 활성화와 국내‧외 선수 및 동호인이 참여하는

품격 높은 축제의 장 마련

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 06. 11.(일)

○ 위 치 : 새만금방조제 일원

○ 규 모 : 5,000여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 840백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	840	220	220	200	200
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	440	120	120	100	100
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 02월 : 대회 개최 승인(대한롤러스포츠연맹)

○ `23. 03월 : 추진계획수립 및 참가자 모집 홍보

○ `23. 06. 11. : 2023 군산새만금전국인라인마라톤대회 개최

□ 향후계획

○ `24. 02월 : 대회 개최 승인

○ `24. 06. 09. : 2024 군산새만금전국인라인마라톤대회 개최

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

KPGA 군산오픈 골프대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국내 최대 규모 81홀을 갖춘 골프장 인프라 시설을 활용하고, 프로대회

(KPGA) 유치를 통해 골프를 우리시 특화종목으로 자리매김

○ 스포츠와 군산시 관광자원의 연계를 통해 방문객들의 만족도를 높이고

이를 통해 방문객들의 재방문을 유도하여 지역경제 활성화에 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 08. 24.(목) ~ 08. 27.(일), 4일간

○ 위 치 : 군산컨트리클럽(토너먼트코스)

○ 규 모 : KPGA 1부 코리안터어 선수 145명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 464백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	464	120	112	112	120
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	64	20	12	12	20
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 01월 : 대회 개최(일정) 승인(한국프로골프협회 이사회)

○ `23. 06월 ~ 07월 : 유관기관 실무자회의 및 종합지원계획 수립

○ `23. 08. 24. ~ 08. 27. : 2023 KPGA 군산CC 오픈 개최(4일간)

□ 향후계획

○ `24. 02월 : 대회 개최(일정) 승인(한국프로골프협회 이사회)

○ `24. 07. 11. ~ 07. 14. : 2024 KPGA 군산CC 오픈 개최(4일간)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

전국스포츠클라이밍대회

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전국 스포츠클라이밍 동호인 화합과 향후 발전을 도모하며, 강인한 체력을

바탕으로 도전정신을 고취

○ 2020년 소룡동 인공암장 시설확충 및 개선사업 완료 후 군산클라이밍센터를

전국에 알리고 활성화하여 클라이머들의 방문으로 지역경제활성화에 이바지

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 12. 16.(토) ~ 12. 17.(일), 2일간

○ 위 치 : 군산클라이밍센터

○ 규 모 : 500여명(선수 및 관계자 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 530백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	530	130	140	130	130
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	130	30	40	30	30
시군구비	400	100	100	100	100
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `23. 01월 : 대회 유치 업무협의(대한산악연맹, 전북산악연맹)

○ `23. 02월 ~ 11월 : 인공암벽장 내 볼더링월 제작 및 설치

○ `23. 12. 16. ~ 12. 17. : 2023 전국 스포츠클라이밍 볼더링 대회

□ 향후계획

○ `24. 02월 : 대회 개최 업무협의 및 승인(대한산악연맹)

○ `24. 06. 01. ~ 06. 02. : 제15회 고미영컵 전국스포츠클라이밍대회

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

국제 및 전국대회 개최 지원

담당자

체육진흥과 김준식(☎454-3298)

□ 사업목적 및 필요성

○ 금석배 전국학생축구대회, 전국조정선수권대회 등 우리시 개최 국제·전국

대회의 원활한 운영을 위해 임시적 행사시설물 설치·구축 지원

○ 대규모 체육행사의 사전 홍보 및 준비를 통해 성공적인 대회 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 01월 ~ 12월(연중)

○ 위 치 : 군산시 일원

○ 규 모 : 총 16개 국제 및 전국규모 대회

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 538백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	538	98	140	150	150
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	538	98	140	150	150
지 방 채	-	-	-	-	-
민간자본	-	-	-	-	-
기 타	-	-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ `22. 09월 : 2023년 국제 및 전국규모 체육대회 추진계획 수립

○ `23. 01월 : 2023년 국제 및 전국규모 체육대회 종합지원계획 수립

○ `23. 01월 ~ 12월 : 국제 및 전국대회 개최 지원(행사관련 시설 및 홍보 등)

□ 향후계획

○ `24. 09월 : 2024년 국제 및 전국규모 체육대회 추진계획 수립(예산계상)

○ `24. 01월 : 2024년 국제 및 전국규모 체육대회 종합지원계획 수립

○ `24. 01월 ~ 12월 : 2024년 국제 및 전국대회 개최 지원

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산 짬뽕페스티벌

담당자

위생행정과 국현나(☎454-3413)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산짬뽕을 활용한 페스티벌 개최로 음식관광상품 지역선점 및 지역경제

활성화 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 10. 7.(토) ~ 10. 8.(일)

○ 위 치 : 군산시 짬뽕특화거리(동령길 일원)

○ 규 모 : 짬뽕맛집체험, 세계이색짬뽕체험, 짬뽕쿠킹클래스, 짬뽕푸드마켓,

개막식, 지역예술인공연 등 각종 먹거리‧ 체험프로그램 조성

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 90백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	330	90	90	150	-
국 비
시 도 비
시군구비	330	90	90	150	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 관내 중식당 참여로 다양한 짬뽕 먹거리 및 짬뽕 관련 행사 등 운영

○ 먹거리 대기부스 및 개방형화장실 등 편의시설 마련과 행사 만족도

조사 등 짬뽕특화사업 내실화에 노력

□ 향후계획

○ 24년도 짬뽕페스티벌 개최                             : ‘24. 11월

사업명

군경합동묘지 안장묘역 확장사업

담당자

복지정책과 최연배(☎3063)

□ 사업목적 및 필요성

○ 국가유공자(6.25참전자 등) 대부분이 고령으로 매년 안장 수요 증가 추세

○ 향후 1년 내에 만장이 예측되어 안장 수급 대응 방안 검토 필요

○ 이에, 군경합동묘지 확장을 통해 수요에 대응하고 국가유공자들의 충의(忠義)와 위훈(偉勳)의 정신을 기리며 선양(宣揚)하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021년 1월 ∼ 2025년 2월   ※2024년 12월 완공 예정

○ 위 치 : 군산시 나운동 산175 일원

○ 규 모 : (현재) 7,523㎡, 999기→ (예정) 23,240㎡, 1,929기 (증 15,717㎡, 930기)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,973백만원                             (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,973	82	204	2,687	0
국 비
시 도 비
시군구비	2,973	82	204	2,687	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 43%)

○ 토공(절토, 성도, 흙은반 등), 옹벽시공(보강토, L형)

○ 차폐식재, 일부 배수로 설치 등

□ 향후계획

○ 군경합동묘지 확장공사 추진(배수로 설치, 전기공, 조경공, 포장공사 등)

○ 군경합동묘지 확장공사 준공(2024년 12월)

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산시 승화원 제4추모관(봉안당) 신축

담당자

경로장애인과

고석중(☎454-7952)

나지훈(☎454-3192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시민의 장례문화 인식변화 및 화장 납골에 대한 수요증가로 추모관의 증설

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019. 01 ~ 2024. 04

○ 위 치 : 군산시 임피면 보석리 452-23 외 1

○ 규 모 : 연면적 4,671㎡(지상4층), 철근콘크리트조, 묘지관련시설(봉안당)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,371백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,371	4,657	5,013	701
국 비	3,776	2,574	1,202
시 도 비	768	486	282
시군구비	5,828	1,597	3,529	701
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ 설계용역 공고 및 입찰(조달청 의뢰) -2회유찰           : 19. 05.

○ 설계용역 2회 유찰로 설계용역 자체발주 추진             : 20. 02.

○ 건축허가(증축)협의 절차 이행                           : 21. 05.

○ 건축시공업체 선정 및 착공                              : 21. 07.

○ 1차분 건축공사 준공(1층 골조)                          : 22. 09.

○ 2차분 공사 계약 및 착공                                : 22. 10.

○ 전기, 통신, 소방 사업완료 및 동절기 공사중지            : 23. 12.

□ 향후계획

○ 신축공사 완료                                          : 24. 04.

○ 추모4관 개관 및 운영                                   : 24. 08.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

군산시 노인회관 건립

담당자

경로장애인과

이윤미(☎454-3184)

나지훈(☎454-3192)

□ 사업목적 및 필요성

○ 노인회관의 신축을 통한 쾌적하고 안전한 노인복지공간 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 01 ~ 2023. 03

○ 위 치 : 군산시 오룡로 840-10번지 일원

○ 규 모 : 지상3층, 콘크리트조, 연면적 1,164㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,927백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,927	2,648.6	1,278.4
국 비	-	-	-
시 도 비	-	-	-
시군구비	3,927	2,648.6	1,278.4
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 노인회관 신축공사 설계용역 계약                          : 20. 11.

○ 노인회관 신축공사(철거공사) 완료                         : 21. 03.

○ 실시설계 납품 및 일상감사(시)                            : 21. 08.

○ 노인회관 신축공사 착공                                   : 21. 11.

○ 노인회관 신축공사 전기,통신,소방공사 완료                 : 22. 12.

○ 노인회관 신축공사 완료                                   : 23. 03.

□ 향후계획

○ 해당없음

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당 없음

사업명

군산시가족센터건립 생활SOC사업

담당자

여성가족청소년과

전혜인(☎063-454-3252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 기존의 가족센터 공간 협소로 가족상담, 부모교육, 다문화 교류 소통 등

다양한 가족의 욕구 반영이 어려움

○ 공동육아나눔터 설치로 아이돌봄 서비스 시설 집적화로 지역 중심의

보편적 돌봄 서비스 중추적 역할 수행

□ 사업개요

○ 기    간 : 2021. 1 ~ 2025. 2.

○ 위    치 : 군산시 경암동 577-1번지 외 2필지

○ 규    모 : 부지면적 2,023㎡ / 연면적 2,096㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,900	115	527	6,258
국 비	1,800	82	218	1,500
시 도 비	900	33	84	783
시군구비	4,200	-	225	3,975
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 2021. 가족센터 생활soc복합화사업 선정(여성가족부)         :‘20. 9.

○ 가족센터 건립 부지 변경 논의 및 의회간담회                      :‘21. 7.

○ 시의회 공유재산 관리계획 변경의결                               :‘22. 1.

○ 부지변경 중앙부처 승인(여가부, 문체부)                           :‘22. 3.

○ 22. 2차 전라북도 지방재정투자 재심사                             :‘22. 5

○ 공공건축물 사전심의 재심의(군산시건축위원회)                     :‘22. 6.

○ 설계용역 착수                                                   :‘22. 10.

○ 가족센터 건립 현장 컨설팅(한국건강가정진흥원)                    :‘22. 11.

○ 건립주민협의체 회의                                                     :‘23. 2.

○ 설계용역 완료                                                          :‘23. 11.

○ 건축공사 일상감사 및 원가심사                                    :‘23. 12.

□ 향후계획

○ 공사 착공                                                            :‘24. 2.

○ 공사 준공                                                   :‘25. 2.

사업명

청소년수련관 기능보강사업

담당자

여성가족청소년과 김혜림(☎063)454-3243)

□ 사업목적 및 필요성

○ 내구연한 경과한 기계설비 교체 필요(노후화에 따른 소방펌프 오작동 등)

○ 시설 노후화로 우천시 내‧외벽 옥상 등 누수발생

○ 콘크리트 옹벽 침하, 균열 철근 노출 및 부식등으로 안전사고 노출

○ 수련동 숙소 노후화 및 객식 부족에 따른 리모델링 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 청소년회관로 75(송풍동)

○ 규 모 : 본관동(지하1층, 지상7층), 수련동(지하1층, 지상3층), 연면적 11,311㎡

○ 사업내용 : 누수 및 균열 보수, 노후 기계설비 교체, 석면철거, 숙소 리모델링 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,891백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,981	42	1,464	3,385
국 비
시 도 비	924.5		732	192.5
시군구비	3,966.5	42	732	3,192.5
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 추가예산 확보 계획(2022. 11월)

○ 지방재정 투자 재심사(2022. 11월)

○ 설계용역 완료(2022. 11월)

○ 추가 예산 확보_30억(2023. 3월)

○ 1차 공사 준공(2023. 9월)

○ 2차 공사 계획 및 설계용역 실시(2023. 11월)

□ 향후계획

○ 2차 공사 설계용역 완료(2024. 6월)

○ 시공업체 선정 및 공사 착공 등(2024. 7월)

○ 공사 준공(2024. 12월)

사업명

청암산 에코라운드 조성사업

담당자

환경정책과 이소연(☎454-4252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 자연환경을 활용한 생태관광 자원화

○ 생태관광 수요 증가에 따른 종합계획 추진 및 생태관광지 육성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016년 ~ 2024년

○ 위 치 : 청암산 및 군산호수 일대

○ 규 모 : 생태계 보전·보원, 생태관광 인프라 구축사업 추진

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,130백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,130	4,478	252	400	-
국 비	1,282.5	1,119.5	63	100	-
시 도 비	2,565	2,239	126	200	-
시군구비	1,282.5	1,119.5	63	100	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 89%)

○ 2016년 추진사항

- 주민설명회 및 마스터플랜 용역 수립, 꼬마숲 놀이마당 조성, 청암 원앙길 조성 등

○ 2017년 추진사항

- 청암산 입구 생태주차장 조성, 힐링 편백숲 조성

- 생태연못 및 관찰데크, 대나무숲 생태학습장 조성, 수변 탐방로 환경개선 등

○ 2018년 추진사항

- 육화습지 복원 및 생태학습장 조성, 조류관찰대, 전망쉼터 등 등산로 정비 등

○ 2019~2020년 추진사항

- 생태관광지 내 전선 지중화 추진

○ 2021년 추진사항

- 수변산책로 꽃길 조성사업, 청암산 수변탐방로 정비사업 등

○ 2022년 추진사항

- 청암산 제방변 경관 조성사업, 청암산 자연생태체험형 쉘터 제작·설치 등

○ 2023년 추진사항

- 청암산 제방 식생 환경정비사업, 식생 안내판 및 수목 표찰 설치 등

- 청암산 생태학습장 용수공급시설 설치 및 식생정비 사업

□ 향후계획

○ 청암산 걷기좋은 수변로 조성사업

사업명

월명공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(월명공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020. 6월 ~ 2025. 6월

○ 위   치 : 월명공원(군산시 해망동, 소룡동 일원)

○ 규   모 : 공원 내 사유토지 492천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  28,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	28,000	8,850	5,066	5,000	9,084
국 비
시 도 비
시군구비	28,000	8,850	5,066	5,000	9,084
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49.7%)

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : ‘20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : ‘20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 협의 및 수용재결 병행추진

사업명

공원 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(금강·새들·통매·지곡·은파공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설 최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2018. 1월 ~ 2025. 6월

○ 위   치 : 공원 5개소(군산시 내흥동, 수송동, 지곡동, 조촌동 일원)

○ 규   모 : 공원 내 사유토지 158천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  41,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	41,000	17,119	1,319	15,000	7,562
국 비
시 도 비
시군구비	41,000	17,119	1,319	15,000	7,562
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 31.6%)

○ 공원 내 필수지역 우선매입  : ‘18년 1월 ~

- 등산로, 공원시설 사용부지, 재해위험지, 국공유지 밀집지역 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : ‘20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : ‘20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 협의 및 수용재결 병행추진

사업명

군봉공원 조성을 위한 사유토지 매입

담당자

산림녹지과 박종찬(☎454-2987)

□ 사업목적 및 필요성

○ 20. 7월 장기미집행 도시계획시설 일몰제 도래에 따른 대응

○ 장기미집행 도시계획시설(군봉공원)의 사유토지 전략적 매입으로 실효시설

최소화 및 미래유산인 도심 속 녹지공간 최대 확보

□ 사업개요

○ 기   간 : 2020. 6월 ~ 2025. 6월

○ 위   치 : 군봉공원(군산시 개정동, 구암동 일원)

○ 규   모 : 공원 내 사유토지 410천㎡ 매입

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  27,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,000	8,558	4,887	5,000	8,555
국 비
시 도 비
시군구비	27,000	8,558	4,887	5,000	8,555
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 49.8%)

○ 장기미집행 도시계획시설 정비용역 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 10월

- 공원 토지적성분석, 공원구역 재설정, 실시계획인가 등

○ 공원구역계 조정 : ‘19. 5월 ~ ‘20. 6월

○ 공원존치지역 실시계획인가 고시 : ‘20. 6월

○ 공원 내 사유토지 협의 매입시행 : ‘20. 7월 ~

□ 향후계획

○ 장기미집행 공원 사유토지 협의 및 수용재결 병행추진

사업명

새들허브숲(미세먼지 차단숲) 조성

담당자

산림녹지과 정성욱(☎454-2986)

□ 사업목적 및 필요성

○ 장기간 미조성된 장기미집행 새들공원을 미세먼지 저감 등 시민 친화숲으로       조성하여 쾌적한 공원환경 조성 및 시민편익 증진

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022년 ~ 2024년

○ 위 치 : 군산시 수송동 708-2 일원(새들공원)

○ 규 모 : 5.9ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,622백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,622	4.8	1,503	4,114
국 비	2,811	2.4	751.5	2,057
시 도 비
시군구비	2,811	2.4	751.5	2,057
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ 새들공원 사유토지 보상                            : ‘19. 1. ~ ‘22. 2.

○ 새들허브숲 조성 기본·실시설계용역 착수                     :  ‘21. 11.

○ 새들허브숲 조성 기본계획(안) 내부보고 및 주민설명회       :  ‘22.  3.

○ 새들공원 조성계획 변경결정                                :  ‘22. 11.

○ 일상감사 및 원가심사                                      :  ‘22. 12.

○ 공사 착공                                                  :  ‘23.  6.

□ 향후계획

○ 새들허브숲 조성사업 완료 : ‘24. 11월

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 총사업비 변경

(당초) 5,800  /  (변경) 5,622(예산 조정에 따른 국비 89백만원 반납)

사업명

군산 철길숲 조성사업

담당자

산림녹지과 김영아(☎454-2952)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시 내·외곽 산림(숲)의 신선하고 깨끗한 공기를 도심으로 유도·확산할 수       있도록 숲 네트워크 조성

○ 폐철도, 유휴지 등을 이용한 시민 친화숲 조성을 통한 미세먼지 저감, 열섬       완화 등 도시민의 삶의 질 향상

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2025. 12.(4년)

○ 위 치 : 군산시 전역

○ 규 모 : 철길숲(5.7ha, 연장 2.6km) 외

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 20,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	20,000
국 비	10,000	242	711	8,006	1,041
시 도 비
시군구비	10,000		500	8,460	1,040
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 철길숲 1차(8구간) 사업추진 중      : ‘23. 11. ~

○ 철길숲 2차(1·2구간) 사업추진 중    : ‘23. 12. ~

□ 향후계획

○ 군산 철길숲 조성사업 추진          : ‘23. 11. ~ ‘25.  6.

○ 철길숲 외 바람길숲 조성사업 추진   : ‘24.  3. ~ ‘25. 12.

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

은파교회일원(대로2-9호선)

도로개설공사

담당자

도시계획과 유연태(☎454-3522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산시 지곡동 일원  도로개설로 지역주민의 삶의 질 향상 및 교통소통의 원활로 주민생활에       편익 제공은 물론 도시계획지역 개발 촉진을 유도하여 도시 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 06 ~ 2026. 12

○ 위 치 : 지곡동 은파교회 일원

○ 규 모 : 도시계획도로 확장 L=470m, B=30

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,844백만원(공사 600 보상 2,244)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,929	2,197	700	1,079	909
국 비
시 도 비	4,929	2,197	700	1,079	909
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2023. 07. : 전체 19필지 보상완료

○ 2023. 03. ~ 12. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2024. 10. : 공사발주 및 시행

- 은파관광지 개발 및 벚나무 존치 민원 등에 따른 사업시기 조정 필요

□ 사업변경 내역

○ (당초) 사 업 비 : 4,130백만원(공사 1,220, 보상 2,910)

사업기간 : 2020. 6 ~ 2024. 12

(변경) 사 업 비 : 4,929백만원(공사 2,032, 보상 2,897)

사업기간 : 2020. 6 ~ 2026. 12

사업명

신도시아파트북측(중로2-34호선)

도로개설공사

담당자

도시계획과 유연태(☎454-3522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산시 소룡동 일원  도로개설로 지역주민의 삶의 질 향상 및 교통소통의 원활로 주민생활에              편익 제공은 물론 도시계획지역 개발 촉진을 유도하여 도시 균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 01 ~ 2026. 12

○ 위 치 : 군산시 소룡동 729-1번지 외 7필지

○ 규 모 : 도시계획도로 확장 L=190m, B=15m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,844,000,000원(공사 600,000,000 보상 2,244,000,000)

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,844		2,178	66	600
국 비
시 도 비	2,844		2,178	66	600
시군구비
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황

○ 2023. 01. ~     : 전체 13필지 중 10필지 보상완료

○ 2023. 03. ~ 12. : 실시설계용역 완료

□ 향후계획

○ 2024. 01. ~ 2024. 12. : 잔여 필지 보상 추진

○ 2025. 01. ~ : 공사착공

□ 사업변경 내역

○ (당초) 사 업 비 : 2,520백만원(공사 520, 보상 2,000)

사업기간 : 2023. 1 ~ 2024. 12

(변경) 사 업 비 : 2,844백만원(공사 600, 보상 2,244)

사업기간 : 2023. 1 ~ 2025. 12

사업명

지방도 709호선 확포장공사

담당자

도시계획과 강형기(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2009 ~ 2024

○ 위 치 : 옥구읍 일원 지방도 709호선(옥구초교 ~ 옥서삼거리)

○ 규 모 : 도로확포장 L=4.2km, B=12m→19m~24m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 27,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	27,900	24,340	1,560	2,000	0
국 비	13,670	12,670	0	1,000	0
시 도 비
시군구비	14,230	11,670	1,560	1,000	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 85%)

○ 도로확포장공사 2차분 준공 : 2021. 12.

○ 도로 확포장공사 3차분 공사 추진 : 2022. 01. ~

□ 향후계획

○ 교차로 관련기관 협의 및 전기공사 추진

○ 도로포장 및 부대공 등 준공 : 2024. 12.

□ 사업변경 내역(해당시)

○ (당초) 총사업비 : 25,900백만원,  사업기간 : 2009. ~ 2023.

(변경) 총사업비 : 27,900백만원,  사업기간 : 2009. ~ 2024.

사업명

4토지~리츠프라자호텔 도로개설 및 확장

담당자

도시계획과 강형기(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 산북중학교 ~ 리츠프라자호텔

○ 규 모 : 도로개설 및 확장 L=2km(터널 270m), B=15~24m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 35,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	35,000	3,100	8,408	6,400	17,092
국 비	17,500	1,900	4,262	4,000	7,338
시 도 비
시군구비	17,500	1,200	4,146	2,400	9,754
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 1차분 공사 완료 : 2023. 1.

○ 2차분 공사 추진 : 2023. 2.

□ 향후계획

○ 터널 발파 및 굴진

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

공항로 기반시설 설치 및 정비사업

담당자

도시계획과 강형기(☎454-3662)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 공항로 일원

○ 규 모 : L=8km, 기반시설 설치 등 도로정비

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 15,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	15,000	10,560	3,540	900	0
국 비	7,500	5,060	2,290	150	0
시 도 비
시군구비	7,500	5,500	1,250	750	0
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 도시가스 공급사업 공급관 설치 추진

○ 도로정비(절삭 및 덧씌우기) 사업 완료

○ 도시가스 공급관 설치 완료 : 2023. 12.

□ 향후계획

○ 마을안길 확포장 보상협의 및 도로공사 추진 : 2024. 10. ~

□ 사업변경 내역

○ (당초) 사업기간 : 2019. ~ 2023.

(변경) 사업기간 : 2019. ~ 2024.

사업명

옥서면 농어촌도로 304호선 확포장

담당자

도시계획과 김보성(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 옥서면 구호촌교차로 농어촌도로 304호선

○ 규 모 : 도로확포장 (304호선)L=1.96km, B= 7m→12m

(면소재지)L=0.73km, B= 6mm

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  10,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	10,000	1,400	1,066	600	6,934
국 비	5,000	700	533	500	3,267
시 도 비
시군구비	5,000	700	533	100	3,667
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 40%)

○ 실시계획인가 완료 : 2022. 6.

○ 도로확포장 공사(304호선) 착공 : 2022. 8.

□ 향후계획

○ 304호선 도로확포장 공사 준공, 면소재지 공사 추진

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

신덕~개정마을 도로확포장

담당자

도시계획과 김보성(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 상평리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.2km, B= 3m→10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,200	1,464	1,120	1,333	1,283
국 비	2,600	732	560	1,233	75
시 도 비
시군구비	2,600	732	560	100	1,208
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 실시계획인가 완료 : 2022. 11.

○ 도로확포장 공사 착공 : 2022. 12.

□ 향후계획

○ 편입토지 및 지장물 수용재결 추진 병행

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

나운3동일원 도로개설 및 확장

담당자

도시계획과 김보성(☎454-3664)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주한미군 공여구역 주변지역 주민들의 삶의 질 향상 및 편의 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 미룡동 439-1 일원

○ 규 모 : 도로개설 및 확장 L = 780m, B = 10m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200,000,000	200,000,000	16,000,000	1,500,000,000	1,484,000,000
국 비	1,600,000,000	100,000,000	0	1,350,000,000	150,000,000
시 도 비
시군구비	1,600,000,000	100,000,000	16,000,000	150,000,000	1,334,000,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)

○ 실시설계용역 및 토지분할 측량 : 2022. 11.

○ 편입토지 및 지장물 보상협의 : 2023. 12. ~

□ 향후계획

○ 나운3동일원 도로확포장 공사 착공

□ 사업변경 내역(해당없음)

사업명

고군산군도 내부도로(무녀선) 확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 무녀도리 일원(1공구)

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.8km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	9,000	2,738	814	585	4,863
국 비	7,200	2,191	640	468	3,901
시 도 비	900	274	87	59	481
시군구비	900	274	87	59	481
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 1공구 편입토지 보상계획 완료 : ’21.  8월

○ 1공구 보상추진 (협의보상 3회) : ’23.  6월

○ 공사 발주                    : ’23. 12월

□ 향후계획

○ 1공구 공사 착수              : ‘24.  3월 ~

사업명

고군산군도 내부도로(신시선) 확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 신시도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.2km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 7,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	7,700	6,420	124	500	656
국 비
시 도 비
시군구비	7,700	6,420	124	500	656
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)

○ 1공구 기본 및 실시설계 완료  : ‘19. 12월

○ 1공구 착공                   : ’20.  1월

○ 1공구 준공                   : ’22.  6월

□ 향후계획

○ 2공구 보상추진               : ‘24. 7월 ~

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 사업계획변경 예정

사업명

고군산군도 내부도로(장자선) 확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고군산을 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 장자도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.3km, B=3→6.5m, 교량재가설 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 5,500백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	5,500	4,122	728	300	350
국 비
시 도 비
시군구비	5,500	4,122	728	300	350
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  30%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 장자선 공사착공        : ’22.  6월

○ 가설교량 설치          : ’23. 12월

□ 향후계획

○ 공사 준공      : ‘25.  2월

사업명

선유3구 남악마을 도로확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 선유도를 찾는 관광객이 급증함에 따라 섬내부 협소한 도로 확장으로

지역주민 및 관광객에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2026

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 6,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	6,600	2,400	187	1,600	2,413
국 비
시 도 비
시군구비	6,600	2,400	187	1,600	2,413
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)

○ 기본 및 실시설계 완료  : ‘20. 12월

○ 편입토지 보상협의      : ’21.  2월 ~

□ 향후계획

○ 공사 착공              : ‘24.  10월 ~

사업명

군도 6호선(석화~고척) 도로확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 시내버스 통과구간의 협소한 도로 확장으로 지역주민에게 교통편익 제공

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 대야면 석화마을 ~ 고척마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.5km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	1,398	801	1,001	-
국 비
시 도 비
시군구비	3,200	1,398	801	1,001	-
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 실시설계 완료         : ‘20. 5월

○ 토지보상              : ’23. 4월

○ 2차분 준공            : ’23. 1월

□ 향후계획

○ 공사 추진             : ‘22.  12월 ~ ’24. 12월

사업명

옥구면도 105호(옥정마을) 도로확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥구읍 옥장리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.0km, B=4→8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,700백만원                                 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,700	805	724	200	971
국 비
시 도 비
시군구비	2,700	805	724	200	971
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 보상계획공고          : ’21. 8월

○ 감정평가 의뢰         : ’22. 6월

○ 편입토지 보상협의     : ‘23.  7월 ~

□ 향후계획

○ 공사 착수             : ‘25.  3월 ~

사업명

옥도리도 203호 도로확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥도면 선유도리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=0.5km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,600백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,600	239	25	500	1,836
국 비
시 도 비
시군구비	2,600	239	25	500	1,836
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  20%)

○ 실시설계 착수         : ‘20. 3월

○ 문화재 현상변경 결정  : ’22. 5월

○ 실시설계 완료         : ‘22. 7월 ~ ’22. 12월

□ 향후계획

○ 공사추진              : ‘24. 7월 ~ ’25. 12월

사업명

회현리도 210호선 도로확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2024

○ 위 치 : 군산시 회현면 회현초교 ~ 척동마을 간

○ 규 모 : 도로확포장 L=1.6km, B=3→6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,700백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,700	2,350	167	-	1,183
국 비
시 도 비
시군구비	3,700	2,350	167	-	1,183
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 실시설계 완료         : ‘19. 12월

○ 편입토지 보상 및 착공 : ’19. 12월

□ 향후계획

○ 공사 준공      : ‘24.  10월

사업명

옥산 리도 206호선(대려~금성) 도로확포장공사

담당자

건설과 김성우 (☎454-3582)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역간 연결 도로망 구축으로 교통편익 제공 및 생활여건 개선

○ 도로망 확충으로 농수산물 등 물류수송에 기여하여 농촌균형발전 도모

□ 사업개요

○ 기 간 : 2021 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 옥산면 옥산리 ~ 회현면 금성리 일원

○ 규 모 : 도로확포장 L=2.7km, B=6.5m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	210	48	300	3,442
국 비
시 도 비
시군구비	4,000	210	48	300	3,442
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)

○ 실시설계 착수         : ‘21.  3월 ~

○ 실시설계 완료         : ‘23.  12월 ~

□ 향후계획

○ 보상추진              : ‘24. 9월 ~

사업명

임피면 농마교 재가설공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019 ~ 2023

○ 위 치 : 임피면 술산리 682-14인근

○ 규 모 : 교량 가설 L=91.0m, B=5.0m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 2,127백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,127	1,849	279
국 비	800	800	-
시 도 비	-	-	-
시군구비	1,327	1,049	279
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ‘19.09. : 재난안전 특교세교부 결정

○ ’20.12. : 실시설계 완료 및 공사 착공

○ ‘21.12. : 1차분 공사추진

○ ‘22.05. : 보상완료(수용재결 결정완료 ’22.5.12.)

○ ‘22.06. : 2차분 공사추진

○ ‘22.12. : 교량슬래브 완료

○ ‘23. 6. : 농마교 재가설 준공

사업명

대야 삼라교 재가설공사

담당자

건설과 채병헌(☎454-3592)

□ 사업목적 및 필요성

○ 농어촌도로 개설 및 확장을 통한 지역주민 교통편익 제공과 농산물 생산      ‧유통을 향상시켜 농어촌지역의 생활환경 개선 및 경제활동 기여

□ 사업개요

○ 기 간 : 2014. ~ 2024.

○ 위 치 : 대야면 접산리 라궁(농도 314호 접산선)

○ 규 모 : 접속도로 L=1.27km, B=8m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,932백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,932	2,942	533	456
국 비	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-
시군구비	3,932	2,942	533	456
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 80%)

○ ‘21. 09 : 도로 노선지정공고

○ ‘22. 01 : 수용재결 신청(지방토지수용위원회)

○ ’22. 05. : 수용재결 완료

○ ‘23. 12. : 2차분 준공

□ 향후계획

○ ’24. 10. :　３차분 추진

○ ‘24. 12. : 사업 추진

사업명

동백대교 경관조명 설치공사

담당자

건설과 박봉순(☎454-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 동백대교 이용자가 안전하고 불안감 없이 통행할 수 있는 조명환경 확보

○ 동백대교 교량의 안전성과 심미성 강화 및 조화로운 야간환경개선 기대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022 ~ 2023

○ 위 치 : 동백대교 L=1.93km

○ 내 용 : 교량 및 아치부 조명설비 보강 및 개선

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  4,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,000	3,000	1,000
국 비	2,000	2,000
시 도 비
시군구비	2,000	1,000	1,000
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ ’22.09 ~ ’22.12 : 공사 발주 및 계약 절차 이행

○ ’23.01 ~ ’23.12 : 공사 착공 및 추진

□ 향후계획

○ ’24.01 ~ ’24.03 : 시범운영, 준공

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

가로등 에너지 절감 LED 교체 사업

담당자

건설과 박봉순(☎454-3622)

□ 사업목적 및 필요성

○ 에너지절감 고효율 LED가로등기구 교체로 가로등 전기요금 절감

○ 노후 도로조명을 LED조명으로 교체하여 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023 ~ 2027

○ 위 치 : 군산시 관내

○ 내 용 : 노후 가로등기구 6,495등 교체

(노후 가로등기구 250W~200W ⇨ LED가로등기구 150W~100W)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,891백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,891		291	900	2,700
국 비
시 도 비
시군구비	3,891		291	900	2,700
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)

○ ’23.09 ~ ’23.12 : 2023년 가로등 에너지 절감 LED 교체사업 완료(532등)

□ 향후계획

○ ’24.01 ~ ’24.07 : 2024년 가로등 에너지 절감 ELD 교체사업 추진 (1,500등)

○ 2025~2027년까지 연차별 사업비 확보하여 연도별 사업 추진 예정

( 900백만원/년× 3년 = 2,700백만원)

□ 사업변경 내역

○ 해당없음

사업명

2023년 식량작물공동(들녘)경영체 육성사업(사업다각화)

담당자

농정과 오미소(☎454-2842)

□ 사업목적 및 필요성

○ 논 타작물 재배 단지를 집중지원하여 과잉 생산되는 쌀의 적정 생산을

유도하고 식량작물 전반에 걸친 생산·유통여건 개선

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.

○ 위 치 : 군산시 옥구로 282-13(옥구농협 RPC)

○ 규 모 : 교육컨설팅 3식, 공동농기계 2대, 가공공장 및 저온저장고 각 1동, 가공시설 3식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :2,953백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	2,953	-	392	2,561	-
국 비	1,123	-	118	1,005	-
시 도 비	337	-	35	302	-
시군구비	789	-	83	706	-
지 방 채		-	-	-	-
민간자본	707	-	156	551	-
기 타		-	-	-	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 95%)

○ (교육컨설팅) 농가조직화 교육컨설팅

○ (농작업기계) 트랙터·범용콤바인

○ (건축공사) 농산물가공공장 1동/200평, 저온저장고 1동/150평

□ 향후계획

○ HACCP 인증 및 가공사업 활성화 컨설팅 추진

□ 사업변경 내역

○ 실시설계 및 일상감사 결과 반영에 따라 건축공사비 증가 (1,940→2,212백만원)

사업명

2023 군산 수제맥주 페스티벌

담당자

먹거리정책과 이선우(☎454-5252)

□ 사업목적 및 필요성

○ 지역농업과 연계한 수제맥주 산업 도시브랜드 인지도 제고

○ 지역농업, 도시재생, 청년창업을 연계한 복합문화컨텐츠로 육성

○ 로텔맥주 붐 조성을 통한 수제맥주 시장에 군산맥아 판로 확대

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 6. 16. ~ 6. 18. (3일간)

○ 위 치 : 군산 근대역사박물관 주차장 일원

○ 규 모 : 참여기업 60개, 방문인원 2만명

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 465백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	1,775	320	465	490	500
국 비	190	190
시 도 비
시군구비	1,585	130	465	490	500
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 참가업체 : 59개업체(군산맥주4, 국외교류도시1, 음식30, 기업홍보13, 기념품7, 기관단체4)

○ 방문인원 : 19,700명(군산 64%, 타지역 36%)

○ 현장판매금액 : 296백만원

□ 향후계획

○ 독창적인 수제맥주 축제로 전국적인 인지도 향상 및 교류도시 참여확대 등 지속 추진

○ 지역농업, 소상공인, 지역기업이 동반성장하는 로컬융복합 컨텐츠로 육성

□ 사업변경 내역(해당시)

○ 해당없음

사업명

농업인 복합교육지원센터 건립

담당자

농촌지원과 박은옥(☎454-5222)

□ 사업목적 및 필요성

○ 도시농업인 유치와 미래농업을 이끌어 갈 청년창업농 교육기회 제공을 위한

프로그램 운영 및 교육장소 마련 절실

○ 농업 품목별 다양한 기술지식·정보 제공 및 농업인의 문화생활기반 조성으로

커뮤니티 활성화

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020년 ~ 2023년      ※ 준공일 : 2024. 1. 26.

○ 위 치 : 군산시 개정면 운회리 634-33

○ 규 모 : 982㎡(지상 2층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,208백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	4,208	779	1,903	1,427
국 비	1,078	168	642	244	0
시 도 비	150	0	0	150	0
시군구비	2,980	611	1,261	1,033	0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 93%)

○ 도시계획 변경용역 : ‘21. 3. ~ ’22. 3.

○ 건축 기본·실시설계 용역 : ‘22. 1. ~ 9.

○ 건축 시공 일상감사 및 도 원가심사 완료 : ’22. 8.

○ 건축공사 입찰 시공업체 선정 및 착공 : ‘ 22. 9. ~ 10.

□ 향후계획

○ 농업인 평생교육 복합센터 준공 : ‘24. 1.

○ 농업인 평새교육 복합센터 BF 인증 심사 : ’24. 5.

○ 농업인 평생교육 복합센터 교육·운영장비 확충 : ’24. 10.

○ 농업인 평생교육 복합센터 운영 : ‘24. 10. ~

사업명

군산꽁당보리축제

담당자

농촌지원과 김희성(☎454-5233)

□ 사업목적 및 필요성

○ 군산 대표 농업축제로서 군산농업의 우수성과 문화를 알리고 도시민들과
함께 공유하고 즐길 수 있는 축제 개최

□ 사업개요

○ 기 간 : 2023. 5. 4.(목) ~ 5. 6.(토) (3일)

○ 위 치 : 국제문화마을 앞 들(군산시 임사안 3길 5)

○ 규 모 : 축제장 14ha

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 103백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	103	35	68	68	150
시군구비	103	35	68	68	150

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)

○ 축제 기본 계획 수립 : 2023. 1.

○ 축제 세부 계획 수립 : 2023. 3.

○ 축제 추진 완료 : 2023. 5.

○ 보조금 정산 : 2023. 7.

○ 24년도 축제 예산 수립 : 2023. 9.

○ 24년도 축제 기본계획 수립 : 2023. 12.

□ 향후계획

○ 24년도 축제 추진

사업명

신역세권 공영주차장 조성

담당자

교통행정과 이중조(☎454-3812)

□ 사업목적 및 필요성

○ 택지개발 지구내 주차 수요 및 군산역 등 교통 유발 요인으로 인하여

택지 활성화 시 교통량과 주차수요 폭증할 것으로 예상되어 주차난 해소를

위해 공영주차장 확보

□ 사업개요

○ 기 간 :  2023. 12. 26. ~ 2024. 08. 23.

○ 위 치 : 군산시 내흥동 1044번지(P6블럭)

○ 규 모 : 주차장조성 A=3,430.8㎡ (주차 126대)

○ 사업비:  3,200백만원 (도비 1,600 / 시비 1,600)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,200	-	2,610	590	-
국 비
시 도 비	1,600	-	1,305	295	-
시군구비	1,600	-	1,305	295	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 :  70%)

○ 공영주차장 지원사업계획서 제출(군산시→전라북도)   : ‘22. 7월

○ 자체 지방재정투자사업 심의                      : ‘22. 11월

○ 실시설계용역 및 토지보상 추진	: ‘23. 5월 ~ 9월

○ 시 일상감사 및 도 원가심사 추진	: ‘23. 9월 ~ 11월

○ 공사 착공	: ‘23. 12월

□ 향후계획

○ 공사완료 및 주차장 개방                       : ‘24. 8월 ~ 9월

사업명

지능형 교통체계(ITS) 구축사업

담당자

교통행정과 최준영(☎454-7914)

□ 사업목적 및 필요성

○ 첨단 교통기술을 접목한 ITS 확대와 교통빅데이터 구축으로 안전하고 편리한 교통환경 조성

□ 사업개요

○ 기 간 : 2022. 1. ~ 2024. 9.

○ 위 치 : 군산시 관내

○ 규 모

현장시스템	센터시스템
· 스마트교차로 34개소 · 긴급차량우선신호시스템 20개소 · 무선신호온라인 30개소 · 교통정보제공시스템(VMS) 5개소 · 광자가망 5.7km	· 센터 H/W, N/W 1식 (영상분석, 스토리지, 보안장비 등) · 센터 S/W 1식 (영상분석라이선스, 빅데이터분석, 긴급차량우선신호 S/W, ITS운영단말개선 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,970백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,970	1,168	2,565	237	-
국 비	2,373	1,085	1,214	74	-
지 방 비	1,597	83	1,351	163	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 스마트교차로, 긴급차량우선신호시스템, 광자가망 등의 현장시스템 구축 완료

○ 센터 하드웨어 및 소프트웨어 도입 완료

○ 기존 설치지점 2개소 VMS 고장으로 인한 교체 계약 진행

□ 사업변경 내역

○ 사업물량 변경내용

구 분		당초	변경	증감	변경 사유
현장 시스템	교통정보제공시스템(VMS)	3개소	5개소	증)2개소	VMS 고장

○ 수량 및 금액변경

(단위 : 백만원)
구 분			수량	금액	증감액	비 고
현장 시스템	교통정보제공시스템(VMS)	당초	3식	248	증) 7	신설 : 3개소 교체 : 2개소
		변경	5식	255

사업명

고령자 복지주택사업

담당자

주택행정과 이영범(☎454-3712)

□ 사업목적 및 필요성

○ 전 세계적으로 노인인구의 급격한 증가로 고령화 사회가 빠르게 진행되면서

노인문제가 사회문제의 중심으로 떠오르는 가운데 고령사회의 충격을 대비한

맞춤형 임대주택 및 복지서비스 공급으로 65세이상 노령층 등의 주거안정

불안을 해소하고 복지시설을 일체화하여 주거･복지혁신을 통한 실질적인

삶의 질을 높이기 위함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2019년 ~ 2024년

○ 위 치 : 전라북도 군산시 오룡동 900-40번지 일원

○ 규 모 - 주택건설 : 고령자 복지주택 150호(전용 26㎡)

- 복지시설 : 1층 연면적 1,196.25㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 22,633백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	22,633	2,831	9,901	9,901	-
국 비	14,911	1,865	6,523	6,523	-
시 도 비	0	-	-	-	-
시군구비	0	-	-	-	-
지 방 채	0	-	-	-	-
민간자본	0	-	-	-	-
기 타	7,722	968	3,377	3,377	-

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 90%)

○ 사업계획(최초) 승인 : 2019. 12.

○ 사업계획(1차변경) 승인 : 2021. 05.

○ 공사착공 : 2021. 08.

○ 지하구조물 완료 : 2022. 10.

○ 골조공사 완료 : 2023. 09.

○ 사업계획(2차변경) 승인 : 2023. 11.

□ 향후계획

○ 공사 준공 : 2024. 04.

○ 사용검사 승인 : 2024. 06.

○ 우리 시와 LH의 사업비 정산 항목 부담금 협의

사업명

농어촌 지방상수도 확장공사(성산)

담당자

수도과 서현기(☎454-5402)

□ 사업목적 및 필요성

○ 환경부 농어촌ㆍ도서지역 상수도 확충계획에 반영된 사업으로 농어촌지역의

맑은 상수도 공급 필요

□ 사업개요

○ 기 간 : 2016 ~ 2025

○ 위 치 : 군산시 성산면 일원

○ 규 모 : 성산면 미포설 지역 상수관 확충 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 :  3,089백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액
		기투자	2023년	2024년	2025년 이후
계	3,089	765	71	0	2,253
국 비	451	451	0	0
시 도 비	1,711	100	50	0	1,561
시군구비	927	214	21	0	692
지 방 채
민간자본
기 타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 24%)

○ 성산면 일원 수돗물 미보급 세대 급수공사 추진

- 2023년 ~ : 수도관 포설 L=240m

□ 향후계획

○ 24년 농촌지역(성산면) 급수관 포설공사 추진