3-8		자동차 대체부품 수출산업 육성

부서명	산업혁신과	과장	황관선	계장	정태정	담당자 (전화번호)	채성석 (454-2763)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
		◯	◯	◯	◯		◯		23,330

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2022~2026	□ 설명회·공청회 □ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 자동차 부품기업의 신규 일감창출을 위한 국내‧외 시장 고객 수요기반

중저가형 고품질 대체부품 산업 활성화

❍ 지역 성장동력 및 수출산업 육성을 위한 대체부품 전주기 관리시스템 구축

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 군산시 일원

❍ 사업기간 : 2019.~

❍ 사 업 비 : 233.3억원(국비 75, 도비 57.5, 시비 100.8) * 군산80.8, 익산10, 김제10

❍ 사업내용 :

[1단계] 일감창출형 대체부품산업 기반구축         : ‘19. 10.~ 21. 12.

- 기술지원센터(667㎡) 및 공동활용 장비구축 등

[2단계] 국내외 차종 대체부품 개발을 위한 종합지원     : ‘22. 1. ~ 23. 12.

- 국내 유통 공급 활성화를 위한 부품개발 全주기 지원

- 해외 수출시장 진출을 위한 부품개발 및 해외마케팅 지원

[3단계 / 이행후 계속 추진] 자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성   : ‘24. 1. ~

[자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성사업(안)]

∎ 사 업 기 간 : 2024.~2027.

∎ 사 업 위 치 : 새만금 산업단지 일원

∎ 사  업  비  : 2,000억원 정도(국비 1,400, 지방비 600)

∎ 사 업 내 용 : 대체부품 맞춤형 기술개발 및 보급, 품질인증 지원 플랫폼, 대체부품산업

집적화단지 및 종합비즈니스센터 구축 등

∎ 주 관 기 관 : 국토부, 전라북도, 군산시 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 해외 수출시장 진출하기 위한 대체부품 개발 및 해외마케팅

❍ 개발부터, 생산, 인증, 유통, 물류(해외수출)까지 가능한 대체부품

글로벌 전진기지 조성사업 추진

[추진프로세스]

1단계 (‘19~’21)		2단계 (‘22~’24)		3단계 (‘25~)
일감창출형 대체부품 산업생태계 구축		-국내 시장 매출 증대 -해외 시장 진출‧유통		원스톱 자동차 대체부품 글로벌 전진기지 조성

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ 2023년 자동차산업 육성 관련 가내시 통보(’22. 9. 8.)

❍ 자동차 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 기본계획 수립, 사전타당성조사        등을 통한 부처(국토부) 설득 및 국가예산 확보 추진

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	23,330	17,530	5,800	2,900	2,900
국비	7,500	7,500	-	-	-
도비	5,750	3,750	2,000	1,000	1,000
시비	8,080	6,280	1,800	900	900
기타 (익산,김제 부담금)	2,000	-	2,000	1,000	1,000

* [3단계] 「자동차 대체인증부품 글로벌 전진기지 조성사업」기본계획 수립 후 사업비 확정

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		◦일감창출형 대체부품 산업 기반구축 등 (3개 사업)	- 장비구축 12종 (3D설계프로그램 외) - 자동차 인증대체부품 기술지원센터 구축 - 대체부품 개발을 위한 종합지원 ‧ 개발 51건(인증 15건, 진행 36건) 매출액(~‘21년 55억)	(누적) 30
임기내	2022	◦자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업 추진	- 국내 해외차종 年 10개 품목개발 - 공동브랜드 기반 마케팅활동 등	40
	2023	◦ 자동차 대체부품 개발 및 활성화 사업 추진 ◦대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 기본계획수립	- 국내 해외차종 年 10개 품목개발 - 공동브랜드 기반 마케팅활동 등	50 70
	2024	◦ 자동차 대체부품 개발 및 활성화사업 추진 ‧ 국내시장 매출 증대 ‧ 해외 수출시장 진출‧유통 [이행후 계속 추친] ◦대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 사전 타당성조사		100
	2025	◦ 자동차 대체부품 개발 및 활성화사업 추진 ◦ 대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 사전 타당성조사		100
	2026	◦대체부품 글로벌 전진기지 조성사업 추진	- 개발 및 생산기업 집적화단지 조성 - 품질인증센터 구축 - 물류 및 유통단지 조성 - 개발지원 및 종합 비즈니스 센터 구축	100
임기후
				100