3-10		친환경 전기차 생태계 조성 확대

부서명	일자리정책과	과장	한유자	계장	김소영	담당자 (전화번호)	홍상은 (454-4352)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
		◯	◯		◯		◯		21,250

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2022~2026	□ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 전북 군산형 일자리를 통해 2024년까지 누적 32만대 전기차 생산

❍ 전기차 전문인력양성 및 협업센터 구축을 통해 전후방 연관기업과의 전기차 생태계 조성

	< 전북 군산형 일자리 >
￭ 사업목적 : 중견, 중소기업의 수평계열화를 통한 전기차 클러스터를 조성하여 노사간, 원하청간 상생을 도모하며 양질의 일자리 창출 ￭ 참여기업 : 전기완성차 업체 3개사, 부품업체 1개사 * ㈜명신, 에디슨모터스㈜, ㈜대창모터스, ㈜코스텍 ￭ 투자/생산 : ‘24년까지 총 5,412억 원 투자하여 누적 32만대 전기차 생산 ￭ 고용계획 : ’24년까지 1,714개의 일자리 창출 목표

□ 사업개요

[중견중소 전기차 관련 협업기반 구축]

❍ 사업기간 : 2021. 4월 ~ 2024. 12월

❍ 사 업 비 : 200억원 (국 99.8, 도 49.9, 시 49.9, 민 0.4)

- 공사비 : 50.4억, 시설부대비 6.6억, 장비구축 112.4억, 운영비 30.6억

❍ 사업내용 : (건축) 엔지니어링 및 안전성공간 구축, (장비) 구축, 역량강화 운영

[지역맞춤형 전기차 클러스터 전문인력양성]

❍ 사업기간 : 2021. 3월 ~ 2026. 2월

❍ 사 업 비 : 1,250백만원(연 250백만원)

❍ 사업대상 : 석·박사 과정 핵심연구인재 (연 10인 이상)

❍ 사업내용 : 전기차 산업을 주도할 기업맞춤형 핵심전문인력 양성 지원

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 완성차-부품사 협업 가치사슬 구축을 통한 전기차 생태계 조성

❍ 지역인재양성 → 맞춤형 취업연계 → 일자리 선순환

[추진프로세스]

1단계 (‘22~’23)		2단계 (‘24~’25)		3단계 (‘26~)
전기차 중견중소 협업기반 구축		친환경 미래차 생태계 구축 (완료후 계속 추진)		지속적인 사업추진 및 성과평가

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ 산업부 산업혁신기반구축사업 공모 선정(2021. 4. 22)

❍ 연차별 국도비 확보 및 지방보조금 심의 자체예산 확보 노력

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기 후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	21,250	4,180	17,070	8,490	4,660	3,670	250	-	-
국비	9,980	1,920	8,060	3,080	3,000	1,980	-	-	-
도비	4,990	1,000	3,990	2,575	700	715	-	-	-
시비	6,240	1,250	4,990	2,825	950	965	250	-	-
기타	40	10	30	10	10	10	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진			◦ 중견, 중소 전기차 관련 생산기업 유치 ◦ 상생형 지역일자리 지정	(누적)
임기내	2022		◦ 참여기업 생산설비 구축 및 가동 ◦ 중견·중소 전기차 기업 Value Chain 연계 강화	20
	2023		◦ 중견·중소 협업기반 구축 ◦ 연 10만대 전기차 양산체제 구축	50
	2024		◦ 전후방기업 연계를 통한 전기차 생태계 구축 ◦ 전기차 전문인력 양성 – 맞춤형 취업 연계 - 일자리 선순환	90
	2025		◦ 친환경 전기차 생태계 조성 확대	100
	2026
임기후