3-20		군산 수제맥주·청주 창업 및 복합문화공간 조성

부서명	먹거리정책과	과장	김선주	계장	황성필	담당자 (전화번호)	이선우 (454-5252)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
	◯			◯	◯		◯		9,890

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2023~2025	□ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 군산 수제맥주 공동이용 양조장 및 군산청주 양조장 증설

❍ 수제맥주·청주와 연계한 근대항구 선창가를 로컬 복합문화공간으로 조성

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 군산 째보선창 및 내항 일원

❍ 사업기간 : 2023~2025

❍ 사 업 비 : 8,490백만원(국비 6,000, 시비 2,490)

❍ 사업내용

- 군산 수제맥주 및 청주 공동양조시설 구축

- 군산 수제맥주 및 청주 청년 창업가 육성

- 군산 청주 레시피 개발 및 양조공정 표준화

- 수제맥주·청주를 연계한 내항 일원 복합문화컨텐츠 공간 구성

- 군산 수제맥주 & 블루스 페스티벌 개최 및 전국화

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 군산의 술산업 스토리를 복원하고 지역 농산물을 활용한 양조창업 육성

❍ 지역적 독창성으로 차별화된 군산술 복합 문화컨텐츠 모델 구축

[추진프로세스]

1단계 (‘22~’23)		2단계 (‘24~’25)		3단계 (‘26~)
부지선정, 양조시설 설계 및 기본계획수립		사업추진 (완료후 계속 추진)		제품 생산 및 군산술 복합문화컨텐츠 육성

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ 신규 국비사업 신청 및 공모를 통한 예산확보

- ‘24 ~ ‘25년 한국 술산업 육성사업 8,000백만원(국 6,000, 시 2,000)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	9,890	1,400	8,490	-	490	4,000	4,000	-	-
국비	6,600	600	6,000	-	-	3,000	3,000	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	3,290	800	2,490	-	490	1,000	1,000	-	-
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		◦군산맥주 공동양조장 구축 ◦군산맥주 체험판매장 조성 ◦군산맥주 청년창업가 육성	- 군산맥주 소규모 공동양조장 구축 - 군산맥주 4개업체 창업 육성 - 군산맥주 판매장 ‘비어포트’운영 - 군산 수제맥주 페스티벌 운영	(누적)
임기내	2022	◦ 추진계획 수립 ◦ 예산확보	- 사업 구체화를 위한 연도별 계획 수립 - 제1회 군산 수제맥주 페스티벌 개최	20
	2023	◦ 군산 맥주, 청주 공동양조장 구축 계획 수립	- 군산맥주 제2 공동양조장 및 청주 양조장 기본설계 - 제2회 군산 수제맥주 페스티벌 개최	50
	2024	◦ 실시설계 및 착공 ◦ 청년창업인력 육성	- 군산맥주 제 2 공동양조장 및 청주 양조장 착공 - 공동 양조장비 발주 및 계약 - 맥주,청주 양조기술교육 - 제2회 군산 수제맥주 페스티벌 개최	80
	2025	◦ 공동양조장공사 준공 ◦ 공동 양조장비 설치 ◦ 청년창업인력 육성	- 맥주 및 청주 공동양조장비 설치 - 양조장비 시험운영 및 시제품 제작 - 입주 창업가 선정 및 창업기술교육	90
	2026	◦ 제품생산 및 운영	- 군산 맥주,청주 마케팅 및 판로확보 - 관련 박람회,전시회 홍보관 운영 등	100
임기후		◦군산맥주, 청주 복합 문화컨텐츠로 육성	- 내항 일원 군산맥주, 청주와 연계한 복합문화컨텐츠 조성