4-1		고군산 해양레저복합단지 조성

부서명	항만해양과	과장	이은호	계장	이상민	담당자 (전화번호)	송빛나 (454-2813)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
		◯	◯		◯		◯		41,690

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2019~2024	■ 설명회·공청회 ■ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 고군산군도의 다양한 해양자원을 활용한 통합 관광인프라 조성

❍ 해양레저시설 확충을 통한 관광수요 창출로 지역경제 활성화 도모

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 옥도면 무녀도리 산65번지 일원

❍ 사업기간 : 2019년 ~ 2024년

❍ 사 업 비 : 41,690백만원(국 19,345 도 5,532 시 16,813)  *토지보상비(시비) 포함

❍ 사업규모 : 부지면적 64,365㎡(단지 59,674㎡ 진입도로 4,691㎡), 건축 2동

❍ 사업내용 : 해양레저체험, 산림휴양, 기반시설 등 복합단지 조성

- 오션에비뉴(다이빙, 서핑, 해양테마파크), 오션테라스(인피니티풀), 인공파도풀, 레저레이크(카누‧카약), 숲속캠핑장, 숲속쉼터 및 락가든, 모험형 놀이시설 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 새만금 관광레저용지의 입지적 특성 및 해양관광 SOC 사업의 특성을 고려하여 지역을 대표하는 해양레저체험 및 산림휴양 복합단지 조성

❍ 전 연령대를 아우르는 여가경험 문화를 제공하고, 고군산군도 천혜의 해양자원 활용하여 경쟁력 있는 친환경 관광명소 확보

[추진프로세스]

1단계 (‘19~’22)		2단계 (‘23~’24)		3단계 (‘24. 12.~)
사업계획 수립 및 세부설계, 인허가		본공사 시행		사업 완료 및 시설 운영

□ 재정투자계획

[예산확보 방안]

❍ 2022년 해양레저관광거점사업 국고보조금 교부신청

(국 5,060 도 1,518 시 3,542)

❍ 2022년 제2회 추경예산 편성 (토지보상비 시비 3,000)

❍ 2023년 국고보조금 가내시 알림 (국 3,795 도 1,138.5 시 2,656.5)

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	41,690	13,400	28,290	13,120	7,590	7,580	-	-
국비	19,345	6,700	12,645	5,060	3,795	3,790	-	-
도비	5,532	1,710	3,822	1,518	1,138	1,166	-	-
시비	16,813	4,990	11,823	6,542	2,657	2,624	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		◦ 사업계획 승인 ◦ 사업시행자 지정 ◦ 지방재정 중앙투자심사 ◦ 통발개발계획 승인 신청 ◦ 진입도로 공사 착공	- 사업계획 승인(해수부) - 군산시 사업시행자 지정(새만금청) - 지방재정 중앙투자심사 완료(행안부) - 통합개발계획 승인 신청(시⟶새만금청) - 진입도로 시행계획 승인 및 공사 착공	30
임기내	2022	◦ 환경영향평가 등 관계기관 협의 및 심의 ◦ 설계의 경제성 검토(VE) ◦ 사업시행계획 승인 ◦ 새만금 용도별 통합 개발계획 승인	- 환경영향평가, 도시계획 등 관계기관 협의 - 사업인정 의제 협의 및 심의(중토위) - 설계의 경제성 검토(VE) - 새만금개발 통합심의(새만금청) - 새만금위원회 심의(국무조정실) - 사업시행계획 승인(전북도) - 새만금 용도별 통합개발계획 승인·고시(새만금청)	50
	2023	◦ 본공사 시행	- 토목, 건축, 기계, 전기 등 공사 시행	70
	2024	◦ 공사 준공 ◦ 시설운영계획 수립 및 시설 운영(`24.12.~)	- 해양레저 복합단지 준공 예정 - 시설운영계획 수립 및 시설 운영 (`24.12.~)	100
	2025
	2026
임기후