5-10		월명공원 맨발 황톳길 조성

부서명	산림녹지과	과장	신남철	계장	노남섭	담당자 (전화번호)	김영아 (454-2952)

사업구분	사업유형		시행주체		완료시기		예산구분		총사업비 (백만원)
	신규	계속	국가	자체	임기내	임기후	예산	비예산
	◯			◯	◯		◯		300

추진사항	사업기간	시민소통방법
	2023	□ 설명회·공청회 □ 전문가 자문 □ 만족도 조사 ■ 언론·보도·기타

□ 추진목표

❍ 황톳길 조성으로 시민들의 건강을 증진하고, 월명공원에 관광요소를 더하여 군산시 관광 진흥 이바지

□ 사업개요

❍ 사업위치 : 월명공원

❍ 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.

❍ 총사업비 : 300백만원(조성비 240백만원, 보수 및 유지관리 비용 60백만원)

❍ 조 성 비 : 240백만원(㎡당 50천원)

❍ 사업내용 : 황톳길 4,800㎡(L=1.2km, B=4m), 세족장 조성 등

□ 쟁점사항

❍ 월명공원 내 기존 포장 산책로를 이용한 황토길 조성 시 포장 산책로 철거 등에 따른 예산 과다 소요 및 기존 탄성포장 산책로 선호 이용자의 반대 민원 유발

❍ 신규 습식 황톳길 조성 시 유지관리의 어려움 및 안전사고 초래

⇒ 황토보충, 관수 작업, 나뭇가지 등 이물질 제거 필수, 관리인원 상주 등

⇒ 나뭇가지 찔림 및 습식의 특성으로 미끄러움 발생(낙상사고) 등

□ 추진 로드맵

[추진방향]

❍ 습식 황톳길의 성질 특성상 조성 및 관리방안의 어려움으로 건식 추진

❍「월명호수 무장애나눔길 조성사업」 구간 중 황톳길 조성 구간을 대상지로 선정

[추진프로세스]

1단계 (’23.1. ~ 3.)		2단계 (‘23.4. ~ 12.)		3단계 (‘24.~)
조성 계획 수립 (설계용역, 조성 위치 검토 및 선정)		사업추진		지속적인 유지관리

□ 재정투자계획

[연도별 재정투자 계획]

(단위 : 백만원)

재원별	총 계	기투자	임 기 내						임기후
			소계	'22	'23	'24	'25	'26
계	300	-	270	-	240	10	10	10	30
국비	144	-	144	-	144	-	-	-	-
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	156	-	126	-	96	10	10	10	30
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	-

□ 연도별 목표 및 추진 계획

연 도 별		목 표	추 진 내 용	이행률
기 추진		◦ 공약사업 검토	- 우수 조성사례 및 유지관리방안 수집	(누적)
임기내	2022	◦ 조성 사례 답사 ◦ 조성 위치 선정	- 답사를 통한 사업 시행 전 유념 사항 및 유지관리 쟁점 사항 파악	20
	2023	◦ 용역 추진(발주)	- 월명호수 무장애나눔길 조성사업 실시설계용역	50
		◦ 용역 추진(준공) ◦ 공사 착공	- 용역완료보고 추진 및 용역 준공 - 월명호수 무장애나눔길 조성사업 착공	80
		◦ 공사 준공 ◦ 시설운영계획 수립	- 황톳길 조성사업 준공(보도자료) - 유지관리 계속사업 수립(공원계)	90
		◦ 유지 및 관리운영	- 황톳길 및 부대시설 유지관리 등 실시	100
임기후		◦ 지속적인 관리	- 황톳길 및 부대시설 유지관리 등 실시